Spisový znak:	56.2
Skartační znak/lhůta: V/5

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. OI-PRIPI/SOD/001479/2020/Koc
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo smlouvy zhotovitele: 	Číslo smlouvy objednatele: OI-PRIPI/SOD/001479/2020/Koc	
A Název akce: Florykova, Vahalíkova – rekonstrukce komunikace a IS	Org: 26013	

		uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

  1. Objednatel:	statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc	
  též „příkazce“	IČ: 00299308	DIČ: CZ00299308	
	Zástupci objednatele	
	- ve věcech smluvních:	
	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic Magistrátu města Olomouce 	
	tel.: XXXXXX                                      e- mail: XXXXXXXXXXXXXXX	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	tel.: XXXXXX		e- mail: XXXXXXXXXXXXXXX	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		
	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,	
	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800	

2. Zhotovitel:	Ing. Tomáš Ruth	
též „příkazník“	se sídlem: Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín	
IČ: 87672570	DIČ: XXXXXXXXX		
zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Zlína	
	  	
Zástupci 		
- ve věcech smluvních:	
Ing. Tomáš Ruth	
tel.: XXXXXX		e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX	
- ve věcech technických: 	
Hlavní inženýr projektu:	
XXXXXXXXXXXXXX (autorizovaná osoba v oboru XXXXXXX, č. autorizace XXXXXXXX)	
tel.: XXXXXX		 e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX	
Hlavní projektant:	
XXXXXXXXXXXXXX (autorizovaná osoba v oboru XXXXXXX, č. autorizace XXXXXXXX)	
tel.: XXXXXX		 e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX	
Osoby spolupracující:
XXXXXXXXXXXXXX (autorizovaná osoba v oboru XXXXXXX, č. autorizace XXXXXXX), XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX, č. autorizace XXXXXXXX)
	
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX	
č. účtu: XXXXXXXXXXXX	

II.
Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Předmětem uzavření Dodatku č. 2 je změna čl. VI. Termín plnění smlouvy a Dodatku č. 1. 

V souvislosti s přeložkou nadzemního vedení kabeláže společnosti CETIN a.s. je třeba společnosti CETIN a.s. doložit podpisy se souhlasem stavby a změnou přípojky jednotlivých dotčených vlastníků připojovaných objektů, což požaduje také stavební úřad k vydání společného povolení. Vlastníci připojovaných objektů byli s žádostí o udělení souhlasu obesláni zhotovitelem doporučeným dopisem. Jelikož není znám termín získání výše uvedených písemných souhlasů, které je nutné doložit také stavebnímu úřadu k získání společného povolení, je třeba prodloužit termíny uvedené v článku VI. Termín plnění dle tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se tedy mění následující články smlouvy: 
VI. Termín plnění

VI.
Termín plnění

Dodatkem č. 2 se Termín plnění čl. VI. odst. 1 výše uvedené smlouvy a následujícího Dodatku č. 1 upravuje následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do: 

a)	Projektová dokumentace pro společné povolení vč. dokladové části do:		
ihned po podepsání souhlasu s provedením přeložky posledním vlastníkem dotčeným přeložkou SEK Cetin
b)	Podání žádosti o vydání společného povolení do:				
ihned po podepsání souhlasu s provedením přeložky posledním vlastníkem dotčeným přeložkou SEK Cetin
c)	Projektová dokumentace DPS do:						
30 dní od podání žádosti o vydání společného povolení vč. kompletní dokladové části
d)	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do:	
30 dní od podání žádosti o vydání společného povolení vč. kompletní dokladové části

Předání kompletního předmětu smlouvy do:	
30 dní od podání žádosti o vydání společného povolení vč. kompletní dokladové části

Závěrečná ustanovení
		 
1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:  	Ve Zlíně dne: 	

Objednatel	Zhotovitel	

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic Magistrátu města Olomouce
statutární město Olomouc	
Ing. Tomáš Ruth