Smlouva o dílo 
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 
I. Smluvní strany: 
Zhotovitel: RH stavby s.r.o. 
Borečnice 13 
397 01 Čížová 
Bankovní spojení: Fio banka č.ú.: 2100872374/2010 
zastoupena jednatelem Tomášem Růžičkou 
IČO: 04435681 
DIČ: CZ04435681, plátce DPH 
Tel.: 722963053 
Objednatel: Název/jméno: Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun 
Sídlo/bydliště: Pod Homolkou 1601, 266 01 Beroun 
Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 1012775/0300 
Zastoupen: Mgr. Jitkou Haklovou, funkce: Ředitelka školy 
IČO: 00498653 
neplátce DPH 
II. Vymezení díla, předmět plnění 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele dílo - stavbu: Opravu oplocení kolem MŠ Pod Homolkou 1601 v Berouně 
v rozsahu: jižní a severní strana + 2 branky na severní straně. 
2. Rozsah díla, které Zhotovitel pro Objednatele provede, je určen takto: stávající drátěné 
oplocení kolem areálu MŠ Pod Homolkou na jižní a severní straně se demontuje a bude 
nahrazeno novými ocelovými poli, výšky 1,6 m najižní straně a výšky 1,40 m na severní straně, 
které budou opatřeny svislými prvky, pohledový návrh vychází z typového plotu PORTLAND. 
Délka tohoto plotu bez branek je určena stávajícím oplocením areálu MŠ na jižní a severní 
straně. 
Součástí díla bude výměna 2 ks branek na severní straně, kde funkce a rozměr těchto prvků 
bude stejná jako u stávajících. Výška těchto prvků bude korespondovat s nově namontovaným 
plotem Nové oplocení bude opatřeno antikorozním antracitovým nátěrem. Stávající betonová 
podezdívka bude opravena. Zhotovitel zabezpečí areál MŠ při provádění díla provizorním 
oplocením proti vniknutí cizích osob. 
3. Dílo podle této smlouvy je zhotovováno na pozemku okolo areálu MŠ Pod Homolkou v 
Berouně, který je ve vlastnictví objednatele - zhotovovaná věc je tedy ve vlastnictví Objednatele. 

Smlouva o dílo 
4. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést uvedené stavební práce na 
výše uvedené stavbě v Berouně a předat je Objednateli. Objednatel se zavazuje poskytnout 
potřebnou součinnost, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a podmínkami provádění stavby a 
prohlašuje, že žádná ze skutečností, které při tomto seznámení zjistil, neznemožňuje řádné, 
včasné a úplné provedení díla. 
III. Termín zhotovení, součinnost objednatele 
1. Převzetí staveniště: 26. 3. 2021 
Zahájení zhotovení díla: 26.3. 2021 
Dokončení díla: 12.6.2021 
2. Povětrnostní a klimatické vlivy, s rumrz se v době sjednání této smlouvy nemohlo 
uvažovat, a které znemožňují provádění díla, jsou dle dohody smluvních stran důvodem 
k prodloužení termínu dokončení díla o příslušný počet klimaticky pro zhotovování díla 
nevhodných dnů, prodloužení musí být písemně odsouhlaseno oběma smluvními stranami ve 
stavebním deníku zápisem. 
3.	Objednatel je povinen při zhotoviteli poskytnout součinnost a opatřit věci k provedení díla 
v následujícím rozsahu: poskytnout zhotoviteli elektrickou energii, vodu, možnost úschovy 
materiálu a nářadí a případně přístup na sociální zařízení. 
4.	Části díla (stavby) zajišťované Objednatelem nebo jím zjednanými osobami: 
V době podpisu smlouvy nejsou. 
5. V případě prací a podkladů nezajišťovaných Zhotovitelem se Objednatel zavazuje 
provést a dodat je včas tak, aby nedocházelo k prodlení s prací Zhotovitele a nedodržení 
řádného termínu dokončení. Zhotovíte I není v prodlení s plněním svého závazku po dobu, po 
kterou jej nemohl plnit z důvodů na straně Objednatele. Tato překážka v plnění zhotovitele 
a doba jejího trvání budou uvedeny ve stavebním deníku s přesným označením důvodu i 
vymezením doby trvání. 
IV. Cena díla, platební podmínky 

Cena díla: 
BezDPH21% 
DPH21% 
Celkem vč. DPH 

413.000,- Kč 
86.730,- Kč 
499.730,- Kč 

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době realizace. 
2 

Smlouva o dílo 
I.	Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 
Sjednaná cenaje platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. 
4. Podmínky pro změnu ceny: 
4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 
4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde 
ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné skutečnosti, zejména potřeba 
provést k úplnému dokončení díla podle smlouvy práce výkony a dodávky, které 
nebyly obsaženy ani v jednotkových stavebních rozpočtech ani ve zpracovaném 
výkazu výměr, tj. které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani 
v době uzavření smlouvy nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 
5. Způsob sjednání změny ceny 
5.1. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna ceny bude dohodnuta a odsouhlasena Objednatelem. 
	5.2. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna 	bude 
odsouhlasena Zhotovitelem. 
5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí Objednateli nebo jím určenému zástupci (technický dozor) nutnost překročení 
sjednané ceny za dílo a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
6.	Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje -Ii zhotovitel dle 
předchozího zvýšení ceny podle rozpočtu o více než 10 %. V tomto případě je Objednatel 
povinen nahradit zhotoviteli část ceny díla odpovídající rozsahu skutečného provedení díla. 
7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování 
7.l. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednatel 
k odsouhlasení. Vícepráce či Méněpráce nesmí být zahájeny, dokud o nich nerozhodne 
Objednatel. 
7.2. Mezi Vícepracemi a Méněpracemi vzniká příčinná souvislost, která zakládá 
3 

• 

Smlouva o dílo 
možnost vzájemného zápočtu. 
7.3. Vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu Víceprací, doplní Zhotoviteljednotkové ceny 
ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů, a pokud v nich práce a 
dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny, které 
budou stanoveny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS Praha a.s. popř. 
jiného vhodného ceníku používaného ve stavebnictví v případě, že ani ceník URS 
nebude danou položku obsahovat, pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány; 
b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady V íceprací; 
c) k základním nákladům Víceprací dopočte Dodavatel přirážku na podíl 
vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových 
rozpočtech; 
7.4. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových 
rozpočtů; 
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady Méněprací; 
c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech; 
7.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě. 
8. Před zahájením stavebních prací nebude Zhotoviteli poskytnuta žádná záloha. 
9. Provedené práce má Zhotovitel právo účtovat měsíčně za každý kalendářní měsíc zhotovování 
díla dle skutečně provedených prací a vynaložených nákladů (právo na přiměřenou část odměny 
s přihlédnutím k vynaloženým nákladům § 2611 obč. zákoníku) nebo po ukončení investičního 
celku po souhlasném vyjádření smluvních strany ve stavebním deníku. Případné námitky 
k vyúčtování může Objednatel uplatnit do sedmi kalendářních dnů po doručení k odsouhlasení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí a Zhotovitel má právo vystavit fakturu se splatností 
14 dnů. 
10. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými 
právními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Faktura bude obsahovat tyto náležitosti: 
a)	označení faktury ajejí číslo 
b)	název, sídlo a adresu objednatele 
c)	název, sídlo a adresu zhotovitele 
d)	identifikační číslo objednatele a zhotovitele 
e)	předmět plnění, zdanitelné plnění 
f)	den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti 
g)	označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, na který má být plněno 
h)	cena fakturovaných dodávek, prací a služeb (bez a včetně DPH) 
4 

Smlouva o dílo 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené platnými právními 
předpisy a ustanoveními této smlouvy, vrátí ji objednatel do dvou dnů od tohoto 
zjištění zhotoviteli k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě počíná běžet dnem 
doručení přepracované faktury objednateli. 
II. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací v členění a v cenách dle nabídkového 
rozpočtu, popř. v cenách víceprací a méněprací určených dle předchozích ujednání této smlouvy. 
12. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či 
stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z 
důvodů nedostatku finančních prostředků toto právo využít, nemá Zhotovitel vůči Objednateli 
žádné jiné ani finanční nároky plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení stavby, 
vyjma úhrady za provedené práce k datu přerušení či ukončení stavby ve 100 % výši včetně 
nákladů na již zakoupený či závazně objednaný materiál. Proplacený materiál se v tomto případě 
stává majetkem Objednatele. 
V. Součinnost Objednatele a Zhotovitele 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost při napojení na zdroj energií, tj. elektřiny a 
vody a dodat elektřinu a vodu požadovanou Zhotovitelem nezbytné pro zhotovení díla na své 
náklady. Zároveň bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti lze považovat za porušení 
smluvních povinností. Odpovídající součinnost při realizaci díla se zavazují vytvořit obě 
smluvní strany. 
VI. Podmínky zhotovení díla 
1.	Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v řádné kvalitě v souladu s požadavky Objednatele a touto 
smlouvou. 
2.	Objednatel je oprávněn určit osobu, která po dobu zhotovování díla bude pro Objednatele 
vykonávat funkci technického dozoru a bude oprávněná se za Objednatele účastnit kontrolních 
dní, činit zápisy do stavebního deníku a kontrolovat plnění povinnosti Zhotovitele z této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou dozorem jednostranně změnit. Je však 
povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku. 
3.	Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na stavbě a zavazuje se odstranit na své náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 
4.	Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu 
zdraví vlastních pracovníků, subdodavatelů a ostatních osob nacházejících se na staveništi po 
celou dobu realizace stavby a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci. 
5.	Zhotovitel bude Objednatele pravidelně informovat o svých činnostech a bude se zúčastňovat 
koordinačních porad a jednání organizovaných objednatelem. Pravidelné koordinační porady, 
popř. i kontrolní dny stavby bude Objednatel organizovat dle potřeby minimálně I x za 14 dní. 
6.	Zhotovitel se zavazuje nesdělovat třetím osobám důležité informace o předmětné stavbě, 
zejména o jejích technických a bezpečnostních systémech. 
7.	Zjišťovací protokol za práce provedené v měsíčním období musí obsahovat samostatný soupis 
prací dle nabídnutého rozpočtu a samostatný soupis odsouhlasených víceprací. 
5 

Smlouva o dílo 
VII. Předání díla a převzetí díla 
I.	Dílo specifikované v čI. II této smlouvy bude předáno Objednateli za smluvenou cenu bez vad 
a nedodělků. 
2.	Termín zahájení přejímacího řízení bude sdělen Zhotovitelem Objednateli nejméně 7 
kalendářních dnů předem. Navrhovaný termín jsou obě zúčastněné strany povinny neprodleně 
potvrdit nebo dohodnout jiný termín předání a převzetí díla, nejdéle však do 5 dnů po 
navrhovaném termínu. Smluvní strany dohodnou při zahájení přejímacího řízení postup a 
program přejímání díla. 
3.	Objednatel přizve k přejímacímu řízení projektanta, zhotovitel přizve k přejímacímu řízení 
subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému odevzdání a převzetí díla. 
4.	Nebude-li dílo řádně zhotoveno, nebude objednatelem převzato. Objednatel však nemá právo 
odmítnout převzetí díla, jestliže dílo má ojedinělé drobné vady a nedodělky, jež samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel odstraní tyto vady a nedodělky bezplatně, tj. v 
rámci ceny za dílo, v termínech uvedených v přejímacím protokolu. Dílo je zhotoveno řádně 
až po odstranění všech těchto vad a nedodělků. Do odstranění těchto drobných vad a 
nedodělků nemusí objednatel platit část ceny za zhotovení díla odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu. 
5.	Předání a převzetí předmětu smlouvy bude provedeno protokolárně v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Pokud je dílo provedeno bez 
závad a v souladu s projektovou dokumentací, je Objednatel povinen dokončené dílo převzít. 
Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je povinen v protokolu o předání a převzetí díla uvést 
důvody, které ho k tomuto rozhodnutí vedly, důvody musí být v souladu s platnými zákony a 
předpisy. 
6.	Závazek Zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným, včasným a úplným dokončením a 
předáním díla dle předchozího odstavce tohoto článku. 
VIII. Záruka za dílo 
I.	Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno kvalitně a dle požadavků Objednatele. Na 
provedené práce a dodávky poskytuje Zhotovitel záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí 
stavby. 
2.	Odpovědnost za vady díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny jinými osobami a 
nezpůsobil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí svůj závazek plnil. 
3.	Odpovědnost za skryté vady stavby se řídí ustanovením § 2629 Občanského zákoníku bez 
odchylek. 
4.	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. 
5.	Zhotovitel je povinen nastoupit u Objednatele k odstranění reklamované vady díla neprodleně, 
nejpozději však do 30 dnů od jejího nahlášení objednatelem s tím, že o rozsahu a způsobu 
6 

Smlouva o dílo 
odstranění vady informuje objednatele. Postup dle tohoto, ustanovení bude přizpůsoben 
klimatickým podmínkám. 
IX. Odpovědnost za škody a přechod vlastnictví k dílu 
	1. 	Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel (viz čI. II. 2.). 

2. 

Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese od 
počátku zhotovování díla Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
Zhotovitelem a Objednatelem. 

mezi 

3.	Zhotovitelje povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností při zhotovování 
díla včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 
	4. 	Vyšší moc 
4.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na zhotovování díla a dílo, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod. 
4.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
	moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 	dnem 
doručení oznámení. 
X. Smluvní sankce 
	1. 	Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti Termínu předání a převzetí díla 
sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení. 
1.2. Prodlení Zhotovitele oproti Termínu předání a převzetí díla sjednaného 
dle Smlouvy delší jak 28 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
	2. 	Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, najejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 
2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichžje v prodlení a za každý den prodlení. 
7 

Smlouva o dilo 
	3. 	Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
třiceti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
500,- Kč za každou reklamovanou vadu, najejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení. 
3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
3.3. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
	sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši, než shora 	ujednáno. 
	4. 	Sankce za nevyklizení staveniště 
4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení. 
	5. 	Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 
5.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 20 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 
	6. 	Způsob vyúčtování sankcí 
6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 
	sankce. 	. 
6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode 
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 
6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně, ve 
sjednané lhůtě, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 
6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na 
vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty se nárok na 
zaplacení sankce promlčuje - v tomto směru strany sjednávají zkrácenou promlčecí lhůtu 
dle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 
	7. 	Lhůta splatnosti sankcí 
8 

Smlouva o dílo 
7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce straně oprávněné nejpozději do 
čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
	8. 	Omezení celkové výše sankcí 
8.1. Objednatel a Dodavatel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok 
z prodlení) uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 15 % z celkové 
sjednané ceny díla. 
8.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody způsobené mu porušením povinnosti Dodavatele, na niž se sankce vztahuje. 
XI. Ostatní ujednání 
1.	Zhotovitel je povinen vést v souladu se skutečností stavební deník Veškeré změny budou 
konzultovány s Objednatelem a řešeny formou zápisu do stavebního deníku. Zápis musí být 
oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. 
2.	Objednatel má právo od smlouvy odstoupit tehdy, nesplní-li Zhotovitel sjednané termíny, 
neprovádí-Ii práce dle požadavků Objednatele nebo v odpovídající kvalitě. Zhotovitel má 
právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud Objednatel neposkytne řádně a včas dohodnutou 
součinnost při realizaci prací a toto neposkytnutí součinnosti Objednatele je rozhodující 
příčinou vzniku prodlení Zhotovitele. Zhotovitel má v tomto případě nárok na úhradu 
provedených prací, nezabudovaných materiálů a účelně vynaložených nákladů, které nemůže 
Zhotovitel prokazatelně upotřebit jiným způsobem či najiné stavbě. 
3.	Smluvní strany považují informace a jednání vyplývající z činnosti smluvních stran dle této 
smlouvy za důvěrné. 
4.	V případě sporu z odpovědnosti za vady a hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, nebo jeho 
části se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty ČVUT nebo 
soudního znalce určeného po vzájemné dohodě smluvních stran. V případě, že bude tímto 
posudkem prokázáno snížení jakosti kvality, provede zhotovitel na svůj náklad opravu díla do 
stavu odpovídající jakosti. V případě, že nebude možné takovou opravu provést, zavazuje se 
zhotovitel k poskytnutí slevy z ceny díla ve výši vyjádřené rovněž v příslušném posudku. 
XII. Závěrečné ujednání 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel, 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovite!. 
9 

V Berouně dne: olt. g r 
Za objednatel : 

Smlouva o dílo 

RH stavby s.r,o, 'Q) 
Borečnice 1$, 397 01 Písek 
I~O: 044 35681 DIť2: C1044356!31 
fl,r, C 24;1.a~ y KS 'ti ~, QbfElěJévi(í~h