Last saved by: HP

O B J E D N Á V K A | číslo :  41

| Objednatel | IČO: | 00074276 | DIČ: | CZ00074276
| | | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
| nám. Krále Jiřího z Poděbrad |
| 350  02  Cheb | | Dodavatel | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105
| | | ZIP o.p.s.
| Bankovní spojení | KB Cheb | |
| Číslo účtu | Anonymizováno | | | Tomanova 3-5
| | | 301  00  Plzeň
Objednáváme: |
u Vás:
technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě: "Rekonstrukce vnitroboku Hradební - Dlouhá" v k. ú.
Chebu.
místo:
město Cheb, ppč. 252/2; 252/3 v k. ú. Chebu
druh a rozsah požadovaných činnosti:,
výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství
3x archeologický dělník na 13 dní
1x dokumentátor  na 13 dní
předpokládaná výměra:
předpokládaný rozsah exkavovaných souvrství je 34m?
zahájení a předpokládaný termín dokončení:
zahájení 19. 4. 2021
dokončení 5. 5. 2021
harmonogram:
1. - 10. den: výkopové práce v jednotlivých sondách, které jsou průběžně dokumentovány, vybírání a třídění
nálezů, označení stratigrafických situací
11-13. den: dokončení kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, kresebná, měřičská)
14. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy
předávaného materiálu
Cena: 69463,68,-Kč včetně DPH
Žadatel:            Anonymizováno
Příkazce operace:   ing. Martina Kulová
Správce rozpočtu:   Anonymizováno
| V  Chebu
| Dne : | 15.04.2021
| Vyřizuje : | Anonymizováno
| Telefon : | Anonymizováno
| E-mail: | Anonymizováno
| Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu