Smlouva o dílo č. 21 009
uzavřená na dodávku stavebně montážních prací 
I.	Smluvní strany
Objednatel:
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362/15
500 06 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva
DIČ: CZ25282174
IČO: 25282174
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, č.ú.: 5307-511/0100
zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:
ENERGOSTAV, spol. s r. o. 
Letecká 2863
530 02 Pardubice
zastoupená: Ing. Jiřím Vychytilem - ředitelem společnosti
DIČ: CZ45538298
IČO: 45538298
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 835446561/0100 KB Pardubice
zápis v OR KS HK, oddíl C, vložka 1783

II.	Předmět smlouvy

Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje dodat a objednatel se zavazuje odebrat a uhradit soubor prací, dodávek a služeb pro realizaci stavby (dále jako dílo):

„Oprava teplovodu PS B20 Herbenova v Hradci Králové"

Předmětem díla je montáž a demontáž rozvodů ÚT a TeV v ulici Herbenova v Hradci Králové.

Potrubí vč. všech komponent dodá objednatel. Zhotovitel zajistí složení potrubí z kamionu na stavbě.
Předmětem díla nejsou stavební práce ani geodetické zaměření díla. Zhotovitel předá pro geodetické zaměření veškeré potřebné doklady. 

Místem provedení díla je Hradec Králové, ul. Herbenova.

III.	Termíny plnění
Dílo bude realizováno v těchto termínech:
									
III.1.	Předání staveniště zhotoviteli a složení potrubí na stavbě, 
zahájení demontážních a montážních prací				14.6. 2021			 

III.2.	vykládka materiálu						14.6.2021		   	 	
montáž ÚT						   	14.6.2021 – 25.6.2021	
zprovoznění ÚT							24.6.2021
montáž TeV						     	28.6.2021 – 2.7.2021
zprovoznění TeV						30.6.2021

III.3. 	Dokončení díla, předání stavby			    	              2.7. 2021			  

IV.	Cena díla

Cena díla je stanovena dle nabídky zhotovitele ze dne 18.2.2021, je pevná a konečná v době plnění a činí celkem:

CELKEM					255 000,- Kč bez DPH

V ceně nejsou stavební práce ani stavební přípomoce a geodetické zaměření skut. provedení. 
V ceně je demontáž stávajících rozvodů včetně kompletních likvidace (zejména tepelných izolací).
Při fakturaci stavebních a montážních prací bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

Číselné zařazení v klasifikaci CZ-CPA:  42.21.22

Cenová nabídka formou přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.
Zhotovitel souhlasí, že pokud se během realizace díla stane nespolehlivým plátcem a dále by objednavatel mohl naplnit podmínky §109 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/1994 Sb. v pozdějších znění, bude úhrada díla provedena zhotoviteli bez příslušné daně vyčíslené na daňovém dokladu. Tuto daň objednavatel zaplatí a odvede příslušnému finančnímu úřadu za zhotovitele.
Pokud tato skutečnost nebude objednavateli známa a bude provedena úhrada daňového dokladu včetně DPH, bude objednavatel po zhotoviteli požadovat vrácení daně, kterou musel uhradit za zhotovitele.
Zhotovitel souhlasí s úhradou nákladů právně souvisejících objednavateli v případě vzniklé na základě této skutečnosti.

V.	Financování a placení

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu platby:
Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou faktury bude předávací a přejímací protokol
Faktura bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů.
Splatnost faktury je 21 dní po obdržení objednatelem.

VI.	Povinnosti objednatele a zhotovitele

1.	Objednatel předá stavební připravenost zhotoviteli dle dohody.
2.	Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené i mimo pracovní pruh.
3.	Zhotovitel povede během celé realizace montážní deník, ve kterém budou uváděny všechny skutečnosti mající vliv na termín, cenu, kvalitu a rozsah prováděných prací a bezpečnost práce.
4.	Objednatel poskytne upravenou vodu pro tlakovou zkoušku bezúplatně.
5.	Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 3 dny předem zápisem do deníku stavby (případně dopisem nebo faxem).
6.	O předání a převzetí díla sepíší obě strany předávací a přejímací protokol. Součástí předávacího a přejímacího protokolu bude případný soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. V protokole budou zmíněny relevantní zápisy z montážního deníku.
7.	Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení:
-	protokoly o provedení ÚTZ smontovaného potrubí (bude provedeno provozním tlakem)
-	kopie montážního deníku
-	osvědčení o způsobilosti svářečů
-	protokol o proměření alarmu se zákresem
-	povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným ukončením předmětu díla v místě plnění po provedeném úspěšném komplexním odzkoušení, je-li dílo bez vad a nedodělků, v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a ČSN vztahujícím se k dílu.

VII.	Majetkové sankce
1.	V případě nesplnění termínů plnění viz čl. III.2 dle této smlouvy má právo objednatel vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případných vzniklých škod, pokud je škoda vyšší než uhrazená smluvní pokuta.
2.	Za prodlení s odstraněním nedodělků v dohodnutých termínech uhradí zhotovitel objednateli 1000,- Kč za každý den a vadu až do úplného odstranění. Totéž platí i pro odstranění reklamovaných vad v záruce.
3.	Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli 0,1 % z dlužné částky za každý den 
4.	Uhrazení oprávněných smluvních pokut lze provést již v rámci faktury.

VIII.	Zmocnění

a) objednatel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:
ve věcech obchodních:		Ing. Petr Juránek
ve věcech technických:		p. Michal Zvěřina	
b) zhotovitel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:
ve věcech technických:		p. Pavla Kurku
ve věcech výrobních:		p. Pavla Kurku, nebo jím pověřený pracovník

IX.	Zvláštní ujednání  

1.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
3.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4.	Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedena e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
5.	V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednateli. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
6.	Pokud dojde mezi smluvními stranami k jakémukoliv sporu, smluvní strany se pokusí rozhodnout tento spor smírnou cestou. Pokud se případný spor mezi smluvními stranami i přes úsilí vynaložené oběma smluvními stranami o dohodu nepodaří vyřešit smírnou cestou, bude nadále řešen v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze podle je Řádu a pravidel, třemi rozhodci. Každá ze smluvních stran sporu určí jednoho rozhodce a tito rozhodci zvolí předsedajícího rozhodce. Jestliže smluvní strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní do 14 dnů od doručení výzvy druhé smluvní strany, nebo nemohou-li se jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce, jmenuje rozhodce nebo předsedajícího rozhodce na žádost kterékoliv ze smluvních stran sporu předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem konání rozhodčího řízení je Hradec Králové. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozhodčí řízení, včetně ústního jednání, písemných důkazů a korespondence, bude vedeno v českém jazyce. Rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné, pro obě smluvní strany závazné a bude obsahovat výrok o nákladech řízení. 
7.	Tato smlouva přechází na případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny na tuto smlouvu právní nástupce výslovně upozornit a se smluvními povinnostmi seznámit. Tato smlouva je pro právní nástupce závazná
8.	Převzetím díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na objednatele, do této doby náleží vlastnické právo a nebezpečí škody zhotoviteli.
9.	Záruční doba činí na montážní práce 60 měsíců, na materiál dle dodavatelů, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
10.	Předmět díla nebude zprostředkován na další firmu.
11.	Za odpadové hospodářství spojené s činností jednotlivých zhotovitelů na staveništi odpovídá v plné míře vedení přísl. zhotovitele, ve smyslu zák.č. 125/97 Sb.
12.	Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel nevěděl, ani vědět nemusel, které podstatně ztíží nebo znemožní provádění díla, je objednatel povinen projednat návrh zhotovitele na odpovídající změnu smluvního závazku.
13.	Případné vícepráce podmiňující dokončení stavby tak, aby byla funkční, provede zhotovitel proti úhradě při nezměněném termínu dokončení stavby.
14.	Jakékoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo zavazují smluvní strany, jen jsou-li učiněna smluvními dodatky, podepsanými zástupci smluvních stran.
15.	Jakékoliv skutečnosti vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality, a rozsahu díla a ceny jsou povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit.
16.	Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha – Cenová nabídka č.4 ze dne 18.2.2021

V Hradci Králové dne: 21.4.2021

…………………………………………………….				………………………………………………………….
za objednatele:							za zhotovitele:

 Ing. Jiří Seidler, Ph.D.						Ing. Jiří Vychytil
předseda představenstva					ředitel společnosti