Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu 
(dále též jen „objednatel“)

a

STAS, s.r.o. 
Se sídlem: Horská 190, Hořejší Vrchlabí, 543 02 Vrchlabí 
IČ: 48151807 		DIČ: CZ48151807 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupená: Ing. Bedřich Hanousek, jednatel společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3407 
(dále také „zhotovitel") 

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny rozdíly skutečného stavu stavby oproti projektové dokumentaci. V průběhu provádění prací tak byly stranami projednány změnové listy č. ZL01-ZL013, kterými strany dohodly odlišnosti při provádění stavebních prací. Na základě této skutečnosti se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo a tomto dodatku č. 1. 

Èlánek 1.	Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 1.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:
1.1.	Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a na své nebezpečí zajistit pro objednatele stavební práce „ČVUT FA - Rekonstrukce ateliérů Kruh u Jilemnice“ (dále jen dílo). Rozsah díla je vymezen v projektové dokumentaci „Stavební úpravy – Tuláčkův statek, Kruh č. p. 1, Investor: xxxxxxxxx. Projektant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Stupeň: Dokumentace pro provedení a zadání stavby, září 2018“. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL13.

2.	Ustanovení odst. 3.1 nadále zní:
Cena za dílo je sjednána ve výši 7 008 431,68 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů osm tisíc čtyři sta třicet jedna koruna 68/100) 
K ceně bude připočteno DPH ve výši 21% 1 471 770,65 Kč, takže cena za dílo včetně DPH je 8 480 202,33 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta osmdesát tisíc dvě stě dva korun 33/100).
Cena je stanovena oceněním rozpočtu zhotovitelem a oceněním změnových listů ZL01-ZL13.
3.	Dále se do ust. 13.6 doplňuje nový bod tohoto znění:
e) Příloha č. 4 – Změnové listy ZL01-ZL13
4.	Další ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 se nemění a zůstávající nadále v platnosti.
5.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze, dne						V Praze, dne 

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.			Ing. Bedřich Hanousek
Prorektorka pro výstavbu				jednatel společnosti
ČVUT 								STAS s.r.o.