Objednatel	IČO:	00074276	DIČ:	CZ00074276	
			Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje	
	nám. Krále Jiřího z Poděbrad		
	350  02  Cheb		Dodavatel	IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105	
			ZIP o.p.s.	
	Bankovní spojení	KB Cheb			
	Číslo účtu	Anonymizováno			Tomanova 3-5	
				
			301  00  Plzeň	

Objednáváme:	ORJ 2010	
u Vás:	
technické zajištění zjišťovacího archeologického výzkumu na stavbě: "Rekonstrukce bloku Hradební - Dlouhá; D.7	
Teplovod, propojení na stávající 2x DN40/125; II. etapa" v k. ú. Chebu.	
místo:	
město Cheb, ppč. 252/2 a 252/3  v k. ú. Chebu	
druh a rozsah požadovaných činnosti:,	
výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství	
3x archeologický dělník na 8 dní	
1x dokumentátor  na 8 dní	
předpokládaná výměra:	
max. možný rozsah exkavovaných souvrství je 18m?	
zahájení a předpokládaný termín dokončení:	
zahájení 2. 6. 2021	
dokončení 11. 6. 2021	
harmonogram:	
1. - 6. den: výkopové práce v jednotlivých sondách, které jsou průběžně dokumentovány, vybírání a třídění	
nálezů, označení stratigrafických situací	
7-8. den: dokončení kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, kresebná, měřičská)	
9. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy	
předávaného materiálu	
Cena:             42746,88 ,-Kč včetně DPH	
	
Žadatel:          Anonymizováno	
	
Příkazce operace: Ing. Martina Kulová	
	
Správce rozpočtu: Anonymizováno	
	
	V  Chebu	
	Dne :	01.06.2021	
	Vyřizuje :	Anonymizováno	
	Telefon :	Anonymizováno	
	E-mail:	Anonymizováno	
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu