Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Sanace suterénu - exteriér“

1. Objednatel:
se sídlem:
Oprávněný zástupce:
-		ve věcech smluvních:
-		ve věcech technických:

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty
Masarykové, příspěvková organizace hl. m. Prahy

U Včely 176, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Ing. Radka Soukupová, ředitelka

Alois Bouša, správce

Ing. Radka Soukupová, tel:

Bankovní spojení:
Číslo účtu :
Identifikační číslo:

PPF banka Praha 6

00874957

2. Dodavatel:

HAS SOF — CZ s.r.o.

se sídlem:

Chladírenská 113/3, Praha 4 - Libuš
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 180388

Oprávněný zástupce:
-		ve věcech smluvních:
-		ve věcech technických:
-		ve věcech díla:

Lukáš Rosenberg, jednatel společnosti
Lukáš Rosenberg, tel:	/

Lukáš Rosenberg, tel:
Lukáš Rosenberg, tel:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo:
DIČ:

Česká spořitelna a. s
24120600
CZ24120600

Dále také obecně „smluvní strany“, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
dodatek ě. 2 ke Smlouvě o dílo „Sanace suterénu - exteriér“
I.
Předmět dodatku
1.		Objednatel a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo „Sanace suterénu - exteriér“ dne 30.11.2020 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

2.		V průběhu realizace díla došlo ke zjištění skutečnosti, zeje nezbytné pro dokončení díla provést dodatečné stavební práce, které jsou uvedeny a popsány v Příloze č. 1 - Položkový rozpočet (soupis prací).
3.		Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se ruší znění ustanovení čl. VII. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje ho následujícím zněním:
Cena za provedené dílo a dodaných dodávek dle čl. lil Smlouvy a čl. II. Dodatku č. 2 Smlouvy, je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení, činí:
Cena díla bez DPH činí 2.892.416,80 Kč
Cena za dílo vč. DPH (15%) činí 3.326.278,60 Kč.
4.		Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se ruší znění první věta čl. VI. odst. 1 Smlouvy a nahrazuje ho následujícím zněním:
Dodavatel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy s tím, že dílo řádně předá nejpozději do 30.6.2021, pokud si smluvní strany nesjednaji jinak.
5.		Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
n.
Závěrečná ustanovení
1.		Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech paré, přičemž každé smluvní straně náleží dvě paré.
2.		Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (soupis prací).
3.		Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Lukáš Rosenbí get jednatel
HAS SOF-CZ s.r.o.

V Praze dne 30.5.2021

Ing. Radka Soukupová ředitelka
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové
Centrum služeb pro rodinu a dřtě a dětský domov Charlotty Masarykové U Včely 176,156 00 Praha S-Zbraslav
Tel.: »7 r-:r
IČO: 008 74 957