Spisový znak:            56.2
Skartační znak/lhůta:  V/5

DODATEK Č. D č. 6 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: 96642.6 / 2017	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002760/2017/Zub	
A Název akce:  Bezbariérová trasa Dolní Novosadská	Org: 5845	

		uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.	
       Smluvní strany

  1. Objednatel:	Statutární město Olomouc
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc	
  též „příkazce“	IČ: 	DIČ:  	
	Zástupci objednatele	
	- ve věcech smluvních:	
	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl	
	tel.:                                                        e- mail: 	
	- kontaktní osoba ve věcech technických:	
		
	tel.                                                         e-mail: 	
		
	tel.: 		e- mail: 	
		
	tel:                                                         e-mail:   	
		
	Bankovní spojení:,	
	číslo výdajového účtu: 	

2. Zhotovitel:	Ing. Petr Doležel
se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc	
též „příkazník“	
IČ: 	DIČ:		
ŽL vydaný: 	
Č.j.:                                             event. Č.: 	
Zástupci 		
- ve věcech smluvních:	
Ing. Petr Doležel	
tel.: , 		e-mail: 	
- ve věcech technických:	
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ………….)	
	
tel.: ,		 e-mail: 	
Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace ………….)	
	
tel.: ,		 e-mail: 	
	
Bankovní spojení: 	
č. účtu: 

     II. 
                                                                                   Preambule
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě.  Důvodem uzavření dodatku č. 6 je posun termínu podání žádosti o stavební povolení z důvodu nutného dořešení majetkoprávního vztahu mezi SSOK a Statutárním  městem  Olomouc ke stávající dešťové kanalizaci a zajištění souhlasného vyjádření SŽDC. Časovým zdržením je vyvolána opětovná aktualizace stanovisek správců  inž. sítí a dotčených orgánů, kteří vydávají příslušná vyjádření či povolení k projektové dokumentaci.

Tímto dodatkem č 6. se mění tyto články smlouvy :

V.  Termín plnění 
VI. Cena a platební podmínky 

            V. 
Termín plnění
V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku V. takto:

b)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové části a podání žádosti
     o stavební povolení                                                                                                do  31.10.2021

c)  Projektová dokumentace DPS včetně soupisu prací                                              do  30dní od vydání SP

                                                                                         VI.
Cena  a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VI. Cena a platební podmínky takto: 

d)  výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP
	Původní cena
+D č.1 - 5	Dodatek č. 6	Nová cena	
Cena za část c) bez DPH:	21 000,-	21 000,-	42 000,-	
DPH za část c):	4 410,-	4 410,-	8 820,-	
Cena za část c) s DPH:	25 410,-	25 410,-	50 820,-	

Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena 
+ D č. 1-5	Dodatek č.6	Nová cena	
Cena celkem bez DPH:	881 825,-	21 000,-	902 825,-	
DPH:	185 183,-	4 410,-	189 593,-	
Cena celkem s DPH:	1 067 008,-	25 410,-	1 092 418,-	

Celková cena díla za části a) až f):     

	Původní cena
+ D č. 1 - 5	Dodatek č. 6	Nová cena	
Cena celkem bez DPH:	922 825,-	21 000,-	943 825,-	
DPH:	193 793,-	4 410,-	198 203,-	
Cena celkem s DPH:	1 116 618,-	25 410,-	1 142 028,-	

        Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD a dodatcích č. 1 - 5  nejsou tímto dodatkem č. 6 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. D č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

V Olomouci dne:  28.6.2021	V Olomouci dne:  23.6.2021	

 Objednatel	Zhotovitel	

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora SMOl	
Ing. Petr Doležel