Kalkulace předpokládaných nákladů na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) na stavbě „Opletalova – rekonstrukce vodovodu“ 

I.
Obecné údaje o ZAV
1. Objednatel: 	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
2. Zhotovitel:		Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc
3. Forma výzkumu: Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy (UAN). Nejvýznamnějším nálezem jsou relikty základového zdiva zaniklých staveb (církevní i světská architektura) a hroby bývalého hřbitova kolem kostela sv. Mořice. Dosavadní poznatky dokládají, že lokalita je archeologicky značně exponovaná, výzkumu a dokumentaci bude třeba věnovat odpovídající odbornou pozornost. Archeologický výzkum proto bude probíhat formou plošného archeologického výzkumu (sondy) a formou dohledu s dokumentací odkrytých situací. Sazba je stanovena s ohledem na předpokládanou přítomnost archeologických nálezů; s velkou pravděpodobností hrobů s lidskými ostatky a zdiva.

4. Použité podklady:
Příkaz č. I/2016/NPÚ ÚOP OL o stanovení sazebníku nákladů při provádění záchranných archeologických výzkumů NPÚ ÚOP v Olomouci, č. j. NPU-391/20350/2016.
Poštulka, P.: Opletalova - rekonstrukce vodovodu, Dokumentace pro provádění stavby, A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, 6/2017.
Poštulka, P.: Opletalova - rekonstrukce vodovodu, C Situační výkresy, Koordinační situace; Celková situace, 6/2017.

5. Záchranný archeologický výzkum (dále ZAV): 
a) forma dohledu: realizována v průběhu a souběhu stavebních prací, a to zejména v trasách rekonstruovaných inženýrských sítí; v případě zjištění neporušených archeologických situací požadavek na stavebníka – umožnění kresebné a fotografické dokumentace a vzorkování profilů výkopu, zaměření situace, což je realizováno v souběhu se stavbou a řádově trvá hodiny (dle konkrétní situace na stavbě). V případě důležitých archeologických nálezů může přejít i do plošného odkryvu.
b) forma plošného odkryvu: V ideálním případě je staveniště předáno organizaci oprávněné provádět archeologické výzkumy, vyžaduje plné uplatnění archeologických technologií při odkryvu, výkopové práce se provádí ručně v ploše, do hloubky požadované stavbou. V případě zvláště cenných nálezů mimo úroveň stavby se zpravidla sepisuje dodatek k dohodě o ZAV, který stanovuje další podmínky. Plošný odkryv trvá řádově dny až týdny, podle konkrétní situace jej lze realizovat i v předstihu před zahájením stavby.

II. Popis stavby a archeologické požadavky
Jedná se o rekonstrukci vodovodu v nové trase (mezi chrámem sv. Mořice a Galerií Moritz), s napojením na stávající trasu v ulici 8. května a v ulici Opletalova. Realizace nové trasy je navržena v části bezvýkopovou technologií, část trasy v délce 36,4 m bude prováděna otevřeným výkopem. Součástí rekonstrukce je také přepojení pěti vodovodních přípojek (celková délka 39,4 m). Předpokládaná hloubka výkopů dosáhne minimálně 1,2 m.
V rámci technologického postupu bude provedeno celkem šest pracovních jam, z toho dvě o rozměrech 3,7 x 2,5 m, jedna 1,5 x 2 m a tři 1,5 x 1,5 m. Protože jámy v prostoru před západním průčelím kostela sv. Mořice budou hloubeny v terénu bývalého hřbitova, který není s vysokou pravděpodobností porušen inženýrskými sítěmi, doporučujeme jejich výkop realizovat jako archeologické sondy, tj. formou plošného odkryvu. Zbývající pracovní jámy a hloubení nové trasy vodovodu a přípojek - provedení ZAV formou dohledu.

III. Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu:
III.1. ZAV formou dohledu
Dohled, délková sazba 200,- Kč za 1 m stavby, potrubí v otevřeném výkopu – 36,4 m, přípojky – 39,4 m.
Celkem metrů: 36,4 + 39,4 = 75,8 m, zaokrouhleno 76 m x 200 	= 15.200,- Kč

Dohled, plošná sazba 200 Kč za 1 m2 stavby:
pracovní jáma, km 0,1394; 		3,7 x 2,5 m 			= 9,25 m2
pracovní jáma, km 0,0556; 		1,5 x 1,5 m 			= 2,25 m2
pracovní jáma, km 0,0920, lom 4; 	1,5 x 1,5 m 			= 2,25 m2
Celkem:							   	13,75 m2 x 200 = 2.750,-

Dohled celkem:		15.200 + 2.750 = 17.950,- Kč

III.2. ZAV formou plošného odkryvu
Sazba 5.000,- Kč za 1 m3 zkoumaného archeologického terénu. Předpokládaná hloubka 1,2 m, z toho recentní narušení do hloubky cca 0,2 m, tzn. 1,2-0,2 = 1 m předpokládaného archeologického terénu.
pracovní jáma, km 0,0142; 		1,5 x 2 m = 3 m2 x hloubka 1 m 		= 3 m3
pracovní jáma, km 0,0268, lom 1; 	3,7 x 2,5 m = 9,25 m2 x hloubka 1 m 	= 9,25 m3
pracovní jáma, km 0,0398, přepojení VP 1; 1,5 x 1,5 m = 2,25 m2 x hloubka 1 m	= 2,25 m3
Celkem:										= 14,5 m3
Plošný odkryv celkem:	14,5 x 5.000,- = 72.500,- Kč

III.3 Celkem plošný dohled + AV: 17.950 + 72.500 = 90.450,- Kč

III.4 Nedílnou součástí archeologického výzkumu je technické a laboratorní zpracování nálezů a výsledků výzkumu, k úhradě těchto nákladů bude při fakturaci připočteno 20 % z částky za terénní část výzkumu, tj. = 18.090,- Kč.

Celkem III.3 + III.4 = 90.450 + 18.090 = 108.540,- Kč bez DPH.

IV. Předpokládaný časový harmonogram – souhrn
Poznámka: počítán je pracovní týden, tj. 5 pracovních dnů × 8 hodin = 40 hodin
Plošný ZAV:
Pracovní jáma 3,7 x 2,5 m. Archeologická sonda, trvání 3 týdny × 5 dnů 	= 15 dnů.
Pracovní jáma 1,5 x 2 m. Archeologická sonda, trvání 1 týden × 5 dnů 	= 5 dnů.
Pracovní jáma 1,5 x 1,5 m. Archeologická sonda, trvání 1 týden × 5 dnů 	= 5 dnů.
= 25 dnů
Jednotlivé sondy lze hloubit současně, v závislosti na podmínkách stavby, tj. předpokládaná doba trvání plošného ZAV by mohla být 3-5 týdnů.
ZAV formou dohledu: v souběhu se stavbou.

Celkové náklady na provedení ZAV na výše uvedené stavbě nepřesáhnou částku 108.540,- Kč bez DPH. 
Časový harmonogram terénních prací: 3–5 týdnů/15–25 pracovních dnů plošný ZAV, dohled v průběhu stavby.

Vypracovala: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
červenec 2021

Schválil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx