,. . 
'~"'Il"' •• (,~f 
•....• ··r •• r 

~ 
~ 	ikis, s.r.o, Kaštanová 496j123a, 62000 Brno 

Evidenční číslo Objednatele 
2021 
DOHODA O NAROVNÁNÍ 
Palata - Domov pro zrakově postižené 
	Sídlem: 	Na Hřebenkách 737/5, 1500 Praha 5 Smíchov 

Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 

Ing . .Jiřím Procházkou, ředitelem domova 
70872783 
není plátcem DPH 

Bankovní spojení: Česká spořitelna e.s. 
xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen Objednatel) 
a 
Zhotovitel 
SPS engineering,s.r.o. 

číslo 

účtu: xxxxx 

	Sídlem: 	.Jana Masaryka 165/22, 120 00 Praha 2 
	Zastoupený: 	jednatelem Ing. Romanem Stibůrkem 
	IČO: 	45798851 
	DIČ: 	CZ 45798851 
Bankovní spojení: Unicredit bank a.s. číslo účtu xxxxxxxxxxx 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze 
oddíl C, vložka 10380 
(dále jen Zhotovítel) 
uzavřeli ve smyslu ust. § 1903 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, tuto dohodu o narovnání: 

·QOU.t...r(t/f 
'O\·'I, .• r 

I. 
Smluvní strany uzavřeny dne 17. 3. 2020 smlouvu o dílo, na jímž základě se 
Zhotovitel se zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
"Výstavba služebních bytu", a to dle podmínek sjednaných ve smlouvě a Objednatel 
se zavázal zaplatil Zhotoviteli cenu díla sjednanou dle rozpočtu. (dále jen "Smlouva") 
II. 
V průběhu realizace díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že dílo v sjednaném rozsahu nelze 
provést, kdy bude potřeba na díle provést další práce, které vyvstaly při samotném 
procesu jeho provádění a které nebyly obsaženy v původním vymezení rozsahu díla. 
Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na změně rozsahu díla ve znění změn 
specifikovaných ve změnových listech, kdy tyto změny byly zástupci stran průběžně 
schvalovány na kontrolních dnech stavby. 
S ohledem na skutečnost, že mezi stranami existuje pochybnost o tom, že v tomto 
ohledu bylo učiněno právní jednání směřující k změně obsahu Smlouvy, dohodly se, že 
dosavadní dohody k změně rozsahu díla nahradí novým závazkem tak, jak následuje. 
III. 
Zhotovitel provede pro Objednatele dílo v rozsahu změn specifikovaných ve 
změnovém listu, jenž tvoří přílohu Č. 1 této dohody. 
S ohledem na snížení ceny díla o méněpráce a zvýšení ceny díla o vícepráce v 
celkovém součtu 893 437,- Kč bez DPH se smluvní strany dále dohodly na změně 
ceny díla, jejíž nová výše činí 32 649 812,08,- Kč bez DPH, tedy 37 872 806,57 Kč 
vč. DPH v částce 5 222 994,49 Kč. 
Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto narovnáním zůstávají v platnosti 
IV. 
Smluvní strany konstatují, že změny díla, které jsou předmětem této dohody nejsou 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 
222 zákona Č. 134/2016 Sb. 
Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 
Zhotovitel. 
Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti podle čI. II. odst. 2.1.2. Smlouvy. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou tyto přílohy: 
·	příloha číslo I. 	Seznam změnových listu 
·	příloha číslo II. 	Kopie odsouhlasených změnových listu 

V Praze dne 21.9.2021 

..... . ~> ......................•.......•............. 

za Objednatele 
Ing. Jiří Procházka 

V Praze dne 21.9.2021 
.....•..............•••....••.......•........•....... 
za Zhotovitele 
Ing. Roman Stibůrek 

	ředitel domova 	jednatel 
PŘÍLOHA ČÍSLO 1. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LIST(J 

PŘÍLOHA ČíSLO II. KOPIE ODSOUHLASENÝCH ZMĚNOVÝCH 
LIST(J