HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor sociálních věcí 
oddělení ekonomických a kontrolních agend 
• 
Palata - Domov pro osoby se zrakovým 
postižením 
Ing. Jiří Procházka, ředitel 
Na Hřebenkách 5 
150 00 Praha 5 
• 

Č.j.: MHMP/2021 

Vyřizuje: xxxxxxxxxx 
Počet listů/příloh: 1/0 
Datum: 15.9.2021 

Věc: Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku "Výstavba služebních bytů" 
Vážený pane řediteli, 
na základě zaslaných podkladů v souladu a v aplikaci Metodického pokynu ředitele 
odboru ZSP MHMP č.1I20 18 (dále jen Metodický pokyn) sdělujeme souhlasné stanovisko 
k provedení změny závazku ze smlouvy (změnové listy č. I - 8) na podlimitní veřejnou zakázku 
"Výstavba služebních bytů" v souladu s ust. § 222 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek (dále ZZVZ), tj. jako nepodstatnou změnu smlouvy bez provedení nového zadávacího 
řízení. 

Schválená výše víceprací (bez DPH): 
Schválená výše méněprací (bez DPH): 
Rozdíl (bez DPH): 

1861237,-Kč 
967800,- Kč 
893437,- Kč 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 11001 Praha I 
1/1 

Celkový finanční rozsah změn vícepráce + méněpráce (bez DPH): 2 829037,- Kč 
V případě změny množství musí být k ocenění použity položky, které byly použity při 
ocenění nabídky. U položek, které nebyly součástí cenové nabídky, je nutné postupovat podle 
smlouvy s odkazem na příslušnou cenovou soustavu. 
Současně upozorňujeme, že v případě postupu podle § 222 odst. (5) nebo (6) ZZVZ je 
zadavatel povinen do 30 dnů od zrněny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění 
způsobem podle § 212 ZZVZ. 
S pozdravem 	 
xxxxxxxxxxx 	 
pověřená řízením odboru SOV MHMP 11000 Praha 1 - So 
Pracoviště: Charvátova 145/9.11000 Praha I 
Kontaktní centrum: 12444, fax: 236007 157 
E-mail: xxxxxxxxxx ID OS: 48ia97h