OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5	číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o.	
Investor:	Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj	Datum: 30. 9. 2021	
Název akce: 
UV955/2016 Zateplení katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj	
Způsob odeslání / předání
datum: 30. 9. 2021	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
					
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:		
		
	Změnový list č. 1	

Předmět změny: Méněpráce
Popis a zdůvodnění změny:                                     
    Méněnáklady jsou vyčísleny za méněpráce (neprovedené práce). Důvodem neprovedení těchto prací je zkrácení doby výstavby (pro díl 94 Lešení a stavební výtahy) a požadavek investora (ostatní položky*). Méněpráce nemají vliv na hlavní záměr projektu - snížení energetické náročnosti budovy. 

*Ostatní položky se vztahují k nerealizaci vrátek a dlažby zadního vstupu. 
Dle projektu bylo navrženo - původní vrátka s navazujícím oplocením demontovat, odstranit a nahradit novými vč. základových konstrukcí. V průběhu realizace zateplovacího systému fasády se ukázalo, že vrátka není z prostorových důvodů nutné demontovat, že jejich funkce může být zachována a to včetně napojení na systém elektronického vrátného. Odůvodnění změny: nerealizace tohoto záměru zkrátí omezení provozu, zachován bude jednotný ráz původních zámečnických konstrukcí. Obdobně bylo přistoupeno k nerealizaci výměny keramické dlažby před vstupem na dvůr. Odůvodnění změny: nerealizace tohoto záměru zkrátí omezení provozu, stávající keramická dlažba nevykázala známky nesoudržnosti.

	
Počet připojených listů specifikací:                                         	0	
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
	
odstavec 4, § 222 
	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 

Oznámení vydává: 
                
Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj

Razítko, datum, podpis

	

Stanovisko technického dozoru stavby:  Martin Lang

Souhlasím se změnou.  30. 9. 2021    Podpis…………………………….

Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Lada Černá

Souhlasím se změnou.  30. 9. 2021    Podpis…………………………….

Stanovisko energetického specialisty:      nerelevantní     

	
Příloha: 	

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5	číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj	
Datum: 	30. 9. 2021	

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny:  Méněpráce
Popis a zdůvodnění změny:  Méněnáklady jsou vyčísleny za méněpráce (neprovedené práce). Důvodem neprovedení těchto prací je zkrácení doby výstavby (pro díl 94 Lešení a stavební výtahy) a požadavek investora (ostatní položky*). Méněpráce nemají vliv na hlavní záměr projektu - snížení energetické náročnosti budovy.

*Ostatní položky se vztahují k nerealizaci vrátek a dlažby zadního vstupu. 
Dle projektu bylo navrženo - původní vrátka s navazujícím oplocením demontovat, odstranit a nahradit novými vč. základových konstrukcí. V průběhu realizace zateplovacího systému fasády se ukázalo, že vrátka není z prostorových důvodů nutné demontovat, že jejich funkce může být zachována a to včetně napojení na systém elektronického vrátného. Odůvodnění změny: nerealizace tohoto záměru zkrátí omezení provozu, zachován bude jednotný ráz původních zámečnických konstrukcí. Obdobně bylo přistoupeno k nerealizaci výměny keramické dlažby před vstupem na dvůr. Odůvodnění změny: nerealizace tohoto záměru zkrátí omezení provozu, stávající keramická dlažba nevykázala známky nesoudržnosti.
	
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:

95.479,54 Kč	Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

95.479,54 Kč	
Nemění se                                         	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	

	

Datum: 30. 9. 2021	

Datum: 30. 9. 2021	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu): 

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):