OZNÁMENÍ ZMĚNY 	číslo změny: 15	
Zhotovitel:	KALAHA a.s., Maříkova 1, 621 00 Brno, IČO: 255 62 151	
Investor:	Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice, IČO: 000 94 927	Datum: 24.5.2021	
Název projektu: Hudební nástroje v lidové kultuře II
	
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001705	
Odkazy na                      specifikaci:
                                        na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:	VZT jednotky	
	PD: DPS od ADH architects, s.r.o. z 08/2020	

Předmět změny: 
Změna se týká záměny provedení klimatizační jednotky.

Popis a zdůvodnění změny:     
Jedná se o změnu vyvolanou změnou provedení podhledu v depozitáři. Původně navržená nástěnná klimatizační jednotka byla nahrazena stropní kazetovou jednotkou, z hlukových důvodů.

Počet připojených listů specifikací:                                         		
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
	
odstavec 4, § 222 	odstavec 5, § 222 	odstavec 6, § 222 	odstavec 7, § 222 	
	
Stanovisko technického dozoru stavby:  

Stanovisko projektanta stavby: 

Stanovisko investora:    
	
Příloha: viz příloha 15 VZT jednotky a výkaz výměr celkový včetně změn	

ZMĚNOVÝ LIST  	číslo změny: 15	
Zhotovitel:	KALAHA a.s., Maříkova 1, 621 00 Brno, IČO: 255 62 151	
Investor:	Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice, IČO: 000 94 927	
Název projektu:	Hudební nástroje v lidové kultuře II	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001705	

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
   
Předmět změny: 
Změna se týká záměny provedení klimatizační jednotky.

Popis a zdůvodnění změny:     
Jedná se o změnu vyvolanou změnou provedení podhledu v depozitáři. Původně navržená nástěnná klimatizační jednotka byla nahrazena stropní kazetovou jednotkou, z hlukových důvodů.
	
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:

-47.569,34 Kč	Cena víceprací bez DPH:

47.569,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 	Nově sjednaná cena díla:	

0,- Kč	15.233.686,74 Kč                                       	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 	
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	

	

Datum: 	

Datum: