Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
kterou uzavřeli
1	SMLUVNÍ STRANY 

na straně jedné: 	
Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace 
IČ: 751 45 189 
Sídlo: Holásecká 864/33, Tuřany, 620 00 Brno 
zastoupený Mgr. Miroslavou Mužíkovou, MBA 
Bankovní spojení, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. ú. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	
	
AEKO s.r.o. 
IČ: 28347200, DIČ: CZ28347200 
Sídlo: Špitálka 461/21a, 602 00 Brno 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62649 
Jednající prostřednictvím Ing. Branislava Moncmann, jednatele 
Bankovní spojení, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

2	Zdůvodnění uzavření dodatku 

Důvodem pro uzavření dodatku je zpoždění dodávky panelů na základě neočekávaného omezení přístavů z důvodu pandemie Covid-19 a dalších okolností, které způsobily celosvětovou krizi v dodávkách materiálu a zboží. Omezení čínských přístavů v současném rozsahu a následné zpoždění dopravy zboží nemohla žádná ze smluvních stran předvídat ani s náležitou péčí. 

3	PŘEDMĚT DODATKU

Na základě tohoto dodatku dochází k úpravě bodu 2.4. článku II smlouvy o dílo, který se nahrazuje tímto novým zněním:

2.4.	Zhotovitel je povinen dílo dle této smlouvy provést a předat objednateli nejpozději do 4. 11. 2021.

Ostatní smluvní podmínky zůstávají beze změny

4	přiřazení změny  

Předmětná změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy a je provedena v souladu s bodem 2.13.4 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020.  Předmětná změna nemění celkovou povahu zakázky, hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty 

závazku a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Přílohami tohoto dodatku jsou doklady prokazující odůvodnění vzniklé situace.

V Brně dne: 11.10.2021	V Brně dne: 11.10.2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..…………………………	…………………………………..	
	Mgr. Miroslava Mužíková, MBA	Ing. Branislav Moncmann
	ředitelka	jednatel