I 
SMLOUVA O DILO 
I. 
Smluvní strany 

1.	Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Ostrava, příspěvková organizace 
	se sídlem: 	Hladnovská 133 
Ostrava-Slezská 710 00 
ředitelem školy 
zastoupen: 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;8;(18938,0);(13988,0);(13988,8147);(0,8147);(0,21469);(21498,21469);(21498,8881);(18938,8881)posrelh0posrelv0pib
rč: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
00842753 
CZ00842753 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,20716);(1478,20716);(1478,21476);(21496,21476)posrelh0posrelv0pib

(dále jen .objecnateř') 

2.	Obchodní firma 
se sídlem: 
zastoupena: 
rč: 
DIČ: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 4298 
DEV COMPANY, spol. s r.o. 
Čs. 1'- 	702 00 Ostrava 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen .zhotovitel") 
II. 
Základní ustanovení 

1.	Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen "občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2.	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v či. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

4.	Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 
Smlouva o dílo na .tavbu 	. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21462,0);(0,0);(0,21490);(21462,21490)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21462,0);(0,0);(0,21495);(21462,21495)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21400,0);(0,0);(0,21494);(21400,21494)posrelh0posrelv0pib
5.	Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čI. V odst. 1 této smlouvy. 
6.	Účelem smlouvy je "Rekonstrukce zpevněné plochy" 
III. 
Předmět smlouvy 
1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
"Rekonstrukce zpevněné plochy" (dále jen "stavba") v rozsahu dle: 
•	projektové dokumentace stavby zpracované v 10/2016 společností V&'{ stavební a 
statická kancelář, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IC: 26831929 
pod číslem GYM-4016 a oceněného položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, 
•	předpisu upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 
(dále jen "dílo"). 
2.	Součástí díla je také: 
a)	zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisu, bude-Ii potřebné, 
b)	osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původniho stavu a vrácení 
jejich správci, bude-Ii potřebné, 
c)	vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisu (dále jen "stavební zákon"), 
d)	zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
e)	zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
správců sítí, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací 
na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, 
bude-li potřebné, 
f)	předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"); 
o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 
g)	zřízení deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
h)	provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisu a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
i)	zajištění bezpečných přechodu a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 
j)	udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původnřho stavu, 
k)	zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

2 

I)	zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla, 
m)	hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření 
stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací 
stavby, 
4.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 
5.	Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
6.	Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla 
nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých 
povolení, překopli, záborů, souhlasů, oznámení apod. 
7.	Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čI. V této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla 
podstatným způsobem neomezují. 
8.	Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací 
v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisu (dále jen "zákon o veřejných zakázkách"). 
9.	Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 
IV. 
Doba a místo plnění 
1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 70 dnu (dop/n/ uchazeč, nejvýše však do 
70 dnů) od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůtv dokončené dílo 
předat objednateli. 
2.	Místem plnění je Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 1332/35, Slezská Ostrava 
3.	V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu 
prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla 
dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty 
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku 
a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním 
deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čI. 1. odst. 1 této smlouvy. Přerušení 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

3 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21436,0);(0,0);(0,21487);(21436,21487)posrelh0posrelv0pib
doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem 
ke smlouvě. 
4.	V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"koordinátor BOZP"), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost 
na stavbě (dále jen "osoba vykonávající technický dozor stavebníka"), objednatel nebo 
jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce 
na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
5.	Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředku o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu 
přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena 
povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 
Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle 
ani do 30 od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá 
ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení 
dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 10 dnu dohodu o vypořádání vzájemných 
práva povinností z této smlouvy. 
V. 
Cena za dílo 
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla 	CenabezDPH 	DPH21 (v 	Cena včetně 	
		(v Kč) 	Kč) 	DPH (v Kč) 	
1. část 	Rekonstrukce 				
	zpevněné plochy 	2379684 	499734 	2879418 	
	(ď. III smlouvy) 				
Souhrnný rozpočet je přílohou Č. 1 této smlouvy. 
2.	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 
3.	Cena za dílo včetně DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše 
přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a)	nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladu na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladu neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

4 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21416,0);(0,0);(0,21491);(21416,21491)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21488);(21276,21488)posrelh0posrelv0pib
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen "položkový 
rozpočet"), 
~. Rozsah pfípadných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy budou vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. 
5.	Z otovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a 
odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající 
autorský dozor projektanta. Součástí těchto oceněných soupisů bude i výkaz výměr 
s uvedením postupu výpočtu množství. 
VI. 
Platební podmínky 
Zálohy na platby nejsou sjednány. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim 
přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), a zhotovitelem proto budou 
za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty. 
2.	Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu (dále jen "faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
	a)	číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj 	), rč objednatele, 
předmět smlouvy, tj. text "zhotovení stavby Rekonstrukce zpevněné plochy" 
b)	označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čI. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čI. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele), 
c)	lhůtu splatnosti faktury, 
d)	označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 
e)	výši poza stávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90  
ceny díla, u ostatních faktur poza stávka nebude uplatněna), 
f)	přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čI. XII odst. 2 
této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo 
bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání 
díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků 
podle či. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka. 
3.	V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého 
dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené 
podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací 
a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. 
poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených 
stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu 
s § 21 odst. 8 a § 21 odst. 5 písmo a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného 
plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjíšťovacím 
protokolu. Zhotovítel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

5 

r 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21497,0);(0,0);(0,21486);(3470,21486);(3470,18756);(21497,18756)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21462,0);(0,0);(0,21495);(21462,21495)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21462,0);(0,0);(0,21497);(21462,21497)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21276,0);(0,0);(0,21489);(21276,21489)posrelh0posrelv0pib

soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem 
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka). 

4.	Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čI. V odst. 1 této smlouvy. 

5.	Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnu 
ode dne jejich doručení objednateli. 

6.	Po provedení díla (viz čI. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělku, s nimiž 
bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které 
doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež 
bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. 

7.	Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůtv splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a)	nebude-ti faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-f chybně vyúčtována cena za dílo, 
b)	budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

8.	Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

9.	Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou 
nebo pokyny objednatele. 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí 
škody 

1.	Není-Ii stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2.	Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, 
vstup na stavbu a staveniště. 
	Osoba vykonávající techni 	dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP, kterou je 

••••• ~ IČ: 86999877 je kromě kontroly 
provadění díla na kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované 

zhotovitelem, kontrole deníků dle čI. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole 
hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu 
inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi při realizaci stavby. 

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je V&V stavební a statická 
kancelář, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 70200 Ostrava, IČ: 26831929 
3.	Zhotovitel je povinen do 10 dnu od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

6 

BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu "Přílohy Č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích", a to zejména 
odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 
4.	Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu) a předáno objednateli. 
5.	Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čI. IV. odst. 2 této smlouvy, 
a to způsobem uvedeným v čI. XII této smlouvy. 
6.	Nebezpečí škody na věci, která je předmětem "Rekonstrukce zpevněné plochy", nese 
zhotovltel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 
7.	Zhotovitel 	ani 	osoba 	s 	ním 	propojená 	nesmí 	za objednatele 	vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 
8.	Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona 
a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá 
bez zbytečného odkladu objednateli. 
VIII. 
Jakost díla 
1.	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným 
rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisu. 
2.	Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v 1. jakosti. 
3.	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
IX. 
Staveniště 
Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-Ii se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní 
strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště 
zhotovitelem, nedohodnou-Ii se smluvní strany písemně jinak. 
2.	V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin 
bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání 
staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci 

	S louva o díla na stavbu 	. 

7 

zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná 
jednat ve věcech realizace stavby dle Č\. 1. odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání 
staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke 
smlouvě. 
3.	Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace 
stavby. 
4.	Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 
5.	Určení základních vytyčovacích prvku bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 
6.	Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovite\. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od uživatele - Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Ostrava, příspěvková organizace, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu 
úhrady za jejich odběr. 
7.	Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za dílo. 
8.	Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnu od provedení díla (viz 
čI. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
9.	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 
předpisu, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
staveniště. 
10.	Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svů] náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadu. 

X. 
Provádění díla 

1.	Zhotovitel je povinen: 
a)	provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupu, které odpovídají 
právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním přecpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 
b)	dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
c)	účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 
d)	do 7 dnu od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli, 
e)	dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
Smlouva o díla na stavbu 	. 

8 

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

	'""' 	doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků 
a materiálu, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

o ovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
_ louvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
ečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
	. éry 	budou 	objednateli 	zaslány 	elektronickou 	poštou 	(na adresu: 
			nebo faxem (na číslo: 			a následně 
	:).sem . Zhotovitel je povinen informovat objednatele 	ena: 

a)	zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 
) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c)	zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čI. III. odst. 1 této smlouvy vady. 

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, 
či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
omunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastnřků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 

5.	Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čI. III odst. 2 písmo b) této smlouvy, včetně případných příloh 
(podmínek). 

6.	Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

7.	Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

8.	Zhotovítel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly 
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách 
zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo 
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. 
jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena 
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných 
pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti 
s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou Č. 2 této smlouvy. Informační povinnost 
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;10;(12877,0);(0,0);(0,11875);(2127,11875);(2127,21482);(21500,21482);(21500,13555);(15005,13555);(15005,5068);(12877,5068)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21496,0);(0,0);(0,21473);(19018,21473);(19018,17653);(21496,17653)posrelh0posrelv0pib

Smlouva o díla na stavbu 	. 
9 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21498,0);(11559,0);(11559,1329);(0,1329);(0,21486);(21498,21486)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21500);(21500,21500)posrelh0posrelv0pib
díla. 
Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách 
předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné 
zakázky; má-Ii subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu 
i seznam vlastníku akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10  základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

9.	Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen "odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude 
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku smlouvy 
a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 
Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původni 
odborná osoba. 

10.	Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 
a jiných technických předpisů, za vvpracovaru další prováděcí dokumentace 
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11.	Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
12.	Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Gymnázium Hladnov a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace 

13.	Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom 
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14.	Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

15.	V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

16.	V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

17.	Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení 
objednateli. 

18.	V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů /dále jen "zákon č. 309/2006 Sb."/) se zhotovitel zavazuje k součinnosti 
s koordinátorem BOZP, kterým je •••• 1.1 
IČ: 86999877. 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

10 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21489,0);(0,0);(0,21479);(21489,21479)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21462,0);(0,0);(0,21500);(21462,21500)posrelh0posrelv0pib
	Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem 	BOZP všechny své 
subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Z otovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
,,80ZP") na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech 
BOZP a dodržování pokynu koordinátora BOZP na staveništi. 
:~. Z otovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnu před zahájením prací 
a staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
a staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatel u zhotovitele, osob vykonávajících 
a stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit 
oordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty 
ohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel 
povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. 
uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen 
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 
	, 	v 	" 	I 	o 
-'O TROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU 
O.	Kontrola prováděných prací bude realizována: 
•	objednatelem a jím pověřenými osobami, 
•	osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
•	osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
•	koordinátorem BOZP, 
•	orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisu, 
21.	Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnu, s tím, že: 
•	kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 
•	termíny konání kontrolních dnu budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo 
na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 
•	kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
•	z kontrolních dnu budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
22.	Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 22 tohoto článku provedení 
kontroly realizovaných prací. 
23.	Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
pří zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
bez vážných důvodů nedostaví, muže zhotovítel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-Ii 
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejích odkrytí, je zhotovítel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

11 

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovite!. 
24.	Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel 
před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 
XI. 
Stavební deník, bezpečnostní deník 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21500,0);(0,0);(0,21497);(21500,21497)posrelh0posrelv0pib
STAVEBNÍ DENÍK 
1.	Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce. 
2.	Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo 
jeho zástupcem. 
3.	Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a)	časový postup prací a jejich kvalitu, 
b)	druh použitých materiálu a technologií, 
c)	zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce, 
d)	stanovení termínu k odstranění zjištěných vad a nedodělku. 
4.	Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP. 
5.	Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamu ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 
6.	V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
7.	Nebude-Ii objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí 
námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen 
objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá 
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůtv 
	Smlouva o díla na stavbu 	. 

12 

)u 
ey 
m 
~é 
tU 

prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 
V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že 
ak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21462,0);(0,0);(0,21494);(21462,21494)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21489,0);(0,0);(0,21500);(21489,21500)posrelh0posrelv0pib
J 
t 
:e 
tí 
	~I 	==:ZPEČNOSTNÍ DENÍK 
	ji 	" Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 
e stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 
oordinátora BOZP v deníku uvedené. 
<:;. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
a)	seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, 
které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce 
probíhají za provozu), 
b)	seznámení s plánem BOZP na staveništi, 
c)	zápisy z pravidelných kontrolních dnu BOZP, 
d)	nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
e)	oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
ř) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (subjzhotovitelů, 
g)	koordinace činností jednotlivých (subjzhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 
kolizí, 
) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
_ . Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku. 
• . Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací 
nelze obsah této smlouvy měnit. 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21416,0);(0,0);(0,21496);(21416,21496)posrelh0posrelv0pib

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21436,0);(0,0);(0,21496);(21436,21496)posrelh0posrelv0pib

XII. 
Předání díla 
Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnu po obdržení písemné 
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla 
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) 
se nepočítá do Ihuty plnění dle čI. IV odst. 1 této smlouvy. 
2.	Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnu od zahájení přejímacího řízení v případě, že 
dílo bude předáno bez vad a nedodělku bránících jeho řádnému užívání. O předání 
a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude 
obsahovat: 
a)	označení předmětu díla, 
b)	označení objednatele a zhotovitele díla, 
c)	číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatku, 
d)	termín vyklizení staveniště, 
e)	datum ukončení záruky za jakost na dílo, 

	S ouva o díla na stavbu 	. 

13 

q 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21462,0);(0,0);(0,21498);(21462,21498)posrelh0posrelv0pib
f)	soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g)	termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h)	seznam převzaté dokumentace, 
i)	prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
	j)	datum a místo sepsání protokolu, 	~ 
k)	v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, 
uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělku, s nimiž bylo dílo 
	převzato, 	. 
I)	jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 
3.	Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 
4.	Pokud objednatel dílo v souladu s čI. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany 
při předání díla písemně jinak. 
5.	Bylo-Ii dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude 
o odstranění těchto vad a necodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka. 
6.	Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
7.	Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy, zhotovítel předá objednateli 
při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti 
doklady na výzvu objednatele doplnit. 
8.	Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby podle stavebního zákona. 
XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
1.	Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 
2.	Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-Ii se vada v průběhu 6 rněslců od převzetí díla objednatelem, má se 
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 
3.	Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen "záruka") 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 
48 rněsíců na provedené práce a dodávky, (navrhne uchazeč ve své nabídce) 
(dále též "záruční doba"). 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví 
po dobu, po kterou nernůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

14 

je 
íší 
Dr 
:h 
~Ii 
3, 
ti 
y 

ědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
	:'.. 	ínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. 

díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou 
:- ...• -0 ítelem odstraněny bezplatně. 

teš' eré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
: .é. kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
_2 važuje i oznámení faxem nebo e-rnailern), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
:J]ednatel bude vady díla oznamovat na: 
axové číslo: 
.............................. , nebo 
nebo 
145/18, 702 00 Ostrava, nebo 
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(18769,0);(0,0);(0,21490);(21493,21490);(21493,15534);(18769,15534)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;6;(21276,0);(7092,0);(7092,3029);(0,3029);(0,21491);(21276,21491)posrelh0posrelv0pib
- e-rnail: 
::, adresu: 
"', do datové schránky: 
ojednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
,.. 	šením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
oojednetel. 

otovi tel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů (navrhne ucbsseč. max. však 
::01 dnů) od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
, a . V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin 
navrhne ucruueč. max. však do 24 hodm) od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-Ii 
z otovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit 
stranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna 
I ejpozději do 14 dnů (navrhne ucneeeč, max. však do 14 dn(j) ode dne doručení 
oznámení o vadě/ v případě havárie nejpozději do ... hodin (navrhne ocnezeč. max. však 
00 48 hodin) od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
oísemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná 
jednat ve věcech realizace stavby dle čI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný 
zástupce objednatele. 
- 	Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 36 měsíců. 
XIV. 
Nebezpečí škody 

ebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí díla objednatelem. 

2.	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3.	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4.	Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

~ 	Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s lim item min. 20 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 50 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
Smlouva o díla na stavbu 	. 
15 
J 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21477,0);(0,0);(0,21494);(21477,21494)posrelh0posrelv0pib
6.	Zhotovítel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv 
na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatku a dále certifikáty 
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu 
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity 
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 
XV. 
Sankční ujednání 
1.	V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05  z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
2.	V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato 
v souladu s čI. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05  z ceny za dílo bez DPH 
za každý i započatý den prodlení 
3.	Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
4.	V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05  z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 
5.	V případě porušení povinnosti dle čI. III. odst. 3 písmo a) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01  z ceny za dílo bez DPH 
za každý zjištěný případ. 
6.	V případě porušení předpisu týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisu) kteroukoliv z osob vyskytujících se 
na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednatelí smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za kaŽdý opakovaný případ. 
7.	V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
8.	v případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
a doklady dle čI. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč 
za každý zjištěný případ. 
9.	V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čI. X odst. 1 písmo e) nebo f) 
této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 
10.	V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čI. XIV odst. 5, 6 nebo 
7 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 
10.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení. 
11.	V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čI. X odst. 9 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 
12.	V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čI. X odst. 13 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

16 

shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21479,0);(0,0);(0,21496);(21479,21496)posrelh0posrelv0pib
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;4;(21436,0);(0,0);(0,21500);(21436,21500)posrelh0posrelv0pib
IV 
Y 
U 
Y 

_3 	případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čI. X odst. 20 této smlouvy, 
de objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý 
ZJištěný případ. 
.! případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli 
neposkvtne požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli 
rčtovéna smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ. 
_:2. případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
a smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 
:.::-.. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda . 
. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
XVII. 
Zánik smlouvy 
Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
- 	Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a)	neprovedení díla v době plnění dle čI. IV odst. 1 této smlouvy, 
b)	pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném 
termínu, 
c)	nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čI. XIV odst. 5 až 7 
této smlouvy do 10 dnu od nabytí účinnosti smlouvy objednateli, 
d)	nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případu, kdy 
převzetí brání důvody na straně objednatele), 
e)	nedodržení pokynu objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 
nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
g)	neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnu po doručení první 
výzvy, 
I)	nedodržení smluvních ujednání dle čI. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy. 
- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a)	dojde-Ii k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 
b)	bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisu (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí): 
c)	podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
s luvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 

	a o díla na stavbu 	. 

17 

I • 

od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
5.	Pro účely této smlouvy se pod pojmem "bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí "nejpozději do 3 týdnu". 
XVIII. 
Závěrečná ujednání 
1.	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatku, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 
smluvní straně. 
3.	Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží 3 a zhotovítel 1 vyhotovení. 
4.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 
5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vllle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svýmí podpisy. 
6.	Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh 
a případných dodatků bude zverejnena na oficiálních webových stránkách 
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovítel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna 
po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
7.	Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisu: 
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. 
112/8708 ze dne 18. 10. 2016. 
8.	Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha Č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 
Příloha Č. 2: Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V Ostravě dne 
za objednatele 

V Ostravě dne - ) to 11/ 

	Smlouva o díla na stavbu 	. 

18