Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5121000097
Číslo smlouvy zhotovitele: 198/2021/H/ČVUT FS Rekonstrukce obvodového pláště

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále též jen „objednatel“)

a

Hinton a.s.,
se sídlem na adrese: Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17507
IČ: 24160008
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Petr Šimon, předseda představenstva
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále též jen „zhotovitel“)

Preambule
Zadavatel v květnu 2021 vyhlásil zadávací řízení, ve kterém si vybral zhotovitele a uzavřel s ním smlouvu, jako opakované, po zrušení předchozího zadávacího řízení v návaznosti na námitky dodavatelů. V podmínkách zadávacího řízení zadavatel stanovil termín pro dokončení díla do 30.11.2021. Tento termín stanovil zadavatel podle svých provozních potřeb.
Zhotovitel ve své nabídce tuto podmínku zadavatele akceptoval. Pro dodržení termínu výstavby však ve své nabídce uvedl požadavek na převzetí staveniště do 28.6.2021 a možnost provádění stavebních prací najednou v celém rozsahu staveniště. S ohledem na schvalovací procesy na straně zadavatele však došlo k uzavření smlouvy až dne 29.7.2021. Zadavatel zároveň s ohledem na prodlení i provozní potřeby změnil své rozhodnutí o možnosti provádění prací v celém rozsahu staveniště, a to především z důvodů nezbytného dokončení probíhajících experimentů v prostorách dotčených stavbou, ke kterému došlo v důsledku omezení v předchozích měsících a bez jejichž dokončení by ČVUT bylo vystaveno riziku významných ekonomických ztrát. Z tohoto důvodu, který nemohl v době stanovení zadávacích podmínek předpokládat, zadavatel zhotoviteli předepsal povinnost provádět práce po sekcích (vždy tří fasádních prvků najednou).
Výše uvedené podmínky zadavatele byly předmětem vzájemných jednání zástupců smluvních stran. V návaznosti na tato jednání zhotovitel zpracoval aktualizovaný harmonogram v souladu s odst. 3.2 smlouvy.
V souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů, tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.  
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2, které se nahrazuje novým zněním takto:
Zhotovitel provede stavební práce podle harmonogramu předanému před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen hotové dílo, bez zjevných vad a nedodělků, předat objednateli nejpozději do 152 dnů od převzetí staveniště. 
2.	Dále se do ust. 29.7 doplňuje nový bod e) tohoto znění:
e) Příloha 2 – Harmonogram (finanční a časový) upravený na základě dodatku č. 1
3.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávající nadále v platnosti.
4.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze, dne						V Praze, dne 

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.			Petr Šimon
prorektorka pro výstavbu				předseda představenstva
České vysoké učení technické v Praze		Hinton a.s.