evWef’*if«8loNsP:
evWen*if«8JoMSK;...,
IDdteRSMVCR'	

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.8.2021
D^svktenee:	J 3. 11. 2021
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupena:
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov 
kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:

00844896
CZ00844896
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel41)
2. Obchodní firma: DRŽIK s.r.o.
se sídlem: Lidická 250/46a, 700 30 Ostrava- Vítkovice
zastoupena: 
IČ: 286 57 454
DIČ: CZ28657454
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37413 
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel44)
Stavba: „Onkologická ambulance - Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o."
1.	Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 25.8.2021, hlava V. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.
2.	Dodatkem se mění termín zhotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV.
II.
Předmět dodatku
1

III.
Nová smluvní cena
1.	Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH
2.	Méněpráce bez DPH
3.	Vícepráce bez DPH
4.	Nová smluvní cena bez DPH
1 385 051,00 Kč
- 62 618,64 Kč + 335 204,64 Kč
1 657 637,00 Kč
IV.
Nový smluvní termín
1.	Původní termín plnění: 25. - 31.týden (6 týdnů)
2.	Nový termín plnění: 34. - 39.týden (5 týdnů)
Termín realizace díla byl posunut z provozních důvodů na straně objednatele.
V.
Závěrečná ujednání
1.	Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").
3.	Tento dodatek č.l je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5.	Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
6.	Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7.	Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních
2

i *
údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nsphav.cz
8.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací
V Havířově dne
2'5. 10. 2021
za objednatele
3