SMLOUVA O DÍLO č. 1441816 
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona 89/1992 Sb. 
ČI. 1 Smluvní strany 

, 

Objednatel : 
Adresa: 
Zastoupený : 
Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 
IČO: 
DIČ: 
(dále jen "objednatel") 
Zhotovitel : 
Adresa: 
Zastoupený : 
Ke smluvnímu jednání pověřen: 
K technickým věcem pověřen : 
Bankovní spojení: 
IČO: 
DIČ: 
(dále jen "zhotovitel") 

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. 
Cholinská 1120, 784 01 Litovel 
Ing. Helenou Stoupovou, prokuristkou společnosti 
Ing. Helena Stoupová 
Ing. Helena Stoupová 
Sberbank Olomouc, č.ú. 4200241069/6800 
471 50904 
CZ471 50904 
AQUA PROCON s.r.o. 
projektová a inženýrská společnost 
Palackého tř. 12,61200 Brno 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597 
Ing. Josefem Šebkem, MBA jednatelem společnosti 
Ing. Jan Polášek, ředitel divize kanalizace 
Ing. Jaromír Koupán, vedoucí střediska Olomouc 
KB Brno-venkov, č.ú. 24301-641 /0100 
KB Brno-venkov, č.ú. 27-8607360287/0100 
46964371 
CZ46964371 
ČI. 2 Předmět smlouvy 

	2.1 	Na základě naší nabídky se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle 
č1.2 a 3 této smlouvy na akci: 
"PŘÍPOJKA VODOVODU PRO ZÁVOD VESETA V LITOVLI". 
	2.2 	Předmětem smlouvy o dílo je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu a 
podrobnostech pro provádění stavby na přípojku vodovodu pitné vody k firmě VESETA v Litovli 
v délce 1.100 m. Materiálem vodovodního řadu bude PE RC 0315 mm IPN 16. 
	2.3 	Součástí díla je inženýrská činnost na úrovni územního rozhodnutí - zajištění všech potřebných 
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, podání žádostí o ÚR, účast na 
územním řízení. 
2.4 Součástí díla není projednání dokumentace s vlastníky pozemků. 

AQUA PROCON s.r.o., Brno, smlouva o dílo, č. 1441816 

Str. 1/5 

ČI. 3 Rozsah díla 
3.1 	Dokumentace pro územní řízení (DUR) v rozsahu a podrobnostech pro provádění stavby bude 
zpracována podle vyhlášky č.62/2013Sb., kterou se mění vyhláška čA99/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb 
	3.2 	Součástí DUR bude soupis prací (položkový rozpočet) lx oceněný dle ceníku URS a lx ve formátu 
*xls neoceněný pro soutěž na zhotovitele stavby. 
ČI. 4 Čas plnění 
4.1 Termíny realizace díla jsou sjednány takto: 

	4.1.1 Předání dokumentace pro územní řízení (DUR) 	. 
4.1.2 Zaj ištění vyjádření a stanovisek dotčených 
	orgánů a správců inženýrských sítí, podání žádosti o ÚRo 	. 

15.10.2016 
30.11.2016 

	4.2 	Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním služby, vypracováním a 
odevzdáním díla nebo jejich dílčích částí objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. 
4.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl, 4 v těchto případech: 
	4.3.1 	Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele nebo investora na jednáních, kde jsou 
zhotovitelem nezastupitelní. 
	4.3.2 	Pokud nepředá objednatel dohodnuté podklady dle čl. 7 této smlouvy a nebude-li dohodnuto 
jinak. 
4.3.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu díla oproti této smlouvě o dílo a nebude-li dohodnuto jinak. 
4.3A Pokud k prodlení dojde zjiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele. 
ČI. 5 Cena za dílo 
	5.1 	Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona Č. 526/90 
Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí: 

	5.1.1 Geodetické zaměření trasy, výškopis a polohopis 		. 
	5.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí 	. 
5.1.3 Zajištění všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů 
	a správců inženýrských sítí k územnímu řízení 	. 

18.000,- Kč 
82.000,- Kč 
32.000,- Kč 

	5.1A Cena CELKEM bez DPH 	132.000,- Kč 
	5.1.5 DPH21.......................................................................................................... 	27.720,-Kč 
	5.1.6 Cena CELKEM včetně DPH 	159.7201 Kč 
	5.2 	Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době 
fakturace dle podmínek dohodnutých v čl, 5 této smlouvy. 

AQUA PROCON s.r.o., Brno, smlouva o dílo, č. 1441816 

Str. 2/5 

5.3 	Součástí sjednané ceny není cena za správní poplatky (výpis z evidence katastrálního úřadu, snímek z 
katastrální mapy, správní poplatek ke stavebnímu povolení, správní poplatek za věcné břemeno - za 
uložení do komunikace - pokud bude požadován, správní poplatek za povolení zvláštního užívání 
komunikace a poplatek za vystavení vyjádření TELEFONICA 02). Tyto poplatky budou zadavateli 
účtovány dle skutečně naběhlých nákladů. 
	5.4 	Autorský dozor bude účtován podle skutečného počtu hodin v kanceláři nebo na stavbě dle vyžádání 
objednatele hodinovou sazbou 450,- Klhodinu. Tato cena obsahuje i cestovní náklady. 
5.5 Fakturace AD bude kvartální, počet hodin bude schválen objednatelem samostatným protokolem. 
ČI. 6 Zaplacení ceny 
	6.1 	Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích splátkových faktur za jednotlivá dílčí 
plnění v ceně za činnost v dohodnutých termínech. 

, 

6.1.1 Daň. doklad po předání DUR v I vyhotovení 

Kč 	100.000,00 + DPH 

6.1.2 Daň. doklad po předání ÚR a dokladů o projednání a zbylý počet vyhotovení projektové 
	dokumentace a položkový rozpočet 	Kč 	32.000,00 + DPH 
	6.2 	Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel 
bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle č1.1 smlouvy. Splatnost 
daňových dokladů se sjednává 14 dní od vystavení. 
ČI. 7 Součinnost objednatele 
7.1 Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy následující podklady: 
	7.1.1 	Situaci vodovodu trasy vodovodu, materiál, profil (bude přílohou SOD) 
	7.2 	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování 
díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel 
zhotoviteli neprodleně po jejich získání. 
7.3 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 
7.4 Objednatel vystaví zhotoviteli najeho vyžádání plnou moc k prokazování sjednaných činností. 
ČI. 8 Záruky za dílo 
	8.1 	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po 
dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 
a následujícího občanského zákoníku. 
	8.2 	Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a 
kvality technického řešení díla. 
	8.3 	Záruční doba pro záruky poskytované dle čl, 8 se sjednává po dobu 60 měsíců od předání 
kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění 
zjištěných vad díla, nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí 
přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy. 

AQUA PROCON s.r.o., Brno, smlouva o aao, Č. 1441816 

Str. 3/5 

8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele. 
ČI. 9 Ostatní ujednání 
	9.1 	Práce budou realizovány při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu Občanského 
zákoníku. 
	9.2 	Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čI. 8 této smlouvy zaniká v případě, že 
realizační projekt a stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu proti projektové dokumentaci dle 
této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitele. 
	9.3 	Objednatel se zavazuje neposkytovat výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, jiným subjektům než 
těm, ježjsou oprávněny to od něj vyžadovat. 
	9.4 	V případě, že dojde během projednávání projektové dokumentace na úrovni stavebního řízení k 
nutnosti změn v projektové dokumentaci, zavazuje se zhotovitel k provedení příslušných nutných a 
dohodnutých změn projektové dokumentace, pokud to bude nutné. 
	9.5 	Změny projektu, které nebudou vyvolány vinou zhotovitele - na které se nevztahují záruky 
specifikované v čI. 8 této smlouvy, budou chápány jako vícepráce. Cena za tyto vícepráce včetně 
termínu jejich provedení bude stanovena po dohodě obou smluvních stran. Objednatel vyžádá 
provedení těchto prací písemnou formou. 
	9.6 	Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy budou sjednány formou 
oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo. 
	9.7 	Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení případných změn a dodatků projektového řešení 
navržených zhotovitelem. 
ČI. 10 Smluvní pokuty 
10.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čI. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 z ceny díla 
bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 
10.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05  za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni 
splatnosti až do dne úhrady. 
ČI. 11 Závěrečná ustanovení 
11.1 Termín plnění prací dle této smlouvy platí za předpokladu výzvy objednatele k zahájení prací 
nejpozději do 15.10.2016. Po tomto datu navržená doba plnění pozbývá platnosti, ostatní obsah 
smlouvy se nemění a zůstává v platnosti. Doba plnění se automaticky prodluží o dobu odpovídající 
opožděnému přijetí návrhu smlouvy, pokud nebude stanoveno dodatkem k této smlouvě jinak. 
11.2 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 
11.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 
smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

, 

AQUA PROCON s.r.o., Brno, smlouva o dílo, č.1441816 

Str. 4/5 

11.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 
příslušných údajích, uvedených v či. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 
11.5 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i 
zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

, 

V Brně dne 

V Litovli dne 

Za zhotovitele : 
1-------·-- AQUA Pitoe!)!'! s.r.o. 
	\ ': , ~. (); t/.<" 	P('.kKké,~o tř. 12 
i .:'. \U;_u," 612008rno,ČR 
	... j~~~~k 	D"Cl~""" 
ředit~\~ViZe kanalizace 
AQUA PROCON s.r.o., Brno, smlouva o dno, č. 1441816 

Za objednatele: ;6: ~h/~ 
VodohospodMs/(á společnost 
Č E R L j N K A s. r.o . 
Cho\inská í i 20, 784 01 l\10V~.~ 
,Č 47150904 DIČ: CZ471509v"> 
	.. , 	~~ 	. 
Ing. Helena Stoupová 
prokurista společnosti 
Str. 5/5