\ 

Dodatek č.l 
ke smlouvě o dílo Č. 10/2016 

na akci" Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby rodinných domků 
Pňovice 

I. Smluvní strany: 

, 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. 
Cholinská 1120 
784 01 Litovel 
zastoupená: Ing. Helenou Stoupovou , prokuristkou společnosti 
IČO: 47150904 
DIČ: CZ47150904 

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o. 
Na Zákopě 581 Olomouc - Chválkovice 
779 00 Olomouc 
zastoupen: Ing Roman Pa pica, jednatel společnosti 
ve věcech technických: p. Alešem Pospíšilem 
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s, 
č.ú.: 521669009/2700 
IČO: 25371878 
DIČ: CZ 25371878 
Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962 

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě III. Dodací Lhůta 
Z důvodu víceprací na vodovodních přípojkách se dodací lhůta mění takto: 
	Termín zahájení: 	6/2016 
	Termín dokončení: 	12.10.2016 

a dále v bodě IV. Cena stavby 
Cena dle SoD bez DPH 
Méněpráce bez DPH 
Vícepráce bez DPH 
Cena celkem bez DPH 

350 148,- Kč 
1330 I ,-Kč 
20603,-Kč 
357450,-Kč 

Tento dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel ajeden zhotovitel. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti. 

V Olomouci dne: 22.9.2016 

	
OBJEDNATEL (RAZITKO,PODPIS): 

Vodohospodářská společnost 
Č E R L I N K A s. r. o . 
Cholinská 1120, 784 01 UTOVEL 
Ič: 47150904 DIČ: CZ4715099A 
~~
. Ing. Helena Stoupová 
prokuristka 

ZHOTOVITEL (RAZITKO,PODPIS): 

VK - AQUA 
spol. 
	Na Zákopě 581, 779 n 	omouc - Chválkovlce 

le: 253 71 87, IČ: CZ25371878 
tel/fax: 85 386 776 

Ing. Roman Papica 
jednatel společnosti