DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
FSv č. 1121000441

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Dejvice, 160 00 Praha 6
adresa pro doručování: Thákurova 7, Dejvice, 160 00, Praha 6
zastoupení: Ing. Petr Matějka, Ph.D, tajemník
zast. ve věcech techn.: xxxx
IČ:  68407700                                                           DIČ: CZ 68407700
bankovní spojení: xxxx
(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Karlovy Vary
se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
zastoupení: xxxx
zast. ve věcech techn.: Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem: Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 00074811, zastoupená: xxxx
IČ:00254657                                                             DIČ:CZ00254657
bankovní spojení: xxxx

ID datové schránky: xxxx
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“)

1.	Článek II. odst. 1  Smlouvy se mění a nahrazuje takto:

Termín splnění předmětu této smlouvy je do  31. 1. 2022 

2.	Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.	Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

4.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.   

V Karlových Varech dne ………………….               V Praze dne ………………….

…………………….                                                ………………………….
			                                              Ing. Petr Matějka, Ph.D. 
					                          tajemník FSv 
(za objednatele)	      (za zhotovitele)