DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. MAS-85a/85/21 ze dne (dále jen "Smlouva o dílo")

I. Smluvní strany
 
1.1 Objednatel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště SCHKO Poodří
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 62933582
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 596 133 673
Zastoupena: Mgr. Jan Klečka Ph.D., ředitel RP SCHKO Poodří

(dále jen ”objednatel”)
 
a
 
1.2 Zhotovitel
 
JC Forestgang s.r.o.
Sídlo:Veletiny 74, 687 33 Veletiny
Zastoupený: Jan Cimala
Bankovní spojení: xxx
IČO: 08755779
DIČ: CZ08755779

(dále jen ”zhotovitel”)

II.
2.1 Bod 4.1 smlouvy o dílo se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31.3.2022.

Důvodem je průběh počasí - sněhová pokrývka znemožňuje odklizení posečené hmoty.

III.
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
3.4 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V ...................	 	dne	..............2021	 	V .................	 	dne ...................2021	 	
 	 	 	
Objednatel:	 	Zhotovitel:	

Mgr. Jan Klečka Ph.D.
ředitel RP SCHKO Poodří	 	Jan Cimala