/SO001677.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 41200/2021
na izolace střešního pláště na stanici Č. C 34, ul. Sekaninova v Hradci Králové
uzavřená
dle § 2586 a násl. Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Na Brně 362/15, Hradec Králové 500 06
Bankovní spojení: Komerční banka HK 6.0. 5307511/0100
IČO: 25282174	DIČ: CZ25282174
Obchodní rejstřík: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765
Zastoupen Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. - předsedou představenstva
e-mail pro zasílání faktur: smidlova@thhk.cz
na straně jedné (dále jen objednatel)
Zhotovitel:
Aramova s.r.o.
Střelecká 907/43, 50002 Hradec Králové
Bankovní spojení: 2000787869/2010
IC: 27559220	DIC: CZ 27559220
Obchodní rejstřík: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25991,
Zastoupen:	Františkem Cestrem- jednatelem
na straně druhé (dále jen zhotovitel)
Dodatkem č. 1 se nahrazují následující původní články Smlouvy o dílo (dále SoD) z důvodu výsledku tahových zkoušek provedených 23.09.2021 a dále vyjádření statika o nemožnosti využiti přitížení kačírkem z 30.09.2021 (viz příloha Č. 2 — vyhodnocení výtažných zkoušek). Proto bude mechanické kotvení nahrazeno vakuovým kotvením.
Článek III.
Předmět smlouvy
1.	Předmětem této smlouvy je oprava 54,2% hydroizolace střešního pláště na předávací stanici C 34 v Sekaninově ulici v Hradci Králové z celku (392,5 m2).
2.	Vzhledem k výsledku tahových zkoušek provedených 23.09.2021 bude mechanické kotvení nahrazeno vakuovým kotvením, v rozsahu schválené cenové nabídky zhotovitele, která nahrazuje původní přílohu SoD a jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.
3.	Podmínky pro realizaci díla:
a)	klimatické podmínky: bez deště a silného větru,
b)	stav připravenosti staveniště pro provedení předmětu díla dle této smlouvy: - přípojka el. 220 V, možnost odebrání vody v potřebném množství.
Článek IV.
Doba pinění
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:
-Termín zahájení prací:	8.11.2021
-Termín dokončení prací:	23.12.2021
-Termín předání staveniště:	8.11.2021
V případě, že objednatel nepředá staveniště v uvedených termínech, posouvá se termín
dokončení díla o dny prodlení s předáním staveniště.
Dodatek č.1 k SoD Č. 4/200/2021

	Dodatek 6.1 k SoD Č. 4/200/2021	.		

2
Článek V.
Cena díla
1.	Smluvní strany se dohodly na změně smluvní ceny díla určeného čl. Ill tohoto dodatku č. 1 ve
výši:
253.058,86 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)
(slovy: dvě stě padesát tři tisíc padesát osm korun osmdesát šest haléřů českých)
DPH bude v přenesené daňové povinnosti.
2.	Výše uvedená smluvní cena zahrnuje náklady potřebné k realizaci a předání díla zhotovitelem, v rozsahu cenové nabídky zhotovitele. Objeví-li se v průběhu realizace potřeba prací, které nebylo možné ve chvíli uzavření SoD předvídat a ty tak nemohly být zohledněny v cenové nabídce, bude cena díla po vzájemné dohodě smluvních stran upravena.
3.	Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura vystavená zhotovitelem. Za termín proplacení faktury se považuje den, kdy fakturovaná částka bude objednatelem přikázána k proplacení.
Článek Xl.
Platební podmínky
1.	Objednatel prohlašuje, že má zajištěné dostatečné finanční prostředky pro úhradu dohodnuté ceny za dílo podle SoD, a že provedené dílo včas a řádně uhradí.
2.	Objednatel proplatí zhotoviteli zálohovou fakturu ve výši 60% z ceny předmětu smlouvy za materiál na vakuový system. Konečná fakturace díla proběhne jednorázově po předání díla na základě vystavené faktury zhotovitelem.
3.	Farktura bude vystavena se splatností 14 dní. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu . objednateli nejpozději druhý den od dne jejího vystavení. V případě prodlení může objednateC. na zhotoviteli požadovat oprávněné náklady, které by vynaložil v důsledku tohoto prodlení (např. v důsledku nedodržení termínu DOZP apod.).
4.	Veškeré faktury budou zasílány pouze na e-mail objednatele: smidlova@thhk.cz
Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změny.
Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Dodatek nabývá platnosti v den podpisu a účinnosti v den zveřejnění v centrálním registru smluv.
Příloha 6.1. cenová nabídka zhotovitele ze dne 8.10.2021
Příloha č.2. vyhodnocení výtažných zkoušek
	5.11.2021
V Hradci Králové dne: ............ .....................

•

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.	František Cestr předseda představenstva	jednatel	.