Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Evidenční číslo objednatele: 5121000066
Evidenční číslo zhotovitele: 501/2021

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

VW WACHAL a.s.
se sídlem na adrese: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976
IČ: 25567225
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
(dále též jen „zhotovitel“)

Preambule
V návaznosti na vyhlášené zadávací řízení uzavřely smluvní strany dne 29.3.2021 smlouvu o dílo. V dosavadním průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna řada nesouladů projektové dokumentace a skutečného stavu budovy. S ohledem na tuto skutečnost proto smluvní strany v dosavadním průběhu provádění stavebních prací projednaly řadu změnových listů, kterými dohodly změny v rozsahu předmětu díla. Zároveň s těmito změnovými listy a v návaznosti na ně smluvní strany rovněž projednaly úpravu harmonogramu provedení díla. 
V souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů, tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:
Součástí DPS jsou i vyjádření dotčených orgánů státní správy i další správní rozhodnutí získaná pro provedení stavby, které mohou obsahovat závazné podmínky pro provedení díla a zhotovitel je povinen tyto podmínky dodržet. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005, ZL007, ZL008, ZL009, ZL010, ZL011, ZL013, ZL014, ZL016, ZL020, ZL021, ZL026, ZL027, ZL033, ZL035.
2.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2, které se nahrazuje novým zněním takto:
Dílo bude provedeno nejpozději do 15.7.2022. 

3.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005, ZL007, ZL008, ZL009, ZL010, ZL011, ZL013, ZL014, ZL016, ZL020, ZL021, ZL026, ZL027, ZL033, ZL035. V návaznosti na tyto změny došlo ke zvýšení ceny díla o 8 363 150,72 Kč bez DPH. Částky v bodě 6.1 smlouvy se mění takto:
cena bez DPH: 145 647 109,81 Kč (jednostočtyřicetpětmilionůšestsetčtyřicetsedmtisíc jednostodevětkorunaosmdesátjedenhaléř)
sazba DPH: 21%
DPH: 30 585 893,06 Kč (třicetmilionůpětsetosmdesátpěttisícosmsetdevadesáttři
koruny a šest haléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 176 233 002,87 Kč 
(jednostosedmdesátšestmilionůdvěstětřicettřitisícdvěkorunyaosmdesát sedm haléřů)

4.	V ust. 29.7 se upravuje bod c) tohoto znění:
c) Příloha 3 – Finanční a časový harmonogram upravený na základě dodatku č. 1
5.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávající nadále v platnosti.
6.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze, dne						V Praze, dne 

Za objednatele:					Za zhotovitele:

____________________________			___________________________
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.,            		Ing. Ondřej Wachal
prorektorka pro výstavbu                             		místopředseda představenstva
České vysoké učení technické v Praze		VW WACHAL a.s.