Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem:  Thákurova 7, 166 29 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: 	xxxx
Č. účtu : xxxx
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
zastoupená: Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
(dále jen „Objednatel“)

    a

INSTALACE Praha, spol. s r.o.
se sídlem: Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:  45804371
DIČ: CZ45804371
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11753
Bankovní spojení:  xxxx
Č. účtu: xxxx
zastoupený: Ing. Jaroslavem Štočkem, jednatelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxx
e-mail: xxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
		
S ohledem na to, že:
A)	Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2021 smlouvu o dílo č. 1121000585 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu FSv – Stavební úpravy 1.PP budovy „D“ Fakulty stavební, ČVUT v Praze, změna dispozice bývalého počítačového sálu v rámci zřízení serverovny – úpravy technologie - projekt“ (dále jen Smlouva);
B)	V průběhu plnění Smlouvy doporučil stavební úřad jiné technické řešení, konkrétně umístit technologii chlazení na střechu budovy;
C)	Objednatel a Zhotovitel se dohodli na přepracování Projektové dokumentace v části 4 „chlazení nové serverovny“ v souladu s požadavkem stavebního úřadu, které vyžaduje prodloužení lhůty pro předání Projektové dokumentace;
dohodly se smluvní strany na následujícím: 

1)	Čl. III odst. 2 Smlouvy se mění a nahrazuje takto:
„Zhotovitel je povinen řádně dokončenou Projektovou dokumentaci stavby podle této Smlouvy předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději do 28.2. 2022.“

2)	Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3)	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

V Praze dne ___________                                       V Praze dne ___________

Objednatel:								Zhotovitel:

__________________________________		____________________________
Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník fakulty				Ing. Jaroslav Štoček, jednatel