SMLOUVA O DÍLO
C.	SO001698	

(dále jako SoD)
uzavřená dle paragrafu 536 a souvisejících paragrafů zákona č.513/1991 Sb. 
Obchodní zákoník, v platném mění na provedení stavebních prací. 
Smluvní strany
Objednatel:
Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
IČ: 25282174 *
DIČ: CZ25282174
Zapsaná u OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1765
Zastoupená:		Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. — předsedou představenstva Zástupce ve věcech smlouvy: Ing. Petr Juránek — místopředseda představenstva e-mail: juranek@thhk.cz, r
Bankovní spojení:	5307-511/0100
dále jen „Objednatel"
Zhotovitel:
TOBOS s.r.o.
U Pošty 15, 533 52 Stare Hradiště
IČ	25952994
DIČ: CZ25952994
Zapsaná u OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 16856
Zástupce ve věcech smlouvy Tomáš Hladík —jednatel
e-mail: tomas.hladik@tobos.cz,
Záležitosti realizace:	Ing. Miroslav Brázda — výrobní ředitel
e-mail: brazda@tobos.cz, r
Technický dozor Zhotovitele: Ing. Petr Dvořák
e-mail: dvope@email.cz, n
Bankovní spojení: 35-9508310297/0100, KB Pardubice dále jen „Zhotovitel"
Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že dle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba jiné osoby.
II. Předmět plnění
2.1. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací (dále PD) vypracovanou autorizovaným projektantem Ing. Bílkem a cenovou nabídkou na základě položkového rozpočtu zhotovitele rozdělenou na část (i) - cenová nabídka stavebních prací na část předávací stanice B06 a část (ii) - cenová nabídka stavebních prací na část skladových prostor, které obě jako příloha Č. 1 tvoří nedílnou součást SoD (vše dále take jako „dílo").

Smluvní strany, odlišně od cenové nabídky (i) a (ii) v příloze Č. 1 ujednávají tměnu výplní. V rozpočtech uvedené plastové dveře a vrata budou nahrazeny hliníkovými v souladu s přílohou Č. 2, která tvoří nedílnou součást SoD. Barevný odstín hliníkových vrat a dveří se ujednává základní, tmavě šedivý.
Smluvní strany svorně stvrzují, že PD byla Zhotoviteli předána a tento prohlašuje, že se s ní podrobně seznámil a veškerá další ujednání SoD z této PD vycházejí a jsou s ní v souladu.
Předmětem plnění je rovněž likvidace odpadu vzniklého v souvislosti s realizací plnění.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s SoD, s cenovými nabídkami v příloze č. 1 s přihlédnutím ke změnám uvedeným výše a podle platných právních předpisů, zákona 6.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a předpisů souvisejících, platných ČSN, technických předpisů, vztahujících se na dílo jako celek.

t,

2.2. Veškeré činnosti související se zajištěním předmětu plnění díla zajistí zhotovitel vlastními pracovníky. Zhotovitel prohlašuje, že si místo plnění důkladně prohlédl, seznámil se s PD a s veškerými podmínkami na místě plnění a jeho okolí, a neshledal v nich žádné překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit nebo ovlivnit provedení díla v termínu dále v SoD uvedeném, v kvalitě stanovené jeho nabídkou a za cenu za dílo v SoD ujednané. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace jakéhokoliv z podkladů předaných zhotoviteli vztahujících se k dílu, případné chyby v podkladech jsou však důvodem k nápravě. Pokud taková situace nastane a vznikne z ní nutnost změnit termín plněni, cenu plnění nebo na žádost objednatele se smluvní strany dohodnou na vícepracech, musí být v takových případech vždy uzavřen písemný dodatek k SoD.
III.	Místo plnění 
Místem provedení díla je objekt předávací stanice tepla B06, ul. Veverkova, Hradec Králové.
IV.	Termín plnění 
Provedením díla se rozumí řádná realizace díla v souladu s čl. II. Předmět plnění. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle specifikace čl. II. do 31. dubna 2021 pod podmínkou, že mu objednatel předá místo plněni nejpozději do 15.1.2022 na základě písemného předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude potvrzení o předání jednoho klíče od stávajících vstupních dveří do objektu předávací stanice B06.
V.	Sjednaná cena plněni a platební podmínky 
5.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně smluvní cenu díla, jejíž výše je
dohodnuta smluvními stranami takto:
Cena za část díla (i) - na předávací stanici B06 bez DPH:
212 061,36 Kč + příplatek za Al dveře ve výši 4.700,- Kč = 216 761,36 Kč
(slovy: dvěstě šestnáct tisíc sedmset šedesát jedna koruna třicet šest haléřů)
Cena za část díla (i) - na skladových prostorách bez DPH:
460 945,78 Kč + příplatek za Al dveře ve výši 4700,-KČ + příplatek za Al vrata ve výši 9961,- Kč
= 475.606,78 Kč
(slovy ětyřista sedmdesát pět tisíc šestset šest korun sedmdesát osm haléřů)
Dílo spadá do režimu přenesené daňové povinnosti, dle platného zákona o DPH.

5.2. Smluvní cena je stanovena pro rozsah plnění dle čl. II SoD jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré předpokládané náklady, včetně všech souvisejících činností přičemž se ujednává, že zhotovitel bude fakturovat cenu podle skutečně vynaložených nákladů, které doloží k faktuře ve shodné struktuře položkového rozpočtu jako cenovou nabídku v přiloze č. 1.
5.3. V případě objednatelem vyžádaných víceprací, dohodnou smluvní strany v písemném dodatku SoD novou výši ceny díla.
5.4. Daňový doklad bude vystaven samostatně na dílo části (i) pro předávací stanici B06 a samostatně za dílo Usti (ii) skladových prostor.
5.5. Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona 6.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona 6.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přebírá odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí určených k provedení díla (zabudovaných i nezabudovaných) pro určení sazby DPH.
5.6. Objednatel je oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo bude-li obsahovat finanční nárok zhotovitele za práce a plnění, které nebude ke dni vystavení dokladu hotové či předané. V takovém případě se daňový doklad považuje za neoprávněný.
5.7. Faktura - daňový doklad bude zhotovitelem vystaven po protokolárním převzetí obou částí díla, tj. Usti (i) předávací stanice B06 a části (ii) skladových prostor, bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Faktura bude vystavena se shodným datem, ke kterému došlo k protokolárnímu předání díla.
5.8. Splatnost vystavené faktury se sjednává 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu objednatele. Daňový doklad bude zaslán v elektronické podobě ve formátu *.pdf na emailovou adresu: juranek@thhk.cz. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu kupujícímu nejpozději druhý den od dne jejího vystavení. V případě prodlení může kupující na prodávajícím požadovat oprávněné náklady, které by vynaložil v důsledku tohoto prodleni (např. v důsledku nedodržení termínu DOZP apod.). Za termín proplacení faktury se považuje den, kdy fakturovaná částka bude kupujícím přikázána k proplacení.
5.9. Zhotovitel souhlasí, že pokud se během realizace díla stane nespolehlivým plátcem a dále by objednatel mohl naplnit podmínky 109 zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/1994 Sb. v pozdějších znění, bude úhrada za dílo provedena zhotoviteli bez příslušné daně vyčíslené na daňovém dokladu. Tuto daň objednatel zaplatí a odvede příslušnému finančnímu úřadu za zhotovitele. Pokud tato skutečnost nebude objednateli známa a bude provedena úhrada daňového dokladu včetně DPH, bude objednatel po zhotoviteli požadovat vrácení uhrazené daně, kterou musel uhradit za zhotovitele. Zhotovitel souhlasí s úhradou nákladů právně souvisejících objednateli v případě vzniklé na základě této skutečnosti.
VI. Záruka za Předmět plnění 
6.1. Zhotovitel poskytuje záruku na vyhotovené dílo v délce 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí objednatelem.
6.2. Reklamaci lze uplatnit písemně, i elektronickou formou nejpozději do posledního dne záruční lhůty. Reklamace odeslaná objednavatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
6.3. Během záruční doby není možno provádět jakékoliv zásahy do převzatého díla bez souhlasu zhotovitele. V opačném případě hrozí nedodržení záručních podmínek.
6.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vad váznoucí na díle, že v průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněné a písemně reklamované vady.
6.5. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od písemného uplatnění reklamace objednatelem reklamované vady prověřit a navrhnout způsob a termín odstranění reklamovaných vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady.

6.6. Pro vady bránící užívání a provozu a případné havárie se sjednává, že zhotovitel zahájí jejich odstraňování neprodleně po nahlášení a zavazuje se je odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Ke splnění tohoto závazku disponuje zhotovitel dostatečnou kapacitou vlastních pracovníků ke všech potřebných profesích a nezbytnou mechanizaci.
6.7. Pokud zhotovitel neodstraní bezezbytku reklamovanou vadu nebo vady v termínu dohodnutém a uvedeném v zápise o reklamaci je objednatel oprávněn bez souhlasu zhotovitele odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na opravu.
6.8. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem následujícím po odstranění reklamované záruční vady, avšak nejméně tak, že neskončí dříve, než po uplynutí 6 měsíců (u vad materiálu) a 3 měsíce (u vad prací) ode dne odstranění reklamované vady.
6.9. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynů objednatele nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy zjistil či s vynaložením odborné péče měl zjistit nevhodnost pokynů objednatele, je zhotovitel odpovědný za veškeré vady díla a veškeré Škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů objednavatele.
VII. Předání Předmětu plnění
Po dokončení celého díla vyzve zhotovitel nejpozději 2 dny předem objednatele k předání díla. Zástupce zhotovitele a zástupce objednatele uvedou v zápise, zda dílo předávají respektive přejímají. Zápis o předání a převzetí díla vypracuje zhotovitel. Nedílnou součástí předávacího protokolu, bez které nebude dílo předáno a převzato bude:
•	prohlášení o shodě pro použité materiály a zařízení podle zákona Č. 22/1997 Sb. o shodě a nařízení vlády 178/97 Sb.
•	certifikáty k jednotlivým použitým materiálům	-
•	stavební deník
•	doklad o uložení suti a odpadu v množství dle položkového rozpočtu
•	další vyžádané podklady stavebního úřadu, pro zajištění kolaudačního souhlasu
VIII. Sankce za porušení smluvních povinností
8.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s termínem jeho dokončení a předání. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, pokud prodlení s plněním jeho povinností bylo způsobeno okolnostmi na straně objednatele.
8.2. Prodlení objednatele se zaplacením díla delším než 7 dní opravňuje možnost zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
8.3. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, může uplatnit objednatel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu odstranění vad uvedených v zápise o reklamaci vad díla, může uplatnit objednatel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
8.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení faktury s výzvou k zaplacení smluvní pokuty druhé straně. Zaplacení dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady způsobených Škod v plné výši. Je proto možný souběh úhrady smluvní pokuty a vzniklé Škody. 8.5. Objednatel je oprávněn odstoupit kdykoli od této smlouvy na základě písemného oznámení zaslaného zhotoviteli. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady na zhotovené práce ke dni doručení oznámení o odstoupení od smlouvy a dále může uplatnit volbu odebrat zhotoviteli nakoupený materiál pro dokončení díla.

8.6. Nedodá-li, zhotovitel veškeré a řádné podklady pro řádné zkolaudování díla, může objednatel na něm požadovat oprávněnou pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení a absentujíci doklad. Termínem řádného dodání všech dokladů se považuje termín protokolárního předání díla a vystavení faktury. Za řádné podklady se považuji takové, které budou uznány stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení. Uplatnění pokuty může objednatel učinit formou faktury, kterou je oprávněn vystavovat opakovaně v týdenních intervalech až do okamžiku, kdy budou všechny řádné podklady předány.
IX. Ostatní ujednání
9.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle protokolárně staveniště společně s předáním jednoho klíče od vstupních dveří.
9.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel započne stavební práce nejprve na části (i) předávací stanice B06.
Před zahájením prací zhotovitel učiní taková opatření, která ochrání technologii předávací stanice před prachem a poškozením. Zmíněná ochranná opaření schválí objednatel zápisem do stavebního deníku a jejich účinnost bude v průběhu prací kontrolovat. Při zjištění nedostatečné ochrany a hrozícího rizika poškození technologie předávací stanice má objednatel právo práce 72 stavit do doby nápravy ze strany zhotovitele. Ujednává se, že v důsledku zastavení prací z uvedeného důvodu nejde k posunutí termínu plnění.
Zhotovitel je povinen započít práce na stavbě dělící zdi mezi prostory předávací stanice B06 a skladovým prostorem a poté pokračovat pracemi, které nejprve zajistí zbudování kompletního díla na části (i) předávací stanice B06 a teprve po jejím dokončení započne práce v již oddělené Části (ii) skladových prostor.
9.3. Zhotovitel provede vyklizení staveniště do termínu předání.
9.4. V případě prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen včas pozvat zástupce objednatele k provedení kontroly především stavební dozor pokud je. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Nedostavil-li se zástupce objednatele ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, provede zhotovitel tuto kontrolu a zdokumentování stavu bez účasti objednatele, o čemž provede zápis do stavebního 'deníku (dále SD). Po provedení této kontroly s kladným výsledkem může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že účast na kontrole byla znemožněna překážkou na straně objednatele, může požádat objednatel o dodatečnou kontrolu, ale je povinen zhotoviteli uhradit náklady s tímto spojené.
9.5. V případě, že provedení díla má být prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se toto provedení díla za dokončené až po výsledku úspěšných zkoušek. K těmto zkouškám bude objednatel včas pozván zhotovitelem. Případná neúčast zástupce objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl včas pozván, nebrání k provedení zkoušek.
9.6. 0 výsledku zkoušek se provede zápis, podepsaný oběma stranami. Není-li zástupce objednatele přítomen, podepíše zápis místo něho nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě technický dozor osobou jím určenou.
9.8. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat na vlastní náklad v souladu s příslušnými právními předpisy o odpadech v platném znění.
9.9. Smluvní strany se dohodly, že se budou při vedení stavebního deníku řídit podle vyhlášky o dokumentaci staveb Č. 499/2006 Sb. Stavební deník musí být v průběhu stavby oběma smluvním stranám trvale přístupný.
9.10. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré potřebné informace týkající se díla a umožnit zhotoviteli přístup.
9.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního

,1
prostředí a. ČSN. Pokud porušením citovaných předpisů vznikne jakákoliv Škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
9.12. Objednatel je povinen zajistit volný přístup k přípojce el. energie 220 V a vody. Ceny za spotřebované energie a vody nebudou zhotoviteli fakturovány.
9.13. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby, za veškerá bezpečnostní opatření a případné úrazy v souvislosti s prováděním díla.
9.14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za Škody způsobené svojí činností na zhotoveném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za Škody způsobené stavební činností třetí na stavbě nezúčastněné osobě tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku třetích osob tj. vjezdů, plotů, objektů a prostranství a inženýrských sítí ve vlastnictví třetích osob uvede zhotovitel poškozené nejpozději k předání díla bezplatně do původního stavu. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených jeho činností na stavbě.
9.15. Zhotovitel zodpovídá za veškeré případné Škody vzniklé z jeho činnosti při realizaci díla. 9.16. Zhotovitel zajistí ohraničení té části pozemku, kde by mohlo dojít k ohrožení lidí pohybujících se v prostoru, kde probíhá realizace díla.
X. Pojištění 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění věcí, jiného majetku a odpovědnosti za škodu a že výše pojistné částky, jakož i pojistné plnění v případě pojistné události, odpovídají hodnotě díla. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu práce na díle.
XI. Závěrečná ujednání 
111. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k podnikatelské činnosti související s plněním této SoD dle živnostenského zákona a dále prohlašuje, že je schopen dílo podle SoD provést, a to za podmínek dohodnutých v této SoD.
11.2. Tato SoD se řídí právním řádem České republiky. Pokud dojde mezi smluvními stranami k jakémukoliv sporu, smluvní strany se pokusí rozhodnout tento spor smírnou cestou. Pokud se případný spor mezi smluvními stranami i přes úsilí vynaložené oběma smluvními stranami o dohodu nepodaří vyřešit smírnou cestou, bude nadále řešen v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze podle je Řádu a pravidel, třemi rozhodci. Každá ze smluvních stran sporu určí jednoho rozhodce a tito rozhodci zvolí předsedajícího rozhodce. Jestliže smluvní strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní do 14 dnů od doručení výzvy druhé smluvní strany, nebo nemohou-li se jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce, jmenuje rozhodce nebo předsedajícího rozhodce na žádost kterékoliv ze smluvních stran sporu předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem konání rozhodčího řízení je Hradec Králové. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozhodčí řízení, včetně ústního jednání, písemných důkazů a korespondence, bude vedeno v českém jazyce. Rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné, pro obě smluvní strany závazné a bude obsahovat výrok o nákladech řízení.
11.3. Všechna práva a povinnosti vzniklé z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
11.4. SoD lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, přičemž dodatkem je dokument, který je jako dodatek označen, očíslován a podepsán osobami oprávněnými jednat ve věcech této SoD.
11.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření této SoD, odešle SoD k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 0 uveřejnění SoD bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

11.6. Smluvní •strany berou na vědomí, že nebude-li SoD zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění SoD v registru smluv.
11.7. Smluvní strany prohlašuji, že si SoD řádně přečetly, že ji rozumí, souhlasí s jejím obsahem, a že tato byla sepsána na základě platných údajů a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
11.8. Nabídka zhotovitele byla s přihlédnutím k ceně a podmínkám provedení díla vyhodnocena objednatelem 24.11.2021 jako nejlepší.
11.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
11.10. Pro případ, kdy je v SoD uvedena e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
11.11. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by SoD obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje prodávající svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb. kupujícímu. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 11.12. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se nenacházejí v úpadku podle insolvenčního zákona a ani jim taková situace nehrozí a že vůči nim nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Byl-li vůči některé ze smluvních stran podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
11.13. SoD je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
Přílohy:
Příloha Č. 1 — Cenová nabídka zhotovitele (i) a (ii) s položkovým rozpočtem
Příloha Č. 2— Specifikace výplní stavebních otvorů — hliníkových vrat a dveří
/
v Hradci Králové dne 5.1.2022		

Objednatel:	Zhotovitel:

1."

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.	Tomáš Hladík, jednatel