Dohoda o zániku závazku 

dle ust. § 1981 a souv. Občanského zákoníku vzniklého na základě smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2018 mezi

České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6	
IČ: 		68407700
DIČ: 		CZ 68407700
Zastoupena: 	Ing. Jiřím Boháčkem, kvestorem
na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

a	
TECHNICO Opava s. r. o.
se sídlem 	Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 	25849204
DIČ: 	CZ25849204
Zastoupena: 	Ing. Martinem Uličným, jednatelem
Zapsaná v OR vedeným KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21841
a 
METROPROJEKT Praha a. s.
se sídlem I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha	
IČ: 	45271895
DIČ: 	CZ45271895
Zastoupena: 	Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
		Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva
Zapsaná v OR vedeným MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

ve sdružení bez právní subjektivity „TECHNICO + METROPROJEKT – ČVUT“ za něž jedná TECHNICO Opava s. r. o.
na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“
 
dále společně v textu též „Smluvní strany“

Preambule
1.	Dne 6. 9. 2018 byla mezi Smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce objektu B, ČVUT, Fakulta stavební, na adrese Thákurova 7, 160 00 Praha 6 – Dejvice, za bližších podmínek v ní sjednaných (dále v textu jen „SOD“).
2.	 Smluvní strany za níže uvedených podmínek uzavírají vzájemnou dohodu o ukončení závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 1981 a násl. občanského zákoníku (dále v textu jen „Dohoda“). 

II. Předmět Dohody
Smluvní strany se dohodly, že závazek ze SOD zaniká ke dni nabytí účinnosti Dohody za splnění následujících, v Dohodě dále stanovených, podmínek:

1.	Předmět Díla dle čl. 1.2 písm. a) SOD (Stavebně technický průzkum) se má Objednatelem bez dalšího za již akceptovaný v termínu dle čl. 8.1 písm. a) SOD s tím, že předmět Díla dle čl. 1.2 písm. a) SOD byl již zhotoviteli v dohodnutém, omezeném rozsahu objednatelem splněn a objednatelem uhrazen.
2.	Předmět Díla dle čl. 1.2 písm. b) SOD (Dokumentace pro stavební povolení) se má Objednatelem za pro účely Dohody akceptovaný ve stavu, v jakém byl předán Zhotovitelem Objednateli dne 25. 8. 2021. Dne 28. 2. 2022 bylo po předchozí výzvě Objednatele ze dne 16. 2. 2022 předáno 6 pare projektové dokumentace vyhotovené dle čl. 1.2 písm. b) SOD podepsané autorizovanou osobou a opatřené autorizačními razítky v souladu s čl. 2.12 písm. a) SOD. Předmět Díla dle čl. 1.2.písm. b) SOD byl předán rovněž na datovém nosiči s elektronickou podobou předmětu Díla dle čl. 1.2. písm. b) SOD ve formátu .pdf a .dwg. Objednatel projektovou dokumentaci zmíněnou ve větě předchozí přijímá. Smluvní strany potvrzují, že cena za část Díla dle čl. 1.2. písm. b) SOD byla již zhotoviteli objednatelem v plném rozsahu uhrazena.
3.	Předmět Díla dle čl. 1.2 písm. d) (Inženýrská činnost spočívající v projednání projektu s dotčenými orgány státní správy (DOSS) s cílem získání pravomocného stavebního povolení) byl Objednatelem akceptován ve stavu ke dni 25. 8. 2021, kdy došlo k předání díla pouze v omezeném rozsahu. Cena předaného Díla vzhledem k v tomto článku uvedeným skutečnostem činí Kč 80.000- Kč bez DPH, což Smluvní strany akceptují.   
4.	Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění SOD dle čl. 1.2 písm. c), e) až j) nebude Zhotovitelem realizován, tedy, že předmět plnění dle SOD bude tím to zúžen.
5.	Smluvní strany se rovněž dohodly, že k datu uzavření této dohody došlo   k rozšíření předmětu plnění SOD (Díla) ve stupni dokumentace pro stavební povolení a to v rozsahu (dále v textu jen „vícepráce“):
a)  požadavku změny dispozičního řešení (PC poslucháren): za touto Dohodou stanovenou smluvní cenu ve výši 54.000,- Kč bez DPH;
b)  nových rozvodů silnoproudu: za touto Dohodou stanovenou smluvní cenu ve výši 15.000,- Kč bez DPH;	
c) změny požárně bezpečnostního řešení – únik přes budovu „C“: za touto Dohodou stanovenou smluvní cenu ve výši 54.000,- Kč bez DPH.
Cena těchto provedených víceprací, které činí celkem 123.000,- Kč bez DPH, jsou součástí projektové dokumentace předané Zhotovitelem Objednateli a Objednatelem přijaté dne 28.2.2022, v 6 (šesti) listinných pare a na datovém nosiči ve formátu .dwg s podpisy autorizovaných osob Zhotovitele, což Smluvní strany akceptují.

III. Bližší podmínky a rekapitulace finančního vyrovnání mezi Smluvními stranami
Smluvní strany se dohodly na bližších podmínkách finančního vyrovnání k ukončení závazků ze SOD touto Dohodou následovně:

1.	Cena Díla za činnost dle čl. 1.2 písm. a) a 6.3 písm. a)  SOD a čl. II. odst. 1. Dohody činí 200.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany mají za nepochybné, že předmětná částka tohoto odstavce a článku byla již před nabytím účinnosti Dohody Zhotoviteli Objednatelem řádně uhrazena.
2.	Cena dílčí části Díla za činnost dle čl. 1.2 písm. b) a 6.3 písm. b) SOD a čl. II. odst. 2. Dohody činí částku 1.355.000,- Kč bez DPH. Smluvní strany mají za nepochybné, že předmětná částka tohoto odstavce a článku byla již před nabytím účinnosti Dohody Zhotoviteli Objednatelem řádně uhrazena.
3.	Cena dílčí části Díla za činnost dle čl.6.3 písm. d) SOD a čl. II odst. 3 Dohody činí
po Smluvními stranami dohodnuté slevě 80.000,- Kč bez DPH.
4.	Cena za činnost resp. rozšířeného předmětu plnění SOD dle čl. II. odst. 5 Dohody byla tímto Smluvními stranami sjednána po slevě na 123.000,-Kč bez DPH. 
5.	Cena za předmět plnění – činnosti dle čl. 1.2 písm. c) a e) až j) SOD nebude Zhotovitelem uhrazena, neboť předmět plnění dle čl. 1.2 písm. c) a e) až j) SOD nebude dle Dohody realizován.
6.	Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v celkové výši 175.000, - Kč z následujících důvodů: 
a)	Za dodání dílčí části Díla dle čl. 1.2 písm. b) SOD – dokumentace pro stavební povolení (etc.) v prodlení 175 dnů oproti smluvenému termínu dle čl. 8.1 písm. a) SOD; Výše smluvní pokuty činí 175.000,- Kč. 
7.	Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel poskytne touto Dohodou Objednateli další slevu z celkové ceny realizovaných částí Díla ve výši 28.000,- Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

1.	Smluvní strany prohlašují, že nabytím účinnosti Dohody při splnění jejích bližších podmínek dle čl. II. Dohody zaniká závazek SOD. 
2.	Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran budou nabytím účinnosti Dohody a splnění podmínek čl. II. Dohody Zhotovitelem vyrovnány. 
3.	Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že uzavřením této dohody  jsou vyrovnány veškeré jejich vzájemné a výslovně finanční závazky v souvislosti se SOD.  
4.	Smluvní strany prohlašují, že na základě Dohody nebudou po sobě vzájemně požadovat případnou úhradu ušlého zisku.
5.	Tato Dohoda podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona o registru smluv. Účinnost Dohody je podmíněna zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Zhotovitel.
6.	Tato Dohoda je vyhotovena v listinném vyhotovení ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7.	Na základě své vážné a pravé vůle připojují zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 28. února 2022

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

__________________________				______________________