DODATEK č.2 K SOD č. 7/2021 
I.SmluvnÍ strany 
Objednatel: 
Domov pro seniory Světlo 
IČ: 70869812 
se sídlem : Drhovle 44, 397 O 1 Písek 
zastoupený paní Mgr. Miladou Chylíkovou 
bankovní spojení: 
(dále jen objednatel na straně jedné) 
a 
Zhotovitel: 
Jaroslav Hadáček 
Sepekov 386 
Sepekov 398 5 I 
IČ: 12893331 
DIČ: CZ6709230825 
Bankovní spojení: 
I 
(dále jen zhotovitel na straně druhé) 
změna v: 
V. Cena díla, jeho fakturace a platební podmínky 
Cena díla se navyšuje o 188.190,11 bez DPH, s 15% DPH o 216.418,62 Kč 
Cena po navýšení je stanovena na 915.169,64 Kč bez DPH 
1.052.445,09 s DPH 
137.275.45 15% DPH 
Odůvodnění: 
Z důvodu nově zj ištěných skutečností, kdy po odbagrováni zeminy se ukázalo, že 
v podzemní trase vede potrubí TV a SV je souběžně vedeno potrubí rozvodů ÚT. Původní 
plán vybudování topného kanálu pouze pro 2 potrubí vedení tedy nestačí, je nezbytné 
vybudovat topný kanál celkem pro 4 trubní vedení. Šířka se tak zdvojnásobí v celém 
rozsahu. Tento záměr, tyto vícepráce, projednal objednatel se svým zřizovatelem, 
Jihočeským krajem, včetně OS OV. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet na vícepráce. viz příloha. 

Tento dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, vždy po jednom pro každou ze 
smluvních stran. 

V Orhovli dne 27.1.2022 
................. 

V Orhovli dne ..27.1.2022 

	

;" 

zhotovitel 

"i ,,;-:-: ::M"" v Sepekov 386 
;é01289333! 
1)1(: CZ670923082!' 
·nob.50?t1?77)i') (f? 

------ --- --_ --_ --- 

VERLAG 					Krycí list rozpočtu 											
DASHOFER 																			
Název stavby: 	Domov pro seniory Světlo 		Objednatel: 					IČ/DIČ: 						
Druh stavby: 	Rozšíření topného kanálu bez instalace 	Projektant: 					IČ/DIČ: 						
			topení 			Zhotovitel: 					IČ/DIČ: 						
Lokalita: 		Drhovle 44,39701 Písek 		Konec výstavby: 			Položek: 32 						
Začátek výstavby: 				Zpracoval: 													
JKSO: 											Datum: 						
						Rozpočtové náklady v Kč 											
A 	Základní rozpočtové náklady 			B I Doplňkové náklady 		C J Náklady na umístění stavby 						
HSV 	Dodávky 		58444,53 	Práce přesčas 			0,00 	Zařízení staveniště 					0,00 		
	Montáž 		104558,25 	Bez pevné podl, 			0,00 	Mimostav. doprava 					0,00 		
PSY 	Dodávky 		12527,99 	Kulturní památka 			0,00 	Územní vlivy 					0,00 		
	Montáž 		11207,17 					0,00 	Provozní vlivy 					0,00 		
"'Mli 	Dodávky 		0,00 					0,00 	Ostatní 					0,00 		
	Montáž 		0,00 					0,00 	NUS z rozpočtu 					0,00 		
Ostatní materiál 		0,00 					0,00 	NUS celkem 					0,00 		
Přesun hmot a sutí 		1 452,17 	DN celkem 			0,00 	NUS celkem za obj. 					0,00 		
ZRN celkem 		188 190,11 	DN celkem za obj. 			0,00 	ORN celkem 					0,00 		
											ORN celkem za obj. 					0,00 		
Základ 0% 		0,00 	Základ 15% 	188190,11 		Základ 21% 		0,00 	Celkem bez DPH 		. 	188 190,11 		
										" 				
				DPH 15% 	28228,52 		DPH 21% 		0,00 	Celkem včetně DPH 		'" 	216418,63 		
											I 				
Projektant 					Objednatel t . 		Zhotovitel J. s : - j ti li' ~ • 					
									Dom pro seniory s~etlo 			<, ú""v a..~", \ 	, 		
									gvle 44, 397 01 Plsek 			S98 51 Sepekov 386 					
						,tI I tV tJ) IČO:70869812 ® 				lČO 128 93 .:S3~, 			, .•.•.. ) 	
						, . I Tel.; 382769911 			Dl" r'L-;' 7r'') '!"',"?" .t\" 			
										•• ',' .ss t s.) '_"!>~,; ,VV 			
Datum razítko a podpis 				Datum razítko a oodois 				Datum razítko a oOd6Tť'" :: s: ",.,. , -, 'I, 			
									/ 			Copyright © 2021 Verlag Dashóřer. s r o 		
																			. 	

VERLAG 				Stavební rozpočet 								
DASHOFER 												
	Název stavby: Domov pro seniory Světlo 			Doba výstavby: 			Objednatel: 							
	Druh stavby: Rozšíření topného kanálu bez instalace topení 		Začátek výstavby: 			Projektant: 							
	Lokalita: 		Drhovle 44,39701 Písek 			Konec výstavby: 			Zhotovitel: 							
JKSO: 						Datum zpracování: 		Zpracoval: 							
č. 	Objekt 		Kód 	Zkrácený popis 					MJ 	Množství 	Cena/MJ 	Náklady (celkem v Kč) 	Náklady 	Hmotnost (t) 	I 	
					> 							(Kč) 	Dodávka 	Montáž 	celkem (Kč) 	Celkem/MJ 	Celková I 	
						n 										
					. 	- 		- 	-- 				0,00 						
			13 		Hloubené vykopávky 									49175,02 	49175,02 		0,0000 		
1 		139600012 RM 	Ruční výkop v hornině 3 					m3 	25,59 	1921,65 	0,00 	49175,02 	49175,02 	0,0000 	0,0000 		
					- 	. 	- 											
			16 		Přemístění výkop ku 								0,00 	2292,86 	2292,86 		0,0000 		
2 		162201203ROO 	Vodorovné přerníst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 				m3 	4,14 	274,85 	0,00 	1 137,88 	1 137,88 	0,0000 	0,0000 		
3 		162201102ROO 	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 				m3 	22,62 	51,06 	0,00 	1 154,98 	1 154,98 	0,0000 	0,0000 		
			17 		Konstrukce ze zemin 			- 					2018,75 	3101,86 	5120,61 		4,3200 		
4 		174101101ROO 	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 					m3 	5,52 	139,15 	0,00 	768,11 	768,11 	0,0000 	0,0000 		
5 		174101102ROO 	Zásyp ruční se zhutněním 					m3 	0,054 	539,94 	0,00 	29,16 	29,16 	0,0000 	0,0000 		
6 		175101201ROO 	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 					m3 	2,4 	1 801,39 	2018,75 	2304,60 	4323,35 	1,8000 	4,3200 	
			18 		Povrchové úpravy terénu 								0,00 	1110,90 	1110,90 		0,0000 	
7 		182001111ROO 	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 				m2 	30 	37,03 	0,00 	1110,90 	1110,90 	0,0000 	0,0000 	
			27 		Základy 								3508,06 	3833,51 	7341,57 		6,7767 	
8 		271570010RM 	Polštář hutněný pod základy 					m2 	32,27 	227,50 	3508,06 	3833,51 	7341,57 	0,2100 	6,7767 	
			31 		Zdi podpěrné a volné 								11760,24 	3101,55 	14861,79 		0,2694 	
9 		317940010RAA 	Osazení válcovaných profilů do č.12 					t 	0,245 	60660,37 	11 760,24 	3101,55 	14861,79 	1,0995 	0,2694 	
			41 		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 							11 516,04 	4410,72 	15926,76 		8,6940 	
10 		411121232RT3 	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm 				kus 	108 	147,47 	11 516,04 	4410,72 	15926,76 	0,0805 	8,6940 	
			61 		Úprava povrchů vnitřní 								33,49 	735,63 	769,12 		0,0297 	
11 		612100020RAA 	Začištění omítek kolem sokliků 					m 	8 	96,14 	33,49 	735,63 	769,12 	0,0037 	0,0297 	
LI 	163 	_ j P_odlahy a podlahové konstrukce __ 								21866,28 	12839,96 	34706,24 		14,0990 	
			---------------- - ------- ._---_._.~ 											

Domov pro seniory Světlo 

Strana 1 

Copyright © 2021 \/nrlag Dashofer, s.r.o. 

Č. 	Objekt 		Kód 		Zkrácený popis 			. 			. 													MJ 	Množství 	Cena/MJ 	Náklady (celkem v Kč) 	Náklady 		Hmotnost (t) 	
									. 			• 			' . 													
											, 																		
							.. 				1 						. 									(Kč) 					celkem (Kč) 				
																				~ "' 						Oodávka 	Montá~ 			Celj(emlM,J 	Celková 	
												_I, 				, 			.. 																
12 		631310032RAO 	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm 														m2 	32,27 	481,72 		8796,30 	6748,92 	15545,22 		0,2525 	8,1482 	
13 		631310031RAO 	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 8 cm 														m2 	8,27 	405,06 		1 773,71 	1576,18 	3349,88 		0,2020 	1,6705 i 	
14 		631361921RT5 	výztuž mazanin svařovanou sítl 																t 	0,1456 	55930,05 		6988,95 	1 154,47 	8143,42 		1,0663 	0,1552 	
15 		631311131ROO 	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tI. 8 cm 													m3 	1,65 	4647,10 		4307,32 	3360,40 	7667,72 		2,5000 	4,1250 	
				• -_.'I" 	,..-- ~ ...•.• 		••••••••••••. ?""""'_ 	. ~ 	~.~ 			• < 	. 	. 		..., ___ , - 		.~- 	- 	_ 	- 		... ~ ...•.. 	...•. --- ... 	,-- 	- 	.. 		
		711 			Izolace proti vodě 											t , 		~ 		" 							4769,44 	4246,46 	9015,90 			0,1534 ' 	
																			. , 														
16 		711111001RZl 	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 													m2 	22,2 	54,23 		786,07 	417,93 	1203,99 		0,0003 	0,0073 	
17 		711141559RZ1 	Izolace protí vlhk. vodorovná pásy přítavením 														m2 		30 	247,81 		3983,37 	3451,03 	7434,41 		0,0049 	0,1461 	
~ 		998711201ROO 	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 													% 	86,384 	4,37 		0,00 	377,50 	377,50 		0,0000 	0,0000 	
	- . 	- 		..__ - - 	...• 		. ~ - 	'_,'.E..:: 	.. 			r-' 	-- 	--- 	j' 	.. ' 			- 		-."'" .-.- 		__ , _.~ .. 	.........- ._- -- 	~- 		-- .~. 	--~ 	
		n1 			Po.~lahy z dlaždíc 																							7758,55 	8412,87 	16171,42 			0,0530 	
									. _. 	- 	. .. 		. 																				, 	
19 		771101210RT1 	Penetrace podkladu pod dlažby 																m2 	8,27 	53,47 		206,38 	235,86 	442,24 		0,0002 	0,0017 	
20 		771575111RT6 	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, do 45x45 cm 													m2 	8,27 	752,10 		1 312,73 	4907,13 	6219,87 		0,0058 	0,0481 	
21 		771479001 ROO 	Řezání dlaždic keramických pro sokliky 															m 		8 	107,18 		49,86 	807,58 	857,44 		0,0000 	0,0000 	
22 		771475014RT2 	Obklad soklíkú keram.rovných, tmel,výška 10 cm 													m 		8 	154,67 		158,06 	1 079,34 	1237,40 		0,0004 	0,0029 	
23 		771578011RT3 	Spára podlaha- stěna, silikonem 																m 		8 	59,35 		166,52 	308,29 	474,81 		0,0000 	0,0003 	
24 		900 	ROl 		Dodávka keramické dlažby 																	m2 		12 	488,75 		5865,00 	0,00 	5865,00 		0,0000 	0,0000 	
25 		998771201ROO 	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 													% 	150,9676 	7,12 		0,00 	1074,66 	1074,66 		0,0000 	0,0000 	
				_- 	, _..- - -- . _._ ._ ;.:; 		____ o __ ;..._-_. 	Jr ~ .. 			. 	_. 	_. 		-~ _. 	... 	- -._- 	- ~ 		
		87 			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 								, . 								1000,27 	258,80 	1259,07 		~, 	0,0004 	
									. . 	- 	- 															
26 		871351111ROO 	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm 												m 		4 	314,77 		1000,27 	258,80 	1 259,07 		0,0001 	0,00041 	
					__ __ _ ,_ .•• y. .•. 1# 	~. ,,,r ..•. _ .•. __ ._~....... _ 	. 	-"V' 	- 		- 			~ 	~. 	- . 	.. ~ 		- 	....• "1 	
		89 			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 																		203,55 	320,85 	524,40 			0,0000 i 	
																. 													
27 		899711122ROO 	Fólie výstražná z PVC šedá, šiřka 30 cm 															m 		30 	17,48 		203,55 	320,85 	524,40 		0,0000 	0,0000 I 	
					Bouránr k~~stiukci 	-" 						.. ...,.-- 	--.-.-- _,_ 	~ 				~- 					-- 	-- 				-- 		
		96 																								0,00 	S 770,70 	SnO,70 			3,7986 	
									. ....:__ 	_. 	- _. 									L 													
28 		965081702ROO 	Bouráni soklikú z dlažeb keramických 															m 		8 	28,86 		0,00 	230,92 	230,92 		0,0004 	0,0032 	
29 		965081712RTl 	Bouráni dlažeb keramických tl.t O mm, pl. do 1 m2 													m2 	8,27 	98,78 		0,00 	816,95 	816,95 		0,0200 	0,1654. 	
30 		965042121 RT2 	Bouráni mazanin betonových tI. 10 cm, pl. 1 m2 													m3 	1,65 	4680,50 		0,00 	7722,82 	7722,83 		2,2000 	3,6300 	
- 			- 		Proráž~~o~ a o';;ta"tní bouraci práce . 		. r: -- 				"" ~ 		.. 	~ 	-rr- 		N, , __ 	_ . 		.._.,.._ ._-~ .....•• 	. ,.,.. •. .,.. 			-~", .. " 	
		97 					-- 																	6537,86 	14605,90 	21143,75 			0,0086' 	
31 		970031250ROO 	Vrtáni jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm 														m 		4 	4190,00 		5521,12 	11 238,88 	16760,00 		0,0021 	0,0086 	
32 		970034250ROO 	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 250mm 													m 		4 	1095,94 		1 016,74 	3367,02 	4383,75 		0,0000 	0,0001 	

Domov pro seníory Světlo 

{ 1/.1. fU' Domov pro seníory Světlo 
	r ~ 	Drhovle 44, 397 01 Písek 
tJ . .ó'IČO:70869812 ® 
ce--.f" Tel.: 382789611 2 
Stra~a 2 
I 

I Celkové náklady: 	'n ~ 	188190,11 Kč I 
Copyright © 2021 Verlag Dashčřer, s.r.o.