SMLOUVA O DÍLO Č. ……………………
podle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

ČVUT v Praze, Fakulta stavební
se sídlem: Thákurova 7, 160 00 Praha 6
zastoupení: Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník
zast. ve věcech techn.: xxxx
IČ: 68407700                                                           DIČ: CZ 68407700
bankovní spojení: xxxx
(dále jen zhotovitel)
a

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
se sídlem: Křenová 131/35; 602 00 Brno
zastoupení: Ing. Ladislavem Minářem, CSc.     jednatel společnosti
zast. ve věcech techn.: Ing. Ladislavem Minářem, CSc.
IČ: 25301110                                                            DIČ: CZ25301110 
bankovní spojení: xxxx
číslo datové schránky: xxxx

(dále jen objednatel)

tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1.	Podle této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele práce a činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo Správy železnic s.o. číslo 120203/2021-SŽ-GŘ-O8 v tomto rozsahu: 

•	výstavba a testování čtyř laboratorních modelů pražcového podloží označených číslem 1 až 4 o minimálních vnitřních rozměrech (d×š×v) 2000 mm × 1000 mm × 1150 mm;
•	jednotlivé modely budou zhotovené z těchto stavebních materiálů: štěrkodrť frakce 0/32kv, štěrkodrť frakce 0/63kv, drcené kamenivo 0/90. Jeden z materiálů bude dodán ze dvou různých kamenolomů;
•	v průběhu výstavby laboratorních modelů bude stavební materiál adekvátně hutněn a bude měřena vlhkost stavebního materiálu (min. 3 zkoušky);
•	na vybudovaném laboratorním modelu bude ve výšce 1150 mm ode dna zkušebního boxu provedena jedna statická zatěžovací zkouška dle NF P 94-117-1 (Francie), jedna statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, dvě rázové zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou a dvě zkoušky membránovým objemoměrem pro zjištění objemové hmotnosti zhutněného stavebního materiálu (dle Přílohy, schéma 1); 
•	návazně bude horní vrstva laboratorního modelu v tloušťce cca 30 cm rozrušena a znovu adekvátně zhutněna. Ve výšce 1150 mm ode dna zkušebního boxu bude provedena jedna statická zatěžovací zkouška dle NF P 94-117-1, jedna statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, dvě rázové zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou a dvě zkoušky membránovým objemoměrem pro zjištění objemové hmotnosti zhutněného stavebního materiálu (dle Přílohy, schéma 2); 
•	zhotovitel se zavazuje zorganizovat kontrolní den v souvislosti s měřením prvního laboratorního modelu za účasti zástupce objednatele a zástupce Správy železnic s.o. prostřednictvím kontaktních osob specifikovaných v čl. 7.2 související smlouvy o dílo č. 120203/2021-SŽ-GŘ-O8 uzavřené mezi Správou železnic, státní organizací a KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. Kontaktní osoby budou k účasti na kontrolním dni vyzvány nejméně 5 pracovních dnů před uskutečněním.

2.	Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

II.
Termín a místo plnění

1.	Termín splnění předmětu této smlouvy je do 31. 10. 2022, přičemž zhotovitel předá objednateli výsledky laboratorních modelů 1 a 2 do 30. 6. 2022 a modelů 3 a 4 do 31. 10. 2022.

2.	Smlouva je splněna dnem podpisu předávacího protokolu zástupci smluvních stran.

3.	Místem plnění je na adrese objednatele.

III.
Cena a platební podmínky

1.	Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to za laboratorní modely 1 a 2 částku celkem 142 800 Kč bez DPH a za laboratorní modely 3 a 4 částku celkem 142 800 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 

2.	Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla. Objednatel souhlasí s dílčí fakturací potvrzených a pověřeným zástupcem převzatých výsledků za laboratorní modely 1 a 2. Konečné vyúčtování potom provede zhotovitel do 10 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

3.	Dílčí i konečné vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Na faktuře uvede zhotovitel číslo smlouvy objednatele. Doba splatnosti daňového dokladu je 45 dnů od převzetí daňového dokladu.

4.	Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem zaplacení daňového dokladu.

V.
Součinnost objednatele

1.	Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu: 
a.	dodání stavebních materiálů (ŠD 0/32kv, 0/63kv, DK 0/90), včetně jejich geotechnických vlastností. Pro každý laboratorní model je potřeba dodat min. 2,7 m3 materiálu.
b.	bezúplatné dodání stavebních materiálů bude pro modely 1 a 2 provedeno nejpozději do 31. 3. 2022 a pro modely 3 a 4 nejpozději do 30. 6. 2022, a to v součinnosti s kontaktní osobou zhotovitele, kterou určí zástupce zhotovitele ve věcech technických.

2.	Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele současně s návrhem nového termínu plnění.

VI.
Ostatní ustanovení

1.	Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

2.	Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne vyúčtování sankce.

3.	Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce.

4.	V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

5.	Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel je povinným subjektem ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z poskytnutí.

6.	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí zhotovitel; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

7.	Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

8.	Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení, zhotovitel také jedno.

9.	Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Praze dne ………………….                              V Praze dne ………………….

…………………….                                                ………………………….
objednatel                                                              zhotovitel