DODATEK č.l K SOD č. 7/2021 
Uzavřená ve smyslu ustanovením § 536 a násl. Obchodního zákoníku 
I.Smluvní strany 
1. 	Objednatel: 	Domov pro seniory Světlo 
Drhovle 44, Písek 397 01 
IČ:70869812 
zastoupený :   
2. Zhotovitel: 
Jaroslav Hadáček 
Sepekov 386, 398 51 Sepekov 
IČ: 1289333 I 
Osoby zmocněné jednat ve věcech: 
Smluvních a technických: Jaroslav Hadáček - majitel firmy 
změna v: 
IV. čas plnění 
Z důvodu nově zjištěných skutečností, které brání realizaci v plánovaném rozsahu a 
plánovaném termínu. Nové skutečnosti budou projednány s RK JčK a po schválení realizace 
práce budou pokračovat, až nastanou příznivé povětrnostní podmínky. Proto termín 
dokončeni se prodlužuje do 30.5.2022. 
V Drhovli dne 10. 11. 2021 
V Drhovli dne 10.11. 2021