Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Evidenční číslo objednatele: 5121000066
        Evidenční číslo zhotovitele: 501/2021

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o.
se sídlem na adrese: Malebná 960, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 576
IČ: 00334561
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Róbert Ďurčík, jednatel
(dále též jen „zhotovitel“)

Preambule
Po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v návaznosti na postupující šíření nákazy covid-19 rozhodl zadavatel o přerušení provádění prací v období od 22.12.2021 do 20.2.2022. Dodavatel proto upravil harmonogram provádění díla. 
Dále byla v průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem zjištěna potřeba provedení některých dílčích změn v projektu. Pro jednotlivé změny projednali objednatel se zhotovitelem změnové listy č. ZL5 až ZL12 a tímto dodatkem upravují cenu díla. 
V souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů, tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1 smlouvy, takže poslední věta tohoto ustanovení nadále zní takto:
Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL1-ZL4 a ZL5-ZL12.
2.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2, které se nahrazuje novým zněním takto:
Zhotovitel provede stavební práce podle harmonogramu. Zhotovitel je povinen hotové dílo, bez zjevných vad a nedodělků, předat objednateli nejpozději do 57 týdnů od převzetí staveniště. 

3.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL1-ZL4 a ZL5-ZL12. V návaznosti na změny provedené tímto dodatkem došlo ke zvýšení ceny díla o 378 618,94 Kč bez DPH a mění se částky v bodě 6.1 smlouvy takto:
cena bez DPH: 19 653 637,56 Kč (devatenáct milionů šest set padesát tři tisíce šest set třicet sedm korun a padesát šest haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 4 127 263,89 Kč (čtyři miliony jedno sto dvacet sedm tisíc dvě stě šedesát tři koruny a osmdesát devět haléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 23 780 901,45 Kč 
(dvacet tři miliony sedm set osmdesát tisíc devět set jedna koruna a čtyřicet pět haléřů)
4.	Dále se do ust. 29.7 doplňují nové body f) a g) tohoto znění:
f) Příloha 2 – Harmonogram (finanční a časový) upravený na základě dodatku č. 2
g) Příloha 5 – Změnové listy ZL5-ZL12
5.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
6.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze, dne						V Praze, dne 

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.,            		Ing. Róbert Ďurčík
prorektorka pro výstavbu                             		jednatel společnosti
České vysoké učení technické v Praze		Elizza s.r.o.