Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5121000185
Číslo smlouvy zhotovitele: 202112

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

Ing. Jaroslav Šabek
se sídlem na adrese: Hořejší 48, Třebotov, 252 26
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Černošice
IČ: 01202308
(dále též jen „zhotovitel“)

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem byla zjištěna potřeba provedení některých dílčích změn v projektu v návaznosti na úpravu budoucího využití rekonstruovaných prostor (např. úprava MaR, vypuštění některých akustických obkladů, EPS, ACS, ZTI, úprava provedení příček). Pro jednotlivé změny projednali objednatel se zhotovitelem změnové listy č. ZL01 – ZL09 a tímto dodatkem upravují cenu díla jakož i termín realizace. Provedení změn dohodnutých těmito změnovými listy mělo vliv na termín dokončení díla, neboť bylo nutné provést dodatečné práce, které nebyly uvažovány v původním harmonogramu nebo byly doobjednávány nové výrobky neobsažené v původní nabídce a bylo nutné respektovat dodací podmínky. 
V souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů, tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění nového ustanovení odst. 2.13 smlouvy:
2.13. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL09.
2.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2, ve kterém se číslovka 90 nahrazuje číslovkou 135. 
3.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly zdokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL01-ZL09. V návaznosti na změny provedené tímto dodatkem došlo ke zvýšení ceny díla o 1 314 780,08 Kč bez DPH a mění se částky v bodě 6.1 smlouvy takto:
cena bez DPH: 11 036 000,70 Kč (jedenáct milionů třicet šest tisíc korun sedmdesát haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 2 317 560,15 Kč (dva miliony tři sta sedmnáct tisíc pět set šedesát korun patnáct haléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 13 353 560,85 Kč 
(třináct milionů tři sta padesát tři tisíce pět set šedesát korun osmdesát pět haléřů)

4.	Dále se v ustanovení odst. 28.10 doplňují nové body:
-	Příloha D – Časový harmonogram realizace (vč. finančního plnění) upravený na základě dodatku č. 1

-	Příloha E – změnové listy ZL01-ZL09

5.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
6.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
V Praze, dne						V Praze, dne 

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.			Ing. Jaroslav Šabek
prorektorka pro výstavbu