Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5121000113
Číslo smlouvy zhotovitele: 2359101

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

Konsit, a.s.
se sídlem na adrese: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752
IČ: 18630197
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Urban, člen představenstva
(dále též jen „zhotovitel“)

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem byla zjištěna potřeba provedení některých dílčích změn v projektu, neboť skutečnosti zjištěné v průběhu prováděcích prací byly odlišné od stavu uvedeného v projektové dokumentaci – z důvodu zjištění neprůchodnosti komínového tělesa uvažovaného pro odvod z poslucháren 3 NP bylo nutné využít stávající stoupačky nebo znovu vyzdít instalační šachty kvůli použití nevhodného materiálu zaplentování. Dále došlo k dílčím změnám ve způsobu provedení oproti projektu – např. přemístění zásuvek ze stolů do schodišťových stupňů, přesun rozvaděčů RO.1 a RO.2. Pro jednotlivé změny projednali objednatel se zhotovitelem změnové listy č. ZL01 – ZL09 a tímto dodatkem upravují cenu díla jakož i termín realizace. Provedení změn dohodnutých těmito změnovými listy mělo vliv na termín dokončení díla, neboť bylo nutné provést dodatečné práce, které nebyly uvažovány v původním harmonogramu nebo byly doobjednávány nové výrobky neobsažené v původní nabídce a bylo nutné respektovat dodací podmínky. 
V souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů, tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:
2.1	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT FJFI - Rekonstrukce poslucháren objektu Trojanova 339“ spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro provádění stavby, vypracované XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen DPS). Součástí DPS jsou i vyjádření dotčených orgánů státní správy i další správní rozhodnutí získaná pro provedení stavby, které mohou obsahovat závazné podmínky pro provedení díla a zhotovitel je povinen tyto podmínky dodržet. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL01-ZL09.
2.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2, ve kterém se číslovka 32 nahrazuje číslovkou 36.
 
3.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL01-ZL09. V návaznosti na změny provedené tímto dodatkem došlo ke zvýšení ceny díla o 2 916 477,34 Kč bez DPH a částky v bodě 6.1 smlouvy se mění takto:
cena bez DPH: 39 563 006,14 Kč (třicet devět milionů pět set šedesát tři tisíce šest korun čtrnáct haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 8 308 231,29 Kč (osm milionů tři sta osm tisíc dvě stě třicet jedna koruna dvacet devět haléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 47 871 237,43 Kč 
(čtyřicet sedm milionů osm set sedmdesát jeden tisíc dvě stě třicet sedm korun čtyřicet tři haléře)

4.	Dále se v ustanovení odst. 29.7 doplňují nové body d) a e):
d) Příloha 2 – Harmonogram (finanční a časový) upravený na základě dodatku č. 1
e) Příloha 4 – změnové listy ZL01-ZL09
5.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
6.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
V Praze, dne						V Praze, dne 31. 3. 2022

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.			Ing. Jiří Urban
prorektorka pro výstavbu				člen představenstva
České vysoké učení technické v Praze		Konsit, a.s.