SO001735
RADEC KRA 1'
Smlouva o dílo č. 	
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkna dodávku stavebně montážních prací
I.	Smluvní strany
Objednatel:
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362/15
500 06 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. — předsedou představenstva
DIČ: CZ25282174
IČO: 25282174
bankovní spojení: Komerční banka Hradec králové	č.ú.: 5307-511/0100 zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765
Zhotovitel:
ENERGIS 92, s.r.o.
Vážní 531, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jaromírem Doležalem —jednatelem společnosti
DIČ: CZ63218691
IČO: 63218691
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú. 102629029/0300
zápis v OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 7903
Předmět smlouvy
1.	Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje dodat objednateli soubor prací, dodávek a služeb pro realizaci díla Rekonstrukce sekundárního teplovodu v okrsku PS A30, ul. Tichá, Hradec Králové, které spočívá v rekonstrukci a opravě rozvodů ÚT a TeV (dále jako dílo).
Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
2.	Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou společností Evelis, s.r.o., Vážní 531, Hradec Králové označenou jako Rekonstrukce teplovodu PS A30 Tichá — ÚT a TeV, archivní číslo P00422-DPS-100, umístění: Hradec Králové, datum: 02/2022 (dále jen,, projektová dokumentace"), když předmětem díla podle této smlouvy je demontáž stávajících rozvodů (potrubí) Ca a TeV, a montáž nového předizolovaného potrubí OT a TeV včetně dopojení na vnitřní rozvody OT a TeV v předávací stanici tepla (PS) A30, na stávající venkovní rozvody — odbočky k odběrným místům nebo přímo na vnitřní rozvody ÚT a TeV v odběrných místech, vše v souladu s projektovou dokumentací. Smluvní strany výslovně uvádějí, že předmětem dodávky podle této smlouvy nejsou
Smlouva o dílo, stránka 1 z 24

zemní práce a dodávky s tím související, byť by potřeba jejich realizace plynula z projektové dokumentace. Takové dodávky jsou předmětem díla jiného dodavatele (dále také „dodavatel zemních prací"). Předmětem díla není dále geodetické zaměření díla. Zhotovitel ale předá pro geodetické zaměření veškeré potřebné doklady.
3. Materiál potrubí pro realizaci díla dodá zhotoviteli objednatel. Objednatel odpovídá, že potrubí bude splňovat minimální technické parametry, které budou doložitelné certifikáty vystavenými jeho výrobcem nebo pro jeho výrobce třetí osobou:
•	Existence difusní bariéry u KMR potrubí DN25-200
•	Existence zesílené tloušťky stěny oceli u ocelového mediového potrubí do DN80:
D33,7x3,2
D42,4x3,2
D48,3x3,2
D60,3x3,2
D76,1x3,2
D88,9x3,2
•	Ohyby 90°od DN20-200 s rameny 1x1m ohýbané za studena s absencí svarového spoje v oblasti PUR izolace s minimálním rádiusem 2,5D
•	Zajištění certifikace pevnosti potrubní trasy od certifikační firmy
•	Odolnost PUR pěny při teplotním zatížení 161 st. C v nepřetržitém provozu po dobu 30. let
4.	Po dohodě smluvních stran si může objednatel zajistit u výrobce potrubí školení na montáž systémů dodaného potrubí.
5.	Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby, práce a zajistit dodávky všech věcí, a to i těch, které nejsou specificky uvedeny ve smlouvě nebo v nabídce zhotovitele, ale o kterých lze, z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby, práce a/nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
6.	Smluvní strany dále sjednaly, že nedílnou součástí díla, dle této smlouvy, jsou zejména následující činnosti prováděné zhotovitelem v souladu s Projektovou dokumentací:
a.	provedení tlakové zkoušky potrubí OT a TeV;
b.	vypracování a předání Dokladové dokumentace díla ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash Disku. Dokladová dokumentace díla bude obsahovat, Osvědčení svářečů, Oprávnění zhotovitele k montáži předizolovaného potrubí OT a TeV„ Protokol o provedení tlakové zkoušky potrubí OT a TeV, Protokol o proměření výstražného systému předizolovaného potrubí ÚT, stavební deník.
c.	neobsazeno;
d.	složení potrubí z kamionu na stavbě;
e.	sepsání Protokolu o předání a převzetí díla dle vzoru uvedeného v příloze této smlouvy, který
schvaluje objednatel, a který musí být podepsán oběma smluvními stranami.
Smlouva o dílo, stránka 2 z 24

7.	Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s objednatelem zpracovaným Časovým harmonogramem provádění díla dle čl. III této smlouvy o dílo.
8.	Neobsazeno
9.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla stanovenou na základě dohody v Článku IV. této smlouvy
10.	Místem provedení díla je Hradec Králové, ulice Tichá.
Ill.	Termíny piněni
Dílo bude zhotovitelem provedeno v těchto termínech:
1.	Rekonstrukce sekundárního teplovodu v okrsku PS A30, ul. Tichá, Hradec Králové

111.1.	vykládka materiálu OT
111.2.	termín zahájení demontáže potrubí ÚT
111.3.	termín zahájení montáže potrubí OT
111.4.	termín dokončení montáže OT
111.5.	termín zahájení demontáže TeV
111.6.	termín odstávky v dodávce TeV kalendářních dnů
111.7.	termín dokončení montáže potrubí TeV
111.8.	termín zprovoznění ÚT3 TeV
111.10. termín dokončení montážních prací 

28. týden
27.	týden
28.	týden
32.	týden
33.	týden
od 33. týdne max. v trvání 10
34.	týden
34. týden
34. týden

2. V případě prodlení objednatele s plněním svých závazků vůči zhotoviteli se o dobu tohoto prodlení prodlužují všechny termíny plnění zhotovitele.
IV.	Cena díla
1.	Cena díla je stanovena dohodou die nabídky zhotovitele, je pevná a konečná a činí: Rekonstrukce sekundárního teplovodu UT a TeV v okrsku PS A30, ul. Tichá, Hradec Králové:
1 435 000,00 Kč bez DPH;
(slovy: jeden milion čtyři sta třicet pět tisíc)
2.	Tato cena je úplná a konečná, je bez daně z přidané hodnoty a není stanovená na základě odhadu. Zhotovitel prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré činnosti, dodávky materiálu a dodávky dalších služeb, které sice nejsou uvedeny výslovně v jeho nabídce, ale jejichž provedeni či dodání je nezbytné pro řádné provedení díla vymezeného shora označenou projektovou dokumentací, které mohl zhotovitel na základě projektové dokumentace předpokládat, a které nejsou z předmětu
Smlouva o dílo, stránka 3 z 24

plnění podle této smlouvy výslovně vyloučeny, tj. činnosti, jež jsou předmětem dodávky ze strany dodavatele zemních prací. Zhotovitel výslovně uvádí, že na jeho prohlášení o úplnosti a konečnosti ceny díla nebude mít vliv ani případné umístění potrubí ve větší hloubce pod rostlým terénem, než plyne z projektové dokumentace a ani jiné odlišné skutečnosti od projektové dokumentace, když i tato rizika zahrnul a zohlednil ve své nabídce. 
3.	Změna ceny je přípustná výlučně na základě písemně uzavřeného dodatku mezi zhotovitelem a objednatelem.
4.	Smluvní strany shodně konstatují, že s ohledem na povahu objednatele, jako plátce DPH, a předmět plnění podle této smlouvy (stavební nebo montážní práce, které podle sdělení českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008), se uplatní v tomto případě režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel, je povinen přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plněn,
5.	Nabídka zhotovitele byla dne 28.1.2022 výběrovou komisí objednatele vybrána jako nejlepší. Nabídka zhotovitele tvoří formou přílohy nedílnou součást této smlouvy.
V.	Způsob úhrady a náležitosti faktur
1. Cena díla ujednaná v článku IV. této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
a)	Fakturace proběhne až po předáni kompletního díla bez vad a nedodělků, přičemž v průběhu realizace jednotlivých částí díla nebudou poskytovány žádné zálohy ze strany objednatele. Ke dni předání a převzetí díla objednateli, tj. dokončení a předání díla, vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad). Přílohou faktury bude kopie Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami a ve kterém bude případně stvrzeno i odstranění vad a nedodělků. Fakturu zhotovitel odešle nejpozději do jednoho dne po jejím vystavení objednateli. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Faktura bude hrazena formou bankovního převodu. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů.
b)	Faktury musí kromě náležitostí požadovaných obecně závaznými právními předpisy a touto
smlouvou, obsahovat také:
označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,
•	číslo smlouvy a číslo objednávky,
•	údaj o době splatnosti faktury uvedený v souladu s touto smlouvou,
•	kopii Protokolu o předání a převzetí díla,
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a/nebo náležitosti stanovené v této smlouvě, není objednatel povinen plnit podle této faktury. Objednatel v takovém případě vrátí bez zbytečného odkladu takto vadně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení. Zhotovitel je povinen dle povahy závad
Smlouva o dílo, stránka 4 z 24

vystavit objednateli opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu. Nová lhůta splatnosti (opět v deice 30 dnů) pak počíná běžet ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury, objednateli neprodleně odeslané.
2.	Zhotovitel je dále povinen dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V případě, že zhotovitelem bude zahraniční subjekt, zavazuje se poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka může být spolufinancována z veřejných zdrojů_
3.	Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
4.	Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči objednateli oproti pohledávkám objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku vůči objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. K výše uvedenému ujednání se sjednává výjimka, kdy zhotovitel je oprávněn zastavit své pohledávky ve prospěch Československé obchodní banky, a.s. na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze dne 6.6.2006 a to z důvodu financováni prací zhotovitele na díle.
VI.	Povinnosti objednatele a zhotovitele
1.	Před zahájením provádění díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí staveniště.
2.	Objednatel předá stavební připravenost zhotoviteli dle dohody a samostatného zápisu.
3.	Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené i mimo pracovní pruh.
4.	Zhotovitel je povinen při prováděni díla počínat si s náležitou pečlivostí, opatrností a ohleduplností, aby nedošlo k přerušení, omezení či zastavení výkonu pracovních úkolů zaměstnanců objednatele a k ohrožení okolních objektů, a plnit pokyny zástupců objednatele. Zhotovitel má povinnost provést dílo tak, aby odpovídalo této smlouvě a dále veškerým obecně závazným právním předpisům a ostatním předpisům včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle příslušných ustanoveni zákoníku práce a navazujících předpisů; stejně tak je zhotovitel povinen postupovat i při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, až do doby předání předmětu díla objednateli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN" (jimiž se pro Rely této smlouvy rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy a standardy zajišťující stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použiti přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
5.	Zhotovitel povede během celé realizace stavební deník, ve kterém budou uváděny všechny skutečnosti mající vliv na termín, cenu, kvalitu a rozsah prováděných prací a bezpečnost práce.
Smlouva o dílo, stránka 5 z 24

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli na jeho výzvu nahlédnout do stavebního deníku a uvádět v něm své písemné požadavky či připomínky.
6.	Zhotovitel je povinen zajistit dodávání věcí nezbytných k provedení díla na adresu místa provádění díla s označením akce a tyto věci na tomto místě vždy přebírat, aby z této činnosti byl objednatel vyloučen.
7.	Objednatel poskytne upravenou vodu pro tlakovou zkoušku bezúplatně.
8.	Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 3 dny předem prostřednictvím e-mailu na zástupce objednatele pro věci technické.
9.	0 předaní a převzetí díla dle čl. IV. sepíší obě strany předávací a přejímací protokol (v této smlouvě rovněž jako „Protokol a předáni a převzetí díla"). Součástí předávacího protokolu bude případně soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. Až do odstranění drobných vad a  nedodělků není dílo řádně provedeno. O odstranění drobných vad a nedodělků bude do protokolu  o předáni a převzetí cilia učiněn záznam s uvedením data jejich odstranění. Okamžikem odstranění všech drobných vad a nedodělků se dílo považuje za řádně provedené. 
10.	Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení:
•	seznam zařízení, které bude součástí stavby a jejich atesty (potrubí, armatury, elektrody)
6	protokoly o provedení 61:2 smontovaného potrubí (bude provedeno provozním tlakem)
•	kopie montážního (stavebního) deníku
•	osvědčení o způsobilosti svářečů
•	protokol o proměřeni alarmu se zákresem
11.	Objednatel má povinnost za dílo zaplatit až po jeho řádném provedení.
12.	Objednatel může určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dale jen „Koordinátor BOZP") pro přípravu a realizaci díla dle zákona Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v souladu s těmito předpisy. Zhotovitel i všichni jeho poddodavatelé jsou povinni Koordinátorovi BOZP po celou dobu přípravy a realizace díla poskytovat potřebnou součinnost a řídit se jeho pokyny ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
13.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo nadále prováděl řádným způsobem. Tento požadavek může objednatel uplatnit zápisem do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad a řádným prováděním díla jeden pracovní den poté, kdy byl k tornu objednatelem vyzván, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Kontrolu může provádět též třetí osoba pověřena objednatelem.
14.	Zhotovitel se zavazuje zajistit a je odpovědný za koordinaci činností na staveništi takovým způsobem, aby bylo dosaženo termínů uvedených ve smlouvě. Tím není dotčena možnost objednatele zajistit Koordinátora BOZP. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky objednatele. Zhotovitel má dale povinnost zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP při práci na staveništi.
Smlouva o dílo, stránka 6 z 24

15.	Zhotovitel je povinen před předáním díla provést řádný úklid staveniště včetně ekologické likvidace odpadů, vzniklých prováděním díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Ocelový šrot a jiný demontovaný železný materiál zůstávají v majetku zhotovitele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů po předání předmětu díla, vyklidit a opustit místo provádění díla.
16.	Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v pine výši náhradu újmy majetkové i nemajetkové (a to včetně ušlého zisku), kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných smlouvou a/nebo právními předpisy v souvislosti s prováděním díla, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti daných smlouvou a/nebo právními předpisy v souvislosti s prováděním díla, na které se vztahuje smluvní pokuta. Ohradou smluvní pokuty není tedy nárok na náhradu újmy dotčen.
17.	zhotovitel je oprávněn užit při plnění zakázky poddodavatele. VII. Staveniště
1.	Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro provádění díla, bez právních vad a umožnit zhotoviteli přístup na staveniště v termínu dle této smlouvy, to však za předpokladu, že ze strany zhotovitele budou splněny veškeré povinnosti předcházející předání staveniště. O předání staveniště do užívání zhotovitelem bude objednatelem vystaven Protokol o předání a převzetí staveniště, který bude podepsán oběma smluvními stranami; okamžikem podpisu tohoto Protokolu a předání a převzetí staveniště se staveniště považuje za předané a převzaté. Stavební práce na díle budou zahájeny nejdříve po podpisu Protokolu o předání a převzetí staveniště.
2.	Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto plochách byl omezen na nezbytnou dobu. S tím souvisí odvoz přebytečného materiálu pro dosažení maximálně možného přístupu komunikace Tichá pro rezidenty a umožněn přístup pro všechny s povolením vjezdu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikáni mimo staveniště a zajišťovat minimální zábor prostranství kolem staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu.
3.	Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a)	zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b)	materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatřeni pro zabezpečeni bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazeni případného dopravního značení;
c)	provedeni veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabráněni vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a
Smlouva o dílo, stránka 7 z 24

způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací bude dodržovat stavební firmou zajištěná opatření z hlediska bezpečnosti vůči okolnímu provozu a chodcům.
VIII. Vlastnické právo
1.	Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla. Smluvní strany sjednaly, le v případě, kdy je součásti díla dodání věci, stává se objednatel vlastníkem takovýchto věcí okamžikem jejich dodání do místa plnění (na staveniště). O dodání všech věcí do místa plnění (na staveniště) je zhotovitel povinen objednatele průběžně informovat vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce.
2.	Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli respektovat ustanovení článku odst. (1) této smlouvy tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušeni některé povinnosti uvedené v tomto odstavci (2) je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s uplatněním sankce, sjednané v příslušeném ustanovení této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré smlouvy s poddodavateli.
3.	Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány za účelem plnění díla a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu Protokolu o předáni a převzetí Oa, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, jakož i na věcech souvisejících s realizaci díla až do okamžiku řádného předání díla.
IX.	Záruka za jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo Dude odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh díla, a to jak normám závazným, tak normám doporučujícím. Zhotovitel dale prohlašuje, že dílo, jakož i jeho součásti (material) použité k jeho provedení jsou nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Zhotovitel poskytuje objednateli a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabudou vlastnické nebo jiné právo k dílu, záruku za jakost cilia. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dodané na základě této smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě, bude mít vlastnosti požadované objednatelem a/nebo touto smlouvou a/nebo právními předpisy, jakož i ČSN, platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si dílo tyto vlastnosti beze změny zachová. Délka záruční doby na dílo činí 60 měsíců na material a 60 měsíců na montáž (záruční doba) od dne provedeni Oa; záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat pro jeho vady, za něž odpovídá zhotovitel.

Smlouva o dílo, stránka 8 z 24

2.	V záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vytčené vady díla. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace a vadu (havárii) odstranit v nejkratším možném termínu, nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace, pokud je to technicky možné. U ostatních vytčených vad je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratším možném termínu, nejpozději do 15-ti dnů od obdržení reklamace, pokud je to technicky možné. Pokud nebude technicky možné vadu odstranit v termínu do 15-ti dnů od obdržení reklamace, bude vada odstraněna ve lhůtě domluvené a pokud takové dohody nebude, ve lhůtě nezbytně nutné k odstranění vady s ohledem na povahu technických obtíží.
3.	V případě prodleni ze strany zhotovitele s odstraňováním vytčených vad je objednatel oprávněn opravit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V těchto případech se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, které mu vznikly při odstranění vad svépomocí nebo prostřednictvím třetích osob. Cenu prací provedených svépomocí bude objednatel účtovat zhotoviteli v cenách obvyklých za obdobné práce.
X.	Sankce a smluvní pokuty
1.	V případě prodlení zhotovitele s provedením jednotlivých částí díla v termínech ujednaných v Čl. Ill. dle této smlouvy, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení s provedením každé jednotlivé části díla.
2.	Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, na základě vystavené faktury zhotovitelem.
3.	V případě prodlení zhotovitele s dodáním faktury dle ujednání v čl. V. odst. 1 a), ujednává se smluvní pokuta ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodleni. Za datum dodání se považuje den, kdy objednatel fakturu obdržel. Fakturu může zhotovitel zaslat prostřednictvím elektronické pošty.
4.	V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad vytčených objednatelem v průběhu záruční doby ve lhůtách plynoucích z teto smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním.
5.	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení do data vyklizení staveniště.
6.	Neobsazeno
7.	Zhotovitel (vč. jeho subdodavatelů) je povinen používat ochranné pracovní pomůcky. Smluvní pokuta za každý zjištěný případ nepoužívánf ochranných pracovních pomůcek pracovníkem zhotovitele činí 5.000 Kč. Pracovník zhotovitele, nevybavený řádnými pracovními ochrannými pomůckami nemůže pokračovat v práci a musí neprodleně opustit staveniště.
8.	V případě zadržení zaměstnance zhotovitele (vč. jeho subdodavatelů), který donáší na staveniště alkoholické nápoje, drogy či jiné návykové látky nebo sám je pod vlivem alkoholu, drog či návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.
9.	Pokud zhotovitel ke splnění svých závazků plynoucích z této smlouvy použije třetí osobu, je povinen si ji v předstihu nechat odsouhlasit objednatelem. Pokud tak zhotovitel neučiní, nemůže tato třetí osoba vstoupit na staveniště a být zúčastněnou osobou na díle. Smluvní pokuta za každý zjištěný případ činí 10 000 Kč.
Smlouva o dílo, stránka 9 z 24

10.	Zhotovitel (vč. jeho subdodavatelů) se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkající se tohoto smluvního vztahu, jakož i druhé smluvní strany, které získal
v souvislosti s touto smlouvou, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak. Smluvní strany se zavazují neposkytnout a nezpřístupnit informace a skutečnosti podle předcházející věty třetím osobám, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak. Smluvní pokuta za porušení této skutečnosti se stanovuje na 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
11.	V případě, že zhotovitel nedokončí z vlastní viny dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou a opustí bezdůvodně staveniště před dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč, veškeré náklady a škodu způsobenou přerušením prací a náklady spojené se zajištěním nového zhotovitele.
12.	Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
13.	Objednatel je oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhradu škody atd.) pouze v případě, kdy k porušení smluvních podmínek zhotovitelem došlo prokazatelně a výhradně jeho vlastní vinou.
XI.	Zmocnění
1.	Objednatel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:
ve věcech obchodních:	ing. Petr Juránek, e mail: iuranek@thhk.cz,
V? věcech technických:	p. Michal Zvěřina, e-mail: zverina@thhk.cz,
2.	Zhotovitel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:
ve věcech technických:	Ing. František Peterka, email: FP@energis.cz,	'
ve věcech výrobních:	Pavel Kurka, email: pks@energis.cz, — —
Roman Kulich, email: rk@energis.cz,
Petr Němeček, email: pn@energis.cz
    XII.		Pojištění
1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídí, aby bylo zajištěno a udržováno v účinnosti stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) v limitu pojistného plnění ve výši alespoň 5.000.000,- Kč, a to po celou dobu výstavby nebo montáže až do vyklizení celého staveniště následovně:
a) Pojištěni předmětu plnění smlouvy
Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození, zničení nebo škody na díle včetně stávajícího majetku a/nebo majetku ve vlastnictví/péči/opatrování Objednatele po celou dobu provádění díla. Pojištění předmětu plnění smlouvy bude na částku rovnající se smluvní ceně díla s tím, že spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění nesmí být vyšší než 10 % ve vztahu ke každé jednotlivé pojistné události. Pokud v průběhu trvání účinnosti Smlouvy dojde ke změně Smluvní ceny, Zhotovitel upraví výši pojistné částky tak, aby odpovídala celkové výši Smluvní ceny.
Smlouva o dílo, stránka 10 z 24

b) Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti
Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění, úraz, jiné poškození zdraví nebo smrt utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců objednatele) a ztráty nebo odcizení, poškození, zničení nebo škody na majetku třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním Díla.
2. Zhotovitel je povinen alespoň patnáct (15) dnů před převzetím staveniště předložit objednateli doklady o pojištěni - uzavřenou pojistnou smlouvu nebo pojistku jako důkaz, že požadované pojištění je platné a účinné.
XIII.	Odstoupení od smlouvy
1.	Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li prohlášen úpadek druhé smluvní strany.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy zhotovitelem:
a)	prodleni s řádným provedením celého díla delším 10 dnů,
b)	prodlení delší 10 dnů s realizací jednotlivých částí díla v dílčích termínech ujednaných v článku HI. této smlouvy,
c)	prodlení delší 10 dnů s odstraněním vadně provedené části díla v průběhu realizace díla, a to ani v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, ne kratší jak 3 dny,
d)	opakovaného porušení dalších povinností vyplývajících objednateli z této smlouvy, pokud byl na takové porušení v minulosti již písemně upozorněn.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem:
a)	prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po jeho splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván,
b)	prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti k plnění zhotovitele, nebo v případech, kdy z důvodů na straně objednatele nebude možné pokračovat v pracích na díle po dobu delší 15 dnů
4.	Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:
a)	zastavit prováděni díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob v místě plnění,
b)	provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto smlouvou, který předloží k odsouhlasení objednateli,
c)	předat objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména předat objednateli doklady, které se vztahuji k provedené části díla, a které by předkládal objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla,
Smlouva o dílo, stránka 11 224

d)	uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti díla a místa plnění,
e)	postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
5.	Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6.	V případě zániku smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nemá zhotovitel nárok na úhradu již realizované části díla, a pokud již nějaká část díla byla uhrazena, je zhotovitel povinen uhrazenou část díla objednateli navrátit.
7.	Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se ustanoveni o smluvních pokutách, o vlastnictví díla, náhradě škody, záruce za jakost (u kompletně dokončených stavebních celků ve finální podobě vč. všech povrchových úprav) a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.
XIV.	Bankovní záruka za řádné provedení díla:
Pro plněni z této smlouvy nevyžaduje Objednatel bankovní záruky Zhotovitele.
XV.	Zvláštní ujednání
1.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 0 uveřejnění smlouvy bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2.	Smluvní strany berou na vědomi, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
3.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4.	Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedena e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
5.	V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů,

Smlouva o dílo, stránka 12 z 24

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednateli. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
6.	Pokud dojde mezi smluvními stranami k jakémukoliv sporu, smluvní strany se pokusí rozhodnout tento spor smírnou cestou. Pokud se případný spor mezi smluvními stranami i přes úsilí vynaložené oběma smluvními stranami o dohodu nepodaří vyřešit smírnou cestou, bude nadále řešen v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze podle je Řádu a pravidel, třemi rozhodci. Každá ze smluvních stran sporu určí jednoho rozhodce a tito rozhodci zvolí předsedajícího rozhodce. Jestliže smluvní strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní do 14 dnů od doručení výzvy druhé smluvní strany, nebo nemohou-li se jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce, jmenuje rozhodce nebo předsedajícího rozhodce na žádost kterékoliv ze smluvních stran sporu předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Místem konání rozhodčího řízení je Hradec Kralove. Smluvní strany souhlasí s tím že rozhodčí řízení, včetně ústního jednání, písemných důkazů a korespondence, bude vedeno v českém jazyce. Rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné, pro obě smluvní strany závazné a bude obsahovat výrok o nákladech řízení.
7.	Tato smlouva přechází na případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny na tuto smlouvu právní nástupce výslovně upozornit a se smluvními povinnostmi seznámit. Tato smlouva je pro právní nástupce závazná.
8.	Smluvní strany se dohodly	rozvazovací podmínce, kdy smlouvu může bez sankcí a pokut objednatel vypovědět, z důvodu podání žádosti o dotaci na plnění díla v rámci vyhlášení dotační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu. Objednatel může rozvazovací podmínku uplatnit nejpozději do 15.5.2022. V opačném případě je touto smlouvou objednatel vázán.
9.	Za odpadové hospodářství spojené s činností jednotlivých zhotovitelů na staveništi odpovídá v plné míře vedení přísl. zhotovitele, ve smyslu zák.č. 125/97 Sb.
10.	Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel nevěděl, ani vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provádění díla, je objednatel povinen projednat návrh zhotovitele na odpovídající změnu smluvního závazku.
11.	Jakékoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo zavazují smluvní strany, jen jsou-li učiněna smluvními dodatky, podepsanými zástupci smluvních stran.
12.	Jakékoliv skutečnosti vedoucí k ohrožení termínu plnění, kvality, a rozsahu díla a ceny jsou povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit.
13.	Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních strana účinnosti zveřejněním této smlouvy v centrálním registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrž jedno vyhotovení.

Smlouva o dílo, stránka 13 z 24

Příloha: 
•	Projektová dokumentace ke všem částem díla - volná příloha 
•	Rozsah díla zakreslený v mapě - nedílná příloha 
•	Nabídka Zhotovitele nedílná příloha 
•	Seznam poddodavatelů - volná příloha 
•	Protokol o předání a převzetí díla-  nedílná příloha 
V Hradci Kralove dne:	• 15.3.2022	V Hradci Králové dne:24.3.2022	
						
za objednatele:		za zhotovitele:
Ing. Jaromír Doležal jednatel společnosti	
Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva		

Smlouva o dílo, stránka 14 z 24