Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby
ČVUT - SÚZ - Rekonstrukce Bubenečské koleje 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy Příkazce: 
číslo smlouvy Příkazníka:  20-08-01-003

Smluvní strany:
České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem na adrese: Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 	prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., 
prorektorka pro výstavbu 

Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
(dále jen „Příkazce“)
a
FRAM Consult a.s.
se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
IČ: 64948790
DIČ: CZ64948790
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3682
(dále jen „Příkazník“)
uzavírají níže uvedeného dne tuto příkazní smlouvu.

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení plnění činnosti a zajištění funkce technického dozoru a koordinátora BOZP v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny.
Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti TDS  a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby. S ohledem na shora uvedené tak bude nutné provádět zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. V souvislosti s tím smluvní strany shodně konstatují, že původně zasmluvněná částka je již takřka vyčerpána.
Bude nutné i nadále zajistit pokračování činností zajišťovaných Příkazníkem v realizační fázi v rozsahu článku č. 2 Příkazní smlouvy.
Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona  č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ( dále jen „ZZVZ“ ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činnosti a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele. Cena se tak v souvislosti s prodloužením realizace vlastní stavby navyšuje o částku 382 280,- Kč. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 29,97 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.
Objednatel bere na vědomí novou adresu sídla zhotovitele, která je současně adresou pro doručování smluvní korespondence.
V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě kontaktních údajů zhotovitele a článku 7, odst. 7.1 Smlouvy a odst. 7.2 Smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením §222 ZZVZ.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 13, odst. 13.7 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo objednatele :                           , číslo smlouvy zhotovitele : 20-08-01-003, uzavřené dne 16.3.2020, takto :
a) ruší se stávající adresa sídla příkazníka a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

FRAM Consult a.s.
se sídlem: Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupený: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva
IČ: 64948790
DIČ: CZ64948790
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3682
(dále jen „Příkazník“)

2) Čl. 7 – Odměna Příkazníka

a) ruší se stávající znění článku 7, odst. 7.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

7.1.	Celková odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem   	1 657 500,- Kč bez DPH 
(slovy: jedenmilionšetsetpadesátsedmtisícpětset korun českých). 

b) ruší se stávající znění článku 7, odst. 7.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

Odměna Příkazníka po jednotlivých činnostech je stanovena takto (uváděno bez DPH):
a)	odměna za realizační fázi ve výši 1 594 500,- Kč;
b)	odměna za závěrečnou fázi ve výši   63 000,- Kč.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.

2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje příkazce. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo smlouvy zhotovitele: 20-08-01-003, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
platební kalendář TDI a BOZP Bubenečská kolej – dodatek č.1

V Praze dne						V Praze dne 

Příkazce:						Příkazník: 

_____________________________		______________________________
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., 			     Ing. Roman Klimt
prorektorka pro výstavbu					předseda představenstva