Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 5121000097
Číslo smlouvy zhotovitele: 198/2021/H/ČVUT FS Rekonstrukce obvodového pláště

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

Hinton, a.s.
se sídlem na adrese: Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17507
IČ: 24160008
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Petr Šimon, předseda představenstva
(dále též jen „zhotovitel“)

Preambule
V průběhu provádění stavebních prací zhotovitelem byla zjištěna potřeba provedení některých dílčích změn v projektu, neboť skutečnosti zjištěné v průběhu prováděcích prací byly odlišné od stavu uvedeného v projektové dokumentaci – např. po odstranění parapetů byla zjištěna nutnost provést jejich výškové dorovnání, neboť stávající provedení bylo  z nekvalitního materiálu, přičemž tuto skutečnost nebylo možné zjistit před odstraněním parapetu. Stejně tak způsob kotvení sloupků rastrové fasády, kdy v rámci demontáží byla zjištěna výšková odchylka v místech rohových polí ztužením objektu, které nebylo obsaženo v projektové dokumentaci. Pro jednotlivé změny projednali objednatel se zhotovitelem změnové listy č. ZL1 – ZL5 a tímto dodatkem upravují cenu díla jakož i termín realizace. Provedení změn dohodnutých těmito změnovými listy mělo vliv na termín dokončení díla, neboť bylo nutné provést „mokré“ procesy pro které jsou nezbytné příznivé klimatické podmínky, případně navrhnout vhodné technické řešení a opatřit atypické výrobky.
V souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se nejedná o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů, tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. tak uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:
2.1	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT FS – Rekonstrukce obvodového pláště HL D“ spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby, vypracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 03/2019 (dále jen DPS). Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL1-ZL5.
2.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2, ve kterém se číslovka 152 nahrazuje číslovkou 196.
 
3.	Smluvní strany se dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL1-ZL5. V návaznosti na změny provedené tímto dodatkem došlo ke zvýšení ceny díla o 2 656 121,89 Kč bez DPH a mění se částky v bodě 6.1 smlouvy takto:
cena bez DPH: 58 341 285,59 Kč (padesát osm milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc dvě stě osmdesát pět korun a padesát devět haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 12 251 669,97 Kč (dvanáct milionů dvě stě padesát jeden tisíc šest set šedesát devět korun devadesát sedm haléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 70 592 955,56 Kč 
(sedmdesát milionů pět set devadesát dva tisíce devět set padesát pět korun padesát šest haléřů)

4.	Dále se v ustanovení odst. 29.7 doplňují nové body f) a g):
f) Příloha 2 – Harmonogram (finanční a časový) upravený na základě dodatku č. 2
g) Příloha 5 – změnové listy ZL1-ZL5
5.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

6.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
7.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
V Praze, dne						V Praze, dne 

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.			Petr Šimon
prorektorka pro výstavbu				předseda představenstva
České vysoké učení technické v Praze		Hinton, a.s.