Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení díla
Název veřejné zakázky:
„FSv - Výstavba nového experimentálního objektu“

I.	České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Zastoupené:		Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem
Se sídlem:			Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO:			68407700
DIČ:			CZ68407700
Datová schránka - ID:    	p83j9ee
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“) 

II.	DOCTUS s.r.o.
Zastoupený:		Lukášem Paskou, jednatelem	
Se sídlem:			Jeseniova 1541/146, 130 00 - Praha 3 - Žižkov
IČO:			61460036	
DIČ:			CZ61460036	
Datová schránka – ID:	ycjzcwd
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx	
	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 28237

Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele: 
ve věcech smluvních: 	xxxxxxxxxxxxx
Telefon; mobil: 		xxxxxxxxxxxxx 	
E-mail: 			xxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Stavbyvedoucí: 
Jméno a příjmení, titul: 	xxxxxxxxxxxxx
Telefon; mobil: 		xxxxxxxxxxxxx
E-mail: 			xxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa: 	xxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Jméno a příjmení, titul: 	xxxxxxxxxxxxx
Telefon; mobil:		xxxxxxxxxxxxx
E-mail:			xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“)
I.	Předmět Dodatku
I.1.	Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo na zhotovení díla „FSv - Výstavba nového experimentálního objektu“ uzavřené dne 23.11.2021 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1 až 3.
I.2.	Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 až 3 je realizována dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem této změny jsou potřeby Objednatele (zadavatele), které byly nově identifikovány v průběhu výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a účelné fungování Díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel. Realizace těchto stavebních prací jiným dodavatelem, než je Zhotovitel, by Objednateli (zadavateli) způsobila značné technické obtíže a zvýšení nákladů.  
Absolutní hodnota kladných změn činí 59 021,22 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0,- Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 až 3 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 59 021,22 Kč bez DPH.
Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnou v rozsahu ZL č. 1 až 3 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 59 021,22 Kč bez DPH.
Změnový list č. 1 až 3 tvoří přílohu č. 1 až 3 tohoto dodatku č. 1.
I.3.	S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 4 462 278,13 Kč bez DPH.
DPH činí 937 078,41 Kč. Sazba DPH je 21 %.
Cena včetně DPH činí 5 399 356,54 Kč.
II.	Závěrečná ustanovení
II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2.	Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
•	Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
•	Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
•	Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
II.3.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
II.4.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel taktéž vyhotovení jedno.

Praha 31.3.2022

		Praha 31.3.2022	
za Objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník 		za Zhotovitele
Lukáš Paska
jednatel