Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo
----------------------------------------------------------------------------------------
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 6. 9. 2021 ( číslo smlouvy 21/A/4) pro zakázku s názvem Rekonstrukce světel, vč. snížení podhledů a úpravy příček v DK.

I. 
Smluvní strany

1. 
Dům kultury Teplice, p. o. 
Mírové náměstí 2950, 
415 80, Teplice 
IČ: 00081221 
DIČ: CZ 00081221 
číslo bankovního účtu: 533501/0100 
zastoupená ředitelem: Ing. Přemyslem Šobou 
technické zastoupení: xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
e-mail:technika@dkteplice.cz
(dále jen „objednatel“) 
na straně jedné, 

2. 
inveko-stavby s.r.o.
U Dvojhradí 319, 417 03 Dubí
Mobil: xxx xxx xxx
e-mail:jana.dockalova@invekostavby.cz  
IČ: 25007114 
DIČ: CZ25007114
bankovní spojení: ČSOB 289651479/0300
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jana Dočkalová
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxx xxxxx xxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé. 

Na základě dohody obou smluvních stran z důvodu chybně zpracovaného výkazu výměr se upravuje:

Článek IV. Cena díla

Z důvodu změny rozsahu díla v průběhu jeho zhotovování  o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD     						788 996,-  Kč

Celková cena méněprací						-26 092,21 Kč	

Celková cena víceprací                                                                     178 876,93 Kč

Cena díla celkem bez DPH						941 780,72 Kč

Výše uvedená cena je konečná a neměnná a z důvodu právní jistoty zhotovitel prohlašuje, že se výslovně vzdává jakýchkoliv případných dalších nároků na peněžité plnění z této smlouvy o dílo nad rámec zaplacení ceny díla dle tohoto dodatku.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti
    dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.	
2. Tento dodatek je podepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana 
    obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze  
    změny.
4. Tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0874/21ze dne 19. 11. 2021
5. Všechny informace uvedené v tomto dodatku ke smlouvě jsou považovány za veřejné.

Přílohy:
-	položkový rozpočet víceprací a méněprací
-	Změnový list

V Teplicích dne 19. listopadu 2021			V Teplicích dne 19. listopadu 2021

	.........................................................	……………………………………	
	              Jana Dočkalová                                                                  Ing. Přemysl Šoba	 
	                  Zhotovitel                                                                                 Objednatel