Evidenční číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
a předpisů souvisejících
24-SOD-2017-033	Číslo stavby:	924 117 033

OBJEDNATEL:

Zastoupený:

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: 

ČI. I
SMLUVNÍ STRANY
Město Humpolec
Horní náměstí 300,
396 22 Humpolec
IČO 00248266 ; DIČ CZ 00248266
Jiřím Kučerou, starostou
Květoslavem Namyslem, místostarostou
Václav Pavlík, referent příprava a realizace investic

ZHOTOVITEL:

Adresa pro písemný styk: Zastoupený:

Ředitel oblastního závodu:
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO 4219 6868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430
Žižkova 1619, 580 01 Havl.Brod
Lukášem Hořčíkem - ředitelem o.z. STŘED.
na základě „Podpisového řádu", schváleného představenstvem a.s.
CZ42196868

oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619, 580 01 Havl.Brod

Lukáš Hořčík
Josef Řezníček	- výrobní náměstek 
Milan Orlík	- vedoucí OTO	
Zdeněk Drtina	- ved.provozu Havl.Brod 
Miroslav Panský

DIČ:

Závod pověřený realizací:

J

ČL. II
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.	Předmětem plnění smlouvy je provedení díla :
OPRAVA KOMUNIKACE SVĚTLICE SMĚR RÁPOTICE
Rozsah prací je dán přiloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele Č.N24270063 z 20.3.2017.
Místo plnění: Světlice, Humpolec, Kraj Vysočina
2.	Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle nabídky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky.
Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.
3.	Objednatel se zavazuje pn provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
ČI. Ill
ČAS PLNĚNÍ
OPRAVA KOMUNIKACE SVĚTLICE SMĚR RÁPOTICE
Termín předání staveniště	:	24.04.2017
Termín zahájení stavby	:	24.04.2017
Termín dokončení stavby	:	30.06.2017
Termín vyklizení staveniště	:	30.06.2017
V	případě nepříznivých klimatických podmínek ( sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit ČI. VII, odst. 1 této smlouvy.
V	případě prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později než je uvedeno v ČI. III. Přitom zhotovitel nebude v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.
ČI. IV
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.	Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí.
CELKEM OPRAVA KOMUNIKACE SVĚTLICE SMĚR RÁPOTICE
Cena bez DPH celkem	784.200,00 Kč	
DPH 21 %	164.682,00 Kč	
Cena díla s DPH celkem	948.882,00 Kč	

2.	DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
3.	Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani.
Při splnění podmínek pro fakturaci stavebních a montážních prací dle § 92a až 92e zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
4.	Tato cena platí po celou dobu realizace.
5.	Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
6.	Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
7.	Provedené práce bude zhotovitel fakturovat konečnou fakturou vystavenou nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.
8.	Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
9.	Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
10.	V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
11.	Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
12.	Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 2 a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.
Čl. V
ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.	Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2.	Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí osobě.
3.	Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4.	Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
5.	Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
6.	Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.
Čl. VI.
ZÁRUKA
1.	Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli.
Délka záruční lhůty se stanovuje na 42 měsíců, na práce provedené zhotovitelem.
2.	Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
3.	Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody.
4.	Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka , mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka a pod.
5.	Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.
6.	Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započetím a po předání stavby.
7.	Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel neprováděl, špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými mechanismy, účinky dopravy s vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, se záruka nevztahuje.
ČI. VII
SMLUVNÍ POKUTY
Smluvní strany se dohodly, že :
1.	Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v ČI. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2.	V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje ji uhradit.
ČI. VlII
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1.	Předání staveniště
a)	Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.
b)	Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v PD a protokolárně předána při předání staveniště.
Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
c)	V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli" Dopravní řád " v případě potřeby i " Provozní řád ".
d)	Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení ČI. VII odst. 2 této smlouvy.
e)	Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2.	Dokumentace
a)	Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
b)	Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně zakreslením do stavebního deníku.
c)	Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit ČI. VII odst. 1 této smlouvy.
3.	Předáni a převzetí díla
a)	O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
b)	Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
Prohlášení o shodě použitých materiálů Stavební deník
c)	Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
d)	Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :
-	ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
-	jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
-	v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem
Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
4.	V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5.	Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6.	Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7.	Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
8.	Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.	Objednatel je oprávněn odstoupit o d smlouvy o dílo, pokud zhotovitel překročil termín realizace díla nebo jeho části o více jak 90 dní.
10.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil v likvidaci.
11.	Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, o to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů o d uzavření smlouvy.

ČI. IXBEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA
Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.
ČI. X
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.	Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2.	Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.
3.	Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.
4.	Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
5.	Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
6.	Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
7.	Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
8.	Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.

V Humpolci dne 24.4.2017                                      V Chrudimi dne 18.4.2017

Město Humpolec Jiří Kučera, starosta

Město Humpolec, Květoslav Namyslo, místostarosta

M-SILNICE a.s.
Lukáš Hořčík, ředitel o.z. STŘED

M-SILNICE a s.

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 1/1 11.4.2017

Měna: C2K
Poř. Kód	Popis			Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH
Stavba: 924117033 - Světlice - Oprava komunikace Světlice směr Rápotlce - Město Humpolec 005 ■ KOMUNIKACE
002	5771204	Asfaltový beton ACO 11S vyrovnávka nerovností	60.0000 t	1 460,00	87 600,00	21%	105 996,00	
001	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m	3 600,0000 m2	187,00	673 200,00	21%	814 572,00	
004	93890B44	OČIŠTĚNI VOZOVKY ZAMETENÍM	3 600,0000 m2	3,00	10 800,00	21%	13 068,00	
003	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	900.0000 m2	14,00	12 600,00	21%	15 246,00	
		Součet za 005-KOMUNIKACE			784 200,00		948 882,00	
	CELKEM Stavba: 924117033 - Světlice - Oprava komunikace		784 200,00		948 882,00	
Světlice směr Rápotice - Město Humpolec

\

.