Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Evidenční číslo objednatele: 5121000045
        Evidenční číslo zhotovitele: 501/2021

České vysoké učení technické v Praze  
se sídlem na adrese: 	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700	DIČ: CZ68407700
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka pro výstavbu
(dále též jen „objednatel“)

a

VW WACHAL a.s.
se sídlem na adrese: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976
IČ: 25567225
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
(dále též jen „zhotovitel“)

Preambule
V návaznosti na vyhlášené zadávací řízení uzavřely smluvní strany dne 29.3.2021 smlouvu o dílo, kterou upravily dodatkem č. 1 podepsaným dne 10.12.2021 a dodatkem č. 2 podepsaným dne 25.5.2022. 
S postupem provádění stavebních prací byly zjištěny další rozdíly v projektové dokumentaci a z toho důvodu potřeba provedení jak prací dodatečných, tak naopak neprovedení některých původně sjednaných prací.
Nejvýznamnější změnou od uzavření dodatků č. 1 a 2 je požadavek na zachování bývalého krytu civilní ochrany, pro který byla příslušnými orgány schválena změna stavby před dokončením s nezbytností obnovy rozvodů elektro v tomto krytu. Dále dochází k doplnění protipožárních ucpávek, prodloužení VZT potrubí, doplnění rohových a APU lišt pro vnitřní omítky, provedení větší vrstvy vnitřních omítek, změně nosné konstrukce výtahové šachty, betonáži prostupů po azbestovém potrubí, drenáži kolem objektu a bourání skladeb podlah nad rámec původního projektu. 
S ohledem na rozsah výše uvedených změn strany zároveň projednaly úpravu termínu pro dokončení díla.
V souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. uzavření tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku. Nezbytnost provedení prací je popsána v jednotlivých změnových listech a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení; změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže včetně výrazného zvýšení nákladů (nutnost přerušení stavebních prací a výběr nového dodavatele by byl zcela jistě výrazně finančně náročnější) a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn, tedy v daném případě jak změny provedené v rámci dodatků č. 1 a 2, tak změny provedené tímto dodatkem).
Na základě těchto skutečností se proto strany dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo. 

Článek 1.	Předmět dodatku
1.	Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 2.1 smlouvy, takže toto ustanovení nadále zní takto:
2.1.	Dílem dle této smlouvy je zhotovení stavby „ČVUT SÚZ – Rekonstrukce Bubenečské koleje“ spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v Dokumentaci pro provádění stavby, vypracované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen DPS). Součástí DPS jsou i vyjádření dotčených orgánů státní správy i další správní rozhodnutí získaná pro provedení stavby, které mohou obsahovat závazné podmínky pro provedení díla a zhotovitel je povinen tyto podmínky dodržet. Nedílnou součástí díla je i provedení prací v rozsahu změnových listů č. ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005, ZL007, ZL008, ZL009, ZL010, ZL011, ZL012, ZL013, ZL014, ZL015, ZL016, ZL017, ZL018, ZL019, ZL020, ZL021, ZL022, ZL024, ZL025, ZL026, ZL027, ZL030, ZL031, ZL032, ZL033, ZL034, ZL035, ZL037, ZL038, ZL041, ZL042, ZL043, ZL044, ZL045, ZL046, ZL047, ZL048, ZL049, ZL050, ZL052, ZL053, ZL054, ZL059, ZL061, ZL063, ZL064, ZL065, ZL067, ZL069, ZL071 a ZL072.

2.	Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení odst. 3.2, které se nahrazuje novým zněním takto:
Dílo bude provedeno nejpozději do 30.9.2022. 

3.	Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla Smluvní strany dohodly v průběhu provádění díla na provedení změn díla. Tyto změny byly dokumentovány v jednotlivých změnových listech č. ZL001, ZL002, ZL003, ZL004, ZL005, ZL007, ZL008, ZL009, ZL010, ZL011, ZL012, ZL013, ZL014, ZL015, ZL016, ZL017, ZL018, ZL019, ZL020, ZL021, ZL022, ZL024, ZL025, ZL026, ZL027, ZL030, ZL031, ZL032, ZL033, ZL034, ZL035, ZL037, ZL038, ZL041, ZL042, ZL043, ZL044, ZL045, ZL046, ZL047, ZL048, ZL049, ZL050, ZL052, ZL053, ZL054, ZL059, ZL061, ZL063, ZL064, ZL065, ZL067, ZL069, ZL071 a ZL072.  V návaznosti na tyto změny došlo po odečtení méněprací ke zvýšení ceny díla o 6 535 200,16 Kč bez DPH a mění se částky v bodě 6.1 smlouvy takto:
cena bez DPH: 172 817 896,65 Kč (jedno sto sedmdesát dva miliony osm set sedmnáct tisíc osm set devadesát šest korun a šedesát pět haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 36 291 758,30 Kč (třicet šest milionů dvě stě devadesát jeden tisíc sedm set padesát osm korun a třicet haléřů)
Celková cena díla včetně DPH: 209 109 654,95 Kč (dvě stě devět milionů jedno sto devět tisíc šest set padesát čtyři koruny a devadesát pět haléřů)

4.	V ustanovení 29.7 se doplňuje bod f) tohoto znění:
f) Příloha 3 – Finanční a časový harmonogram upravený na základě dodatku č. 3

5.	Další ustanovení smlouvy se nemění a zůstávající nadále v platnosti.

6.	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

7.	Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Praze, dne						V Praze, dne 

Za objednatele:					Za zhotovitele:

___________________________			___________________________
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.,            		Ing. Ondřej Wachal
prorektorka pro výstavbu                             		místopředseda představenstva
České vysoké učení technické v Praze		VW WACHAL a.s.