so001771	

vl HRADEC		

Smlouva o dílo č.  2252004
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zemní a výkopové práce
I.	Smluvní strany
Objednatel:
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362/15
500 06 Hradec Králové
zastoupená: lng. Jiřím Seidlerem, Ph.D. — předsedou představenstva
Dlč: CZ25282174
IČO: 25282174
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové	č.6.: 5307-511/0100
zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765
Zhotovitel:
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Vážní 1171
500 03 Hradec Králové
zastoupená: Milošem Andrysem - jednatelem společnosti
Dlč: CZ42228573
IčO: 42228573
bankovní spojení: česká spořitelna a.s. EA: 384462/ 0800
zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 749
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele zemní a výkopové práce, v rámci realizace akce
(i)	Oprava sekundárního teplovodu ÚT v okrsku předávací stanice B31, ul. Vocelova, Hradec Kralove
(ii)	Nová přípojka UT pro ubytovací zařízení v okrsku PS B31, ul. Vocelova, Hradec Králové (dále vše jako dílo).
2. Rozsah díla je vymezen cenovou nabídkou ze dne 4.5.2022 zpracovanou Ing. Petrem Dvořákem-ředitelem stavební divize, označenou jako Přípojka UT pro Ubytovací internátní zařízení, ul. Vocelova (dále jen „ CN") obsahující i výkopové a zemní práce pro Opravu sekundárního teplovodu ÚT a dale projektovou dokumentací pro přípojku tepla pro DMIŠJ „Přípojka tepla pro DMIŠJ Vocelova 1469/5", vypracovanou zodpovědným projektantem Jiřím Vikem ve stupni RDS, únor 2021 (dále PD), když
Smlouva o dílo, stránka 1 z 30

předmětem díla podle této smlouvy jsou výkopové a zemní práce a dodávky s tím související, spočívající
v:
přípravě stavební připravenosti pro demontáž stávajících rozvodů (potrubí) OT a TeV a montáž rozvodů nových odkopáním/odhalením stávajících rozvodů,
demontáž stávajícího potrubí vč. jeho likvidace v části díla Oprava sekundárního teplovodu OT,
drobná stavební činnost v meziobdobí ohraničeném výkopovými pracemi a konečnými zemními pracemi, jako je provedením průrazů v místě vstupu potrubí do objektů, vybourání veškerého uložení potrubí po jeho demontáži, vybourání části stěn kolektoru, různá čistící Činnost, po provedení montáže nových rozvodů zazdění všech průrazů vč. provedení hydroizolaci ajiná, a to vše na operativní požadavek objednatele zapsaného buď ve stavebním deníku, nebo zaslaného e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele určeného v této smlouvě; zhotovitel je povinen zajistit požadovanou drobnou stavební činnost do druhého pracovního dne od vznesení požadavku objednatelem,
Po provedení montáže nových rozvodů jejich zásyp a uvedení povrchu do stavu před zahájením prací.
Smluvní strany výslovně uvádějí, že předmětem dodávky podle této smlouvy není dodání nového potrubí a jeho montáž. Dodávku nového potrubí zajistí na svůj náklad objednatel (dále také „dodavatel nového potrubí").
3.	Notovitel se zavazuje provést všechny služby, práce a zajistit dodávky všech věcí, a to i těch, kterétii nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, v CN a nebo PD, ale o kterých lze, z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby, práce a/nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
4.	Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s objednatelem zpracovaným časovým harmonogramem provádění díla dle čl. Ill této smlouvy o dílo.
5.	Zhotovitel se zavazuje zajistit si pro realizaci dílčí části díla veškerá povolení, vyjádření a souhlasy všech dotčených orgánů a správců, pro řádné pinění předmětu cilia v souladu s místními vyhláškami, zákony, předpisy a nařízeními, jako jsou např. povolení a podmínky pro zábor území, vyjádření správce dopravní infrastruktury, vyjádření majetkového odboru Magistrátu města Hradec Králové a dalších. Objednateli, jako městské společnosti, zajistí zhotovitel předložení smlouvy na výkopové práce s Odborem majetku města HK, na základě které bude zábor území na pozemcích města bezúplatný.
Za případné nespinění povinností v tomto odstavci uvedených odpovídá výhradně zhotovitel vč. povinnosti placení případných pokut udělených ze strany dotčených orgánů a správců.
6.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla stanovenou na základě dohody v článku IV. této smlouvy
7.	Místem provedení díla je Hradec Králové, ulice Vocelova.

Smlouva o dílo, stránka 2 z 30

	III.	Termíny pinění
Dílo bude zhotovitelem provedeno v těchto dílčích termínech:
Přípojka tepla pro DM1SJ Vocelova 1469/5 a oprava sekundárního teplovodu UT a TeV u šachty, v okrsku PS B31, ul. Vocelova, Hradec Králové:	

27.6.
od 27.6. - 10. 7.
18.— 22. 7.
23. — 29. 7.
30. — 31. 7.

Přípojka pro DM& Vocelova:
111.1.	předání staveniště
111.2.	výkopové práce, vyčištění kolektoru
111.3.	zásyp
111.4.	terénní úpravy, 'dokončení povrchů
111.5.	termín dokončení a předání díla
Oprava sekundárního teplovodu UT a TeV u šachty v ul Vocelova:

6.6.2022 6. - 12. 6. 13.6. - 17.6. 20. — 25. 6. 26. — 30. 6. 1. — 2. 7.

111.1.	předání staveniště
111.2.	výkopové práce, vyčištění kolektoru
111.3.	vyčištění kolektoru po demontáži potrubí
111.4.	zásyp
111.5.	terénní úpravy, dokončení povrchů
111.6.	termín dokončení a předání díla

IV.	Cena díla
1.	Cena díla je stanovena dohodou dle nabídky zhotovitele jako maximální a činí:
949 000,00 Kč bez DPH
(s/ovy: devět set čtyřicet devět tisíc korun českých)
144 000,00 Kč bez DPH;
(slovy: sto čtyřicet čtyři tisíc korun českých)
2.	Ceny jsou smluvní, úpiné a nejvýše možné, přičemž se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude fakturovat cenu podle skutečně vynaložených nákladů. Zhotovitel prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré činnosti, dodávky pomocného materiálu a dodávky dalších služeb, které sice nejsou uvedeny výslovně v jeho nabídce, ale jejichž provedení či dodání je nezbytné pro řádné provedení díla v rozsahu poptávky a CN. Zhotovitel výslovně uvádí, že na jeho prohlášení o úpinosti a nejvýše  přípustné ceně díla nebude mít vliv ani případné umístění stávajícího potrubí ve větší hloubce pod  rostlým terénem, než plyne z předpokladů objednatele, CN a PD, ani jiná skladba zeminy v místě výkonů, když i tato rizika zahrnul a zohlednil ve své nabídce. 
3.	Pro případ umístění stávajícího potrubí v menší hloubce pod rostlým terénem, než plyne z předaných dat objednatelem, smluvní strany ujednávají, že ujednaná cena díla bude alikvotně ponížena. Smlouva o dílo, stránka 3 z 30

4.	Smluvní strany shodně konstatují, že s ohledem na povahu objednatele, jako plátce DPH, a předmět pinění podle této smlouvy (stavební nebo montážní práce, které podle sdělení českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008), se uplatní v tomto případě režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel, je povinen přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného pinění.
5.	Nabídka zhotovitele byla dne 9.5.2022 výběrovou komisí objednatele vybrána jako nejlepší. Nabídka zhotovitele, bez položkového rozpočtu, tvoří formou přílohy nedílnou součást této smlouvy.
V.	Způsob úhrady a náležitosti faktur
1. Cena díla ujednaná v článku IV. této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:
a)	Fakturace pro obě části díla proběhne zvlášť a samostatně pro každou část díla dle odst. 1 čl. IV., a to vždy až po předání kompletního díla bez vad a nedodělků, přičemž v průběhu realizace jednotlivých Usti díla nebudou poskytovány žádné zálohy ze strany objednatele. Nejpozději do jednoho dne po předání a převzetí díla objednateli, tj. dokončení a předání, vystaví zhotovitel fakturu (daňový doklad). Přílohou faktury bude kopie Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami a ve kterém bude případně stvrzeno i odstranění vad a nedodělků. Fakturu zhotovitel odešle v den jejího vystavení objednateli. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího vystavení. Faktura bude hrazena formou
bankovního převodu. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů.	t
b)	Faktury musí kromě náležitostí požadovaných obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou, obsahovat také:
•	označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,
•	číslo smlouvy a číslo objednávky,
•	údaj o době splatnosti faktury uvedený v souladu s touto smlouvou,
•	kopii Protokolu o předání a převzetí díla.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a/nebo náležitosti stanovené v této smlouvě, není objednatel povinen pinit podle této faktury. Objednatel v takovém případě vrátí bez zbytečného odkladu takto vadně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení. Zhotovitel je povinen dle povahy závad vystavit objednateli opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu. Nová lhůta splatnosti (opět v délce 14 dnů) pak počíná běžet ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury, objednateli neprodleně odeslané.
2. Zhotovitel je dále povinen dle § 2e zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V případě, že zhotovitelem bude zahraniční subjekt, zavazuje se poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným kontrolním orgánům, neboť zakázka male být spolufinancována z veřejných zdrojů.

Smlouva o dílo, stránka 4 z 30

3.	Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
4.	Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu či jakoukoliv její část či jakoukoliv pohledávku vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči objednateli oproti pohledávkám objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku vůli objednateli. Porušení jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
VI.	Povinnosti objednatele a zhotovitele
1.	Před zahájením provádění díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí staveniště.
2.	Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené i mimo pracovní pruh.
3.	Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si s náležitou pečlivostí, opatrností a ohledupiností, aby nedošlo k přerušení, omezení či zastavení výkonu pracovních úkolů zaměstnanců objednatele a k ohrožení okolních objektů, a pinit pokyny zástupců objednatele. Zhotovitel ma povinnost provést dílo tak, aby odpovídalo této smlouvě a dale veškerým obecně závazným právním předpisům a ostatním předpisům včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle příslušných tistanovení zákoníku práce a navazujících předpisů; stejně tak je zhotovitel povinen postupovat i pitii provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na věcech, které opatřil k provedení díla, až do doby předání předmětu díla objednateli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN" (jimiž se pro účely této smlouvy rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy a standardy zajišťující stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci díla považovat obě smluvní strany za závazné v piném rozsahu.
4.	Zhotovitel povede během celé realizace stavební deník, ve kterém budou uváděny všechny skutečnosti mající vliv na termín, cenu, kvalitu a rozsah prováděných prací a bezpečnost práce. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli na jeho výzvu nahlédnout do stavebního deníku a uvádět v něm své písemné požadavky či připomínky.
5.	Zhotovitel je povinen zajistit dodávání věcí nezbytných k provedení díla na adresu místa provádění díla s označením akce a tyto věci na tomto místě vždy přebírat, aby z této činnosti byl objednatel vyloučen.
6.	Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně 3 dny předem prostřednictvím e-mailu na zástupce objednatele pro věci technické.
7.	0 předání a převzetí každé dílčí Usti díla sepíší obě strany předávací a přejímací protokol (v této smlouvě rovněž jako „Protokol o předání a převzetí díla"). Součástí předávacího protokolu bude případně soupis drobných vad a nedodělků, které nebraní užívání díla. Ai do odstranění drobných vad  a nedodělků není dílo řádně provedeno. 0 odstranění drobných vad a nedodělků bude do arotokolu o  předání a převzetí díla učiněn záznam s uvedením data ieiich odstranění. Okamžikem odstranění všech  drobných vad a nedodělků se dílo považuie za řádně provedené. 
8.	Objednatel má povinnost za dílo zaplatit až po jeho řádném provedení.

Smlouva o dílo, stránka S z 30

9.	Objednatel může určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP") pro přípravu a realizaci díla dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. a v souladu s těmito předpisy. Zhotovitel i všichni jeho poddodavatelé jsou povinni Koordinátorovi BOZP po celou dobu přípravy a realizace díla poskytovat potřebnou součinnost a řídit se jeho pokyny ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
10.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo nadále prováděl řádným způsobem. Tento požadavek může objednatel uplatnit zápisem do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad a řádným prováděním díla jeden pracovní den poté, kdy byl k tomu objednatelem vyzván, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Kontrolu může provádět též třetí osoba pověřená objednatelem.
11.	Zhotovitel se zavazuje zajistit a je odpovědný za koordinaci činností na staveništi takovým způsobem, aby bylo dosaženo termínů uvedených ve smlouvě. Tím není dotčena možnost objednatele zajistit Koordinátora BOZP. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Zhotovitel má dále povinnost zajistit v přiměřeném rozsahu v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP při práci na staveništi.
12.	Zhotovitel je povinen před předáním díla provést řádný úklid staveniště včetně ekologické likvidace odpadů, vzniklých prováděním díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je p'6vinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů po předání předmětu díla, vyklidit a opustit místo provádění díla.
13.	Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v pine výši náhradu újmy majetkové i nemajetkové (a to včetně ušlého zisku), kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli porušením povinností daných smlouvou a/nebo právními předpisy v souvislosti s prováděním díla, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností daných smlouvou a/nebo právními předpisy v souvislosti s prováděním díla, na které se vztahuje smluvní pokuta. Úhradou smluvní pokuty není tedy nárok na náhradu újmy dotčen.
VII.	Staveniště
1.	Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro provádění díla, bez právních vad a umožnit zhotoviteli přístup na staveniště v termínu dle této smlouvy, to však za předpokladu, že ze strany zhotovitele budou spiněny veškeré povinnosti předcházející předání staveniště. 0 předání staveniště do užívání zhotovitelem bude objednatelem vystaven Protokol o předání a převzetí staveniště, který bude podepsán oběma smluvními stranami; okamžikem podpisu tohoto Protokolu o předání a převzetí staveniště se staveniště považuje za předané a převzaté. Stavební práce na díle budou zahájeny nejdříve po podpisu Protokolu o předání a převzetí staveniště.
2.	Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na těchto plochách byl omezen na nezbytnou dobu. S tím souvisí odvoz kopaniny pro dosažení maximálně možného přístupu
Smlouva o dílo, stránka 6 z 30

et A A
komunikace Tichá pro rezidenty a umožněn přístup pro všechny s povolením vjezdu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště a zajišťovat minimální zábor prostranství kolem staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu.
3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a)	zajištěni bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku Škod;
b)	zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení;
c)	provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu a prokázání potvrzením ze skládky, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
VIII.	Vlastnické právo, nebezpečí Škody
1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla.
2; Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli respektovat ustanovení článku VIII., odst. (1) této smlouvy tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení některé povinnosti uvedené v tomto odstavci (2) je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s uplatněním sankce, sjednané v příslušeném ustanovení této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré smlouvy s poddodavateli.
3.	Zhotovitel nese nebezpečí Škody na díle, jakož i na věcech souvisejících s realizací díla at do okamžiku řádného provedení díla.
IX.	Záruka za jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh díla, a to jak normám závazným, tak normám doporučujícím. Zhotovitel poskytuje objednateli a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabudou vlastnické nebo jiné právo k dílu, záruku za jakost díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dodané na základě této smlouvy bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě, bude mít vlastnosti požadované objednatelem a/nebo touto smlouvou a/nebo právními předpisy, jakož i ČSN, platnými technickými normami, předpisy, směrnicemi a vyhláškami, a že si dílo tyto vlastnosti beze změny
Smlouva o dílo, stránka 7 z 30

zachová. Délka záruční doby na dílo činí 60 měsíců od dne provedení díla; záruční doba neběží po dobu, Po kterou objednatel nemůže dílo užívat pro jeho vady, za něž odpovídá zhotovitel.
2.	V záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vytčené vady díla. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace a vadu (havárii) odstranit v nejkratším možném termínu, nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace, pokud je to technicky možné. U ostatních vytčených vad je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratším možném termínu, nejpozději do 15-ti dnů od obdržení reklamace, pokud je to technicky možné. Pokud nebude technicky možné vadu odstranit v termínu do 15-ti dnů od obdržení reklamace, bude vada odstraněna ve lhůtě domluvené a pokud takové dohody nebude, ve lhůtě nezbytně nutné k odstranění vady s ohledem na povahu technických obtíží.
3.	V případě prodlení ze strany zhotovitele s odstraňováním vytčených vad je objednatel oprávněn opravit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V těchto případech se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady, které mu vznikly při odstranění vad svépomocí nebo prostřednictvím třetích osob. Cenu prací provedených svépomocí bude objednatel účtovat zhotoviteli v cenách obvyklých za obdobné práce.
X.	Sankce a smluvní pokuty
1.	N.; případě prodlení zhotovitele s provedením (i) jednotlivých částí díla v termínech ujednaných v čl. ll dle této smlouvy, nebo (ii) s provedením operativní stavební činnosti dle čl. II. odst. 5, vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení s provedením každé jednotlivé části díla.
2.. Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, na základě vystavené faktury zhotovitelem.
3. V případě prodlení zhotovitele s dodáním faktury dle ujednání v čl. V. odst. 1 a), ujednává se smluvní pokuta ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Za datum dodání se považuje den, kdy objednatel fakturu obdržel. Fakturu může zhotovitel zaslat prostřednictvím elektronické potty.
4.	V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad vytčených objednatelem v průběhu záruční doby ve lhůtách plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním.
5.	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení do data vyklizení staveniště.
6.	Zhotovitel (vč. jeho subdodavatelů) je povinen používat ochranné pracovní pomůcky. Smluvní pokuta za každý zjištěný případ nepoužívání ochranných pracovních pomůcek pracovníkem zhotovitele činí 5.000 Kč. Pracovník zhotovitele, nevybavený řádnými pracovními ochrannými pomůckami nemůže pokračovat v práci a musí neprodleně opustit staveniště.
7.	V případě zadržení zaměstnance zhotovitele (vč. jeho subdodavatelů), který donáší na staveniště alkoholické nápoje, drogy či jiné návykové látky nebo sám je pod vlivem alkoholu, drog či návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takto zjištěný případ.
Smlouva o dílo, stránka 8 z 30

8.	Pokud zhotovitel ke spinění svých závazků plynoucích z této smlouvy použije třetí osobu, je povinen si ji v předstihu nechat odsouhlasit objednatelem. Pokud tak zhotovitel neučiní, nemůže tato třetí osoba vstoupit na staveniště a být zúčastněnou osobou na díle. Smluvní pokuta za každý zjištěný případ činí 1 000 000 Kč.
9.	Zhotovitel (vč. jeho subdodavatelů) se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkající se tohoto smluvního vztahu, jakož i druhé smluvní strany, které získal v souvislosti s touto smlouvou, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak. Smluvní strany se zavazují neposkytnout a nezpřístupnit informace a skutečnosti podle předcházející věty třetím osobám, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak. Smluvní pokuta za porušení této skutečnosti se stanovuje na 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
10.	V případě, le zhotoviternedokončí z vlastní viny dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou a opustí bezdůvodně staveniště před dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,-Kč, veškeré náklady a Škodu způsobenou přerušením prací a náklady spojené se zajištěním nového zhotovitele.
11.	Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
XI.	Zmocnění
1.	Objednatel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:
ve věcech obchodních:	Ing. Petr Juránek, e mail: iuranek(thhk.c,.,
ve věcech technických:	p. Michal Zvěřina, e-mail: zverina@thhk.cz,
2.	Zhotovitel zmocňuje jednat v rozsahu této smlouvy:
ve věcech technických:	p. Petr Dvořák, email: dvorak@elektromosev.cz,
ve věcech výrobních:	p. Petr Dvořák, email: dvorak@elektromosev.cz,
XII.	Pojištění
1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídí, aby bylo zajištěno a udržováno v účinnosti stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) v limitu pojistného pinění ve výši alespoň 5.000.000,- Kč, a to po celou dobu výstavby nebo montáže až do vyklizení celého staveniště následovně:
a)	Pojištění předmětu plnění smlouvy
Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození, zničení nebo Škody na díle včetně stávajícího majetku a/nebo majetku ve vlastnictví/péči/opatrování Objednatele po celou dobu provádění díla. Pojištění předmětu plnění smlouvy bude na částku rovnající se smluvní ceně díla s tím, že spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění nesmí být vyšší než 10 % ve vztahu ke každé jednotlivé pojistné události. Pokud v průběhu trvání účinnosti Smlouvy dojde ke změně Smluvní ceny, Zhotovitel upraví výši pojistné částky tak, aby odpovídala celkové výši Smluvní ceny.
b)	Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti

Smlouva o dílo, stránka 9 z 30

Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění, úraz, jiné poškození zdraví nebo ŠITirt utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců objednatele) a ztráty nebo odcizení, poškození, zničení nebo škody na majetku třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním Díla.
2.	Zhotovitel je povinen alespoň patnáct (15) dnů před převzetím staveniště předložit objednateli doklady o pojištění - uzavřenou pojistnou smlouvu nebo pojistku jako důkaz, že požadované pojištění je platné a účinné.
XIII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li prohlášen úpadek druhé smluvní strany.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy zhotovitelem:
a)	prodlení s řádným provedením celého díla delším jak 3 dny,
b)	prodlení delší jak 3 dny s realizací jednotlivých částí díla v dílčích termínech ujednaných v článku Ill, této smlouvy,
c)	prodlení delší jak 7 dnů v důsledku zastavení prací z důvodu porušení povinnosti zhotovitele podle čl. II. odst. 5 této smlouvy
d)	neodstranění vadně provedené části díla v průběhu realizace díla, a to ani v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, ne kratší jak 3 dnů,
e)	opakovaného porušení dalších povinností vyplývajících objednateli z této smlouvy, pokud byl na takové porušení v minulosti již písemně upozorněn.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného podstatného porušení smlouvy objednatelem:
a) prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv nároku zhotovitele na peněžité pinění po dobu delší 60-ti dnů po jeho splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván
4. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:
a)	zastavit provádění díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob v místě pinění,
b)	provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněnýv souladu s touto smlouvou, který předloží k odsouhlasení objednateli,
c)	předat objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla,
d)	uklidit a vyklidit místo pinění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla s výjimkou takových prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti díla a místa pinění,
Smlouva o dílo, stránka 10 z 30

e) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv.
5.	Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6.	V případě zániku smlouvy z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nemá zhotovitel nárok na úhradu již realizované části díla, a pokud již nějaká část díla byla uhrazena, je zhotovitel povinen uhrazenou část díla objednateli navrátit.
7.	Smluvní strany, se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se ustanovení o smluvních pokutách, o vlastnictví díla, náhradě škody, záruce za jakost (u kompletně dokončených stavebních celků ve finální podobě vč. všech povrchových úprav) a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.
XIV.	Bankovní záruka za řádné provedeni díla:
1. Pro pinění z této smlouvy nevyžaduje Objednatel bankovní záruky Zhotovitele.
XV.	Zvláštní ujednání
1.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejněni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
3.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4.	Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedena e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
5.	V souladu se zněním předchozího odstavce platí, le pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobni údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle
Smlouva o dílo, stránka 11 z 30

příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb. objednateli. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.
6.	Pokud dojde mezi smluvními stranami k jakémukoliv sporu, smluvní strany se pokusí rozhodnout tento spor smírnou cestou. Pokud se případný spor mezi smluvními stranami i přes úsilí vynaložené oběma smluvními stranami o dohodu nepodaří vyřešit smírnou cestou, bude nadále řešen v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře české republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze podle je Řádu a pravidel, třemi rozhodci. Každá ze smluvních stran sporu určí jednoho rozhodce a tito rozhodci zvolí předsedajícího rozhodce. Jestliže smluvní strana, která má jmenovat rozhodce, tak neučiní do 14 dnů od doručení výzvy druhé smluvní strany, nebo nemohou-li se jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě předsedajícího rozhodce, jmenuje rozhodce nebo předsedajícího rozhodce na žádost kterékoliv ze smluvních stran sporu předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře české republiky a Agrární komoře České republiky. Místem konání rozhodčího řízení je Hradec Králové. Smluvní strany souhlasí s tím, že rozhodčí řízení, včetně ústního jednání, písemných důkazů a korespondence, bude vedeno v českém jazyce. Rozhodnutí rozhodčího soudu je konečné, pro obě smluvní strany závazné a bude obsahovat výrok o nákladech řízení.
7.	Tato smlouva přechází na případné právní nástupce obou smluyních stran. Smluvní strany jsou povinny na tuto smlouvu právní nástupce výslovně upozornit a se smluvními povinnostmi seznámit. Tato smlouva je pro právní nástupce závazná.
8.	Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce, kdy smlouvu může bez sankcí a pokut objednatel Cdr-' vypovědět, z důvodu podání žádosti o dotaci na pinění díla v rámci vyhlášení dotační výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu. Objednatel může rozvazovací podmínku uplatnit pouze do okamžiku, kdy zhotovitel nezačal na díle stavební činnost. V opačném případě je touto smlouvou objednatel vázán.
9.	Za odpadové hospodářství spojené s činností jednotlivých zhotovitelů na staveništi odpovídá v piné míře vedení přísl. zhotovitele, ve smyslu zák.č. 125/97 Sb.
10.	Pokud se v průběhu prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel nevěděl, ani vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provádění díla, je objednatel povinen projednat návrh zhotovitele na odpovídající změnu smluvního závazku.
11.	Jakékoliv ujednání pozměňující nebo doplňující tuto smlouvu o dílo zavazují smluvní strany, jen jsou-li učiněna smluvními dodatky, podepsanými zástupci smluvních stran.
12.	Jakékoliv skutečnosti vedoucí k ohrožení termínu pinění, kvality, a rozsahu díla a ceny jsou povinny obě strany si navzájem neprodleně oznámit.
13.	Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním teto smlouvy v centrálním registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Smlouva o dílo, stránka 12 z 30

	Přilei)ha: 	Rozsah díla zakreslený v mapě — nedílná příloha 
Nabídka Zhotovitele— nedílná příloha 
Protokol o předání a převzetí díla - nedílná příloha	

V Hadci Králové dne: 	1.6.2022	v Hradci Králové dne:
za objednatele _
lng.Jiři Seidler, Ph.D.
předseda představenstva			
	za zhotovitele:
p. Miloš Andrys
jednatel společnosti	

/	I	X	.	573
_	

Smlouva o dílo, stránka 13 z 30