SO001790
Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo Č. 2252004 ze dne 1.6.2022
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zemní a výkopové práce
I.	Smluvní strany
Objednatel:
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362/15
500 06 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. - předsedou představenstva
Dlč: CZ25282174
Ič0: 25282174
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové	5307-511/0100
zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765
Zhotovitel:
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Vážní 1171
500 03 Hradec Králové
zastoupená: Milošem Andrysem - jednatelem společnosti
Dl&-CZ42228573
Ič0: 42228573
bankovní spojení: česká spořitelna a.s. č.6.: 384462/ 0800
zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka Č. 749
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento dodatek, kterým se upravuje
II.	Předmět smlouvy
Dod. č.2 k č1.2 Rozsah díla vymezený cenovou nabídkou ze dne 4.5.2022, zpracovanou Ing. Petrem Dvořákem - ředitelem stavební divize, označenou jako Přípojka UT pro Ubytovací internátní zařízení, ul. Vocelova (dále Jen,, CN") obsahující i výkopové a zemní práce pro Opravu sekundárního teplovodu ÚT a dále projektovou dokumentací pro přípojku tepla pro DMIŠJ „Přípojka tepla pro DMIŠJ Vocelova 1469/5", vypracovanou zodpovědným projektantem Jiřím Vikem ve stupni RDS, únor 2021 (Ole PD) se v části díla Přípojka tepla pro DMIŠJ Vocelova 1469/5 doplňuje o práce vyvolané požadavkem objednatelem 1) na opětovné odkrytí hotové části trasy z důvodu zjištěné poruchy na nově provedeném potrubí v délce 4,6 bm s následným provedením zásypu a terénních úprav a 2) na vyzdění nové šachty s poklopem pro odvzdušňovací armatury a je vymezen oceněným výkazem výměr ze dne 27.7.2022 zpracovaným Ing. Petrem Dvořákem - ředitelem divize stavební, který tvoří přílohu Č. 1 tohoto dodatku.
Smlouva o dílo, stránka 1 z 3

Ill.	Termíny plnění
Z uvedených důvodů v čl. II tohoto dodatku Č. 2 ujednávají smluvní strany prodloužení termínu dokončení a předání cilia.
Přípojka pro DMIŠ.1 Vocelova
Dod. č.2 k čl. 111.6. termín dokončení a předání díla	do 5.8.2022
IV.	Cena díla
Dod. č.1 k č1.1. článek l'se mění a nahrazuje
Cena díla je stanovena dohodou dle nabídky zhotovitele jako maximální a činí:
949 000,00 Kč bez DPH +43 642,36 Kč bez DPH = 992 642,36 Kč bez DPH (slovy: devětsetdevadesátdvatisickstsetčtiřicetdvakorun,36 korun českých)
534 050,42 Kč bez DPH;
(slovy: pětsettřicetčtyřitiskpadesát,42 korun českých)
XV. Zvláštní ujednání
Dod. č.2 k č1.13 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupct obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v centrálním registru smluv. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. Č. 2252004 ze dne 1.6.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.6.2022 zůstávají beze změn.
Příloha:
•	Oceněný výkaz výměr— nedílná příloha
V Hradci Králové

dne:	1.8.2022	dne:
I	29.7.2022	

za objednatele:
Ing. Jiří Seidler, Ph.D.				
		za zhotovitele:
p. Miloš Andrys
jednatel společnosti	
předseda představenstva		

Smlouva o dílo, stránka 2 z 3