HRADEC kalLovE.

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zemní a výkopové práce
v rámci realizace akce Oprava sekundárního teplovodu ÚT a centrálního rozvodu TeV v okrsku
předávací stanice C34, ul. Exnárova, větev A2, Hradec Králové
I.	Smluvní strany
Objednatel:
TEPELNĚ HOSPODAŘSTVf HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362/15
500 06 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. — předsedou představenstva
Dlč: CZ25282174
1č0: 25282174
bankovní spojení: Komerční banka Hradec králové	Č.6.: 5307-511/0100
zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765
Zhotovitel:
DI-Stayby,s.r.o.
zasfoupená: Mgr. Martina Janků, MPA - jednatelem společnosti
Dlč: CZ28802195
1č0: 28802195
bankovní spojení: KB Hradec Králové 1.6.: 43-7543630297/0100
zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka I. 28192
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento dodatek, kterým se upravuje 
Předmět smlouvy
Rozsah díla je vymezen specifikací poptávkového řízení ze dne 17.1edna 2022 a kladečskými schématy s vyznačením detailů povrchů, (dále jen,, podklady"), když předmětem díla podle této smlouvy jsou zemní práce a dodávky s tím související, dále ve smlouvě o dílo specifikované.
Rozsah díla se po dohodě smluvních stran doplňuje:
o opravu betonového schodiště, z demolovaného v trase teplovodu v rámci realizace díla a uvedení do původního stavu, v souladu s oceněným a schválený výkazem výměr, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č.1 (dale jako vícepráce)
Smlouva o dílo, stránka 1 z 4

Termíny plnění
Z důvodů uvedených v čl. II tohoto dodatku Č. 1 ujednávají smluvní strany termín pro dokončení víceprací a doplňují
111.10. termín dokončení a předaní víceprací	do 25.8.2022
IV.	Cena díla
Odst. 1. se doplňuje:
Víceprace - oprava schodiště je stanovena oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí
tohoto dodatku č.1:
32 882,60 kč bez DPH;
(slovy: třicet dva tisíc osm set osmdesát dvě koruny české, 60 hal.)
V.	Způsob úhrady a náležitosti faktur
Odst. 1. a) se doplňuje:
Fakturace za i) dílo dle smlouvy o dílo a za ii) vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 je možné fakturovat
samostatnými fakturami, vidy na základě předávacího protokolu, bez vad a nedodělků.
XV. Zvláštní ujednání
Odst. 13 se doplňuje:
'Tento dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v centrálním registru smluv. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Příloha: 
•	Oceněný výkaz výměr— nedílná příloha
V Hradci Králové
dne:	1.8.2022	dne :r	
"	
za objednatele:	za zhotovitele:	
	Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva	Mgr. Martina Janků, MPA
jednatel společnosti	

Smlouva o dílo, stránka 2 z 4