SO001798

Dodatek Č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zemní a výkopové práce
v rámci realizace akce Rekonstrukce sekundárního teplovodu ÚT a centrálního rozvodu TeV v okrsku předávací stanice C34, ul. Exnárova, větev A3, Hradec Králové
I.	Smluvní strany
Objednatel:
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362/15
500 06 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. — předsedou představenstva
DIČ: CZ25282174
IČO: 25282174
bankovní spojení: Komerční banka Hradec králové	č.6.: 5307-511/0100
zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765
Zhotovitel:
DI-Stayby,s.r.o.
zastoupená: Mgr. Martina Janků, MPA - jednatelem společnosti
Dlč: CZ28802195
IČO: 28802195
bankovní spojení: KB Hradec Králové IA: 43-7543630297/0100
'zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka Č. 28192
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento dodatek, kterým se upravuje
Termíny plnění
Z důvodů vyžádané součinnosti s Technickými službami Hradec Králové při opravě chodníku ujednávají smluvní strany úpravu následujících termínů:
111.9.	termín dokončení a předání díla	35. týden
XV. Zvláštní ujednání
Odst. 13 se doplňuje:
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v centrálním registru smluv. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.
Smlouva o dílo, stránka 1 z 2

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. V Hradci Králové
dne:	1.8.2022	dne:	28.7.2022	

............	
Za objednatele:	za zhotovitele:		

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva	Mgr. Martina Janků, MPA
jednatel společnosti	

Smlouva o dílo, stránka 2 z 2