Author: user
Last saved by: Věra Šitavancová

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1
                                       SMLOUVA O DÍLO
č.  0046363/2022
k provedení stavby: 
„EAO – Rekonstrukce osvětlení – učebny“ v objektu ZŠ pro žáky 
s poruchami zraku Praha 2, Náměstí Míru 19
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1.	objednatel:            Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19
  	se sídlem:               Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
   zastoupený:            PhDr. Martina Malotová MBA
   IČ:                         48133035
   DIČ: 		    CZ48133035
   bankovní spojení:    PPF Banka Praha
   č. účtu:                  2001970008/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2.	zhotovitel: 	      MOZAIK spol. s r.o.
se sídlem: 	      Za Strahovem 277/14 , 169 00 PRAHA 6 - Břevnov
zastoupený:            Mgr. Janem Dvořákem -  jednatelem společnosti
zapsaná v OR         u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029                                        
bankovní spojení:   Komerční banka a.s., Praha 6
číslo účtu:	      34902061/0100
IČ:		     493 57 999             
DIČ: 		     CZ49357999
   
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby:   0046363   
Název stavby:  „EAO – Rekonstrukce osvětlení – učebny“ 
Místo stavby: objekt Základní školy pro žáky s poruchami zraku Praha 2, Náměstí Míru 19
Zadavatel a investor: Základní školy pro žáky s poruchami zraku Praha 2, Náměstí Míru 19

II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele nucené změny v termínu realizace, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č.: 0046363 - „EAO – Rekonstrukce osvětlení – učebny“ v objektu ZŠ pro žáky s poruchami zraku Praha 2, Náměstí Míru 19. . Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v návaznosti na pozdější dodávky jednotlivých typů svítidel od výrobce osvětlení, které nemohl zhotovitel předpokládat a ovlivnit termíny dodávek., a to v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením podlimitním řízením na dodávku podle § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne   07. 06. 2022.

III.
 D O B A   P L N Ě N Í
Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
1.	Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 112 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 
2.	Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do: -  30. 06. 2022
Nejzazší dohodnutý termín pro konečné dokončení realizace díla, v návaznosti na technologické dodávky prvků na staveništi je nejpozději do:                      -    19. 10. 2022

XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2.	Měnit, nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
     Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 13. 06. 2022, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: 15. 08. 2022				           V Praze dne: 15. 08. 2022

          .......................................			              .......................................                      
	objednatel             	zhotovitel	
            PhDr. Martina Malotová                                                  Mgr. Jan Dvořák
   ředitelka ZŠ pro žáky s poruchami zraku                               jednatel společnosti
           Praha 2, Náměstí Míru 19                                              MOZAIK spol. s r.o.