Předmět plnění bude rozdělen do čtyř (4) Etap a závěrečné zprávy:
1.	Etapa – Realizační projekt dismantlingu:
a.	Způsob rozebírání experimentu – postup, jakým se bude experiment rozebírat s podrobným časovým harmonogramem jednotlivých prací a odběru jednotlivých vzorků;
b.	Požadavky na rozebírání experimentu – definice požadavků, které budou muset být naplněny, aby dismantling proběhl úspěšně (např. doba rozebírání, materiály použité při dismantlingu kvůli možné kontaminaci atd.);
c.	Popis analýz vzorků – typy analýz relevantních pro takový experiment, zpracování vzorků po odebrání z experimentu pro danou analýzu;
d.	Počet vzorků s jejich lokací v experimentu – návrh počtu odebíraných vzorků, jejich umístění a typ analýz, to vše bude probíhat v diskusi s modeláři tak, aby byla vytvořena taková data, která budou použitelná pro kalibraci matematických modelů.
Etapa bude ukončena zprávou za 1. Etapu.
2.	Etapa – Rozebírání Experimentu
Rozebírání Experimentu musí probíhat v souladu s Objednatelem schváleným realizačním projektem, který je výstupem Etapy 1 tak, aby nebyly vzorky znehodnoceny a byly vhodně připraveny pro každou jednotlivou analýzu. Rozebírání Experimentu bude probíhat v součinnosti se stávajícím provozovatelem Experimentu – Českým vysokým učením technickým v Praze (dále jen „ČVUT“).
Součinnost ČVUT bude poskytována v pracovních dnech (od 8:00 do 16:00), a to v maximálním rozsahu čtyřiceti (40) pracovních dnů.
Obsahem činností zajišťovaných v rámci součinnosti ČVUT je zejména:
1.	Dohled odpovědného pracovníka ČVUT v Podzemní laboratoři Josef (dále také jen „PL Josef“), který kontroluje a eviduje pohyb osob v podzemí a realizaci činností a dalších služeb v rámci poskytované součinnosti, účastní se kontrolních dnů a je kontaktní osobou ČVUT. 
2.	Součinnost závodního dolu, který schvaluje předložené pracovní postupy prováděných činností a zodpovídá za bezpečnost podzemního pracoviště v rozsahu stanoveném provozními, bezpečnostními a dalšími předpisy Podzemní laboratoře Josef a příslušnými právními předpisy.  
3.	Součinnosti technického dozoru, který je odpovědný za kontrolu dodržování pracovních postupů schválených pro provádění prací, kontroluje dodržování provozní dokumentace, stav pracoviště a přístupových cest, stav zařízení a strojů a zajišťuje odstranění zjištěných závad.
4.	Součinnost energetika – nutná pohotovostní služba energetika odborně způsobilého pro provoz a údržbu zařízení v podzemí.
5.	Součinnost technických pracovníků, kteří budou k dispozici v době 8:00 – 16:00 hod. zejména pro zajištění dopravy osob a materiálů.
6.	Zajištění šatnování:
•	šatnování maximálně pro deset (10) osob;
•	vyčlenění v objektu buňkoviště jednu (1) místnost jako šatnu a jednu (1) místnost jako sklad materiálu;
•	sklad materiálu nemůže být používán jako laboratoř;
•	obě místnosti budou Objednateli, respektive jím pověřené osobě přístupné v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.;
•	sociální zařízení (sprchy a WC);
•	běžný úklid pronajatých místností a sociálního zařízení;
•	přístup na mobilní toaletu;
•	zajištění osobních ochranných prostředků (helma, svítilna, detektor plynů), ostatní ochranné prostředky si zajišťuje Zhotovitel na vlastní náklady;
•	u oblečení jsou vyžadovány bezpečnostní reflexní prvky. 
7.	Zajištění dopravy:
•	doprava osob a materiálu v podzemí (1x Kango, 1x Hilux, 1x Locust);
•	tyto dopravní prostředky budou k dispozici v době 8:00 - 16:00 hod. s tím, že musí být nárokovány vždy jeden (1) den předem;
•	obsluhu (řízení) zajišťuje vždy technický pracovník ČVUT;
•	materiál, který bude dopravován z areálu na podzemní pracoviště a zpět je nutné řádně připravit k přepravě (tzn. materiál bude bezpečně fixovaný na paletách nebo v přepravkách tak, aby neznečišťoval dopravní prostředek ani dopravní cestu). 
8.	Poskytnutí a úpravy rozrážky s Experimentem a protilehlé rozrážky, které budou zahrnovat následující služby a činnosti:
•	před zahájením dismantlingu zajistí ČVUT bezpečné odpojení Experimentu (především topidla) od napětí a odborné odpojení všech měřících čidel;
•	poskytnutí zásuvkových míst pro 230 V a 380 V (3+1);
•	ventil pro připojení hadice s technologickou vodou;
•	zajištění samostatného odvětrání rozrážek;
•	zhotovení provizorní podlahy v rozrážce s Experimentem;
•	materiál na údržbu rozrážky během dismantlingu.
9.	Zajištění a hrazení elektrické energie, odvětrávání celého překopu Mokrsko západ při zajištění vlastních prací na dismantlingu Experimentu.
10.	Zajištění bezpečnostního školení. 
11.	Pracoviště v PL Josef bude před zahájením prací předáno formou třístranného protokolárního zápisu mezi Zhotovitelem, Objednatelem a ČVUT.
12.	Obdobně bude pracoviště v PL Josef po ukončení prací dismantlingu formou třístranného protokolárního zápisu převzato zpět.
13.	Zajištění rozrážky JP 61 a  protilehlé rozrážky  samostatným větráním, v rozrážce v místě dismantlingu Experimentu s pracovní podlahou; dále tři (3) zásuvková místa 230 V a jedno (1) 380 V, ventil s technologickou vodou, tři (3) pracovní stoly a šest (6) židlí.
14.	ČVUT bude dohlížet na pohyb osob v podzemí, na dodržování provozní dokumentace PL Josef,  stav pracoviště a přístupových cest stav zařízení a strojů. Zajišťuje odstranění zjištěných závad na infrastruktuře PL Josef.
15.	ČVUT v případě potřeby zajistí účast energetika odborně způsobilého pro provoz a údržbu zařízení v podzemí. 
16.	Topidlo Experimentu a měřící čidla budou odborně odpojeny ČVUT.
17.	Zhotovitel nesmí zasahovat do technického vybavení PL Josef včetně inženýrských sítí.
18.	ČVUT zajistí plastovou nádrž (1 m3) na znečištěnou vodu a dále zajistí odvoz a likvidaci odpadní vody. 
Etapa bude ukončena zprávou za 2. Etapu. Zároveň bude předána kompletní fotodokumentace z rozebírání Experimentu a z odběru vzorků.
3.	Etapa – Analytické práce
Experiment musí být rozebrán tak, aby byla získána data o chování bentonitové bariéry a data pro matematické modely – geochemický a THM model. Zároveň proběhne kontrola použitých čidel, aby byla ověřena jejich funkčnost a tím i hodnověrnost naměřených dat.
Předpokládají se následující analýzy: objemová hmotnost, vlhkost, mikrobiální osídlení, korozní rychlost, korozní produkty, silikátová analýza, chemické složení výluhů pórové vody, rentgenová difrakce, CEC, u vybraných vzorků pak FTIR, DTA/TG, SEM a Mossbauerova spektroskopie a specifický povrch. 
Jednotlivé analýzy budou prováděny po horizontálních i vertikálních profilech dle aktuálního stavu Experimentu a potřeb Objednatele tak, aby co nejlépe byly schopny popsat chování bentonitové bariéry v experimentu. Podrobnosti o aktuálním stavu Experimentu jsou uvedeny v Souhrnné zprávě Mock-up-Josef 2011-2020, TZ 533/2020.
Odhady počtu analýz jsou uvedeny v následující tabulce:
analýza	předpokládaný počet vzorků	
Objemová hmotnost sušiny	216	
Vzorky w	216	
Mikrobiologické analýzy	64	
Korozní produkty RTG	24	
Korozní produkty FTIR	16	
Silikátová analýza	40	
RTG difrakce (kvalita + kvantita)	40	
CEC 	40	
FTIR	20	
Mossbauer	5	
SEM	20	
Specifický povrch, porozimetrie	40	
DTA/TG	20	
Kontrola/kalibrace tlakových čidel	37	
Kontrola/kalibrace teploměrů	45	
Nad rámec analýz uvedených v tabukce výše, bude předmětem této Etapy 3 také analýza chemického složení výluhů pórové vody na vybraných vzorcích (z rozdílných profilů v experimentu tak, aby vzorky pokryly možné rozdílné chování bentonitového materiálu v daném Experimentu). 
V každém vertikálním profilu se předpokládají čtyři (4) stanovení výluhů pórové vody. Celkem se tedy předpokládá dvacet (20) stanovení výluhů pórové vody.
Realizace analýz bude Objednatlem zadávána postupně dle aktuálního stavu Předmětu plnění a potřeb Objednatele na kontrolních dnech.
Etapa bude ukončena zprávou za 3. Etapu. Zpráva bude obsahovat výsledky analýz vzorků, naměřená spektra a grafy. Dále bude obsahovat celkové zhodnocení analýz, interpretace toho, co se během experimentu dělo s bentonitovou bariérou a porovnání s výchozím stavem.
4.	Etapa – Vytvoření matematických modelů
Všechna relevantní data budou použita pro sdružený matematický THM model, kde je sledován průběh sycení v souvislosti se zahříváním a mechanickou odezvou a s tím souvisejících parametrů a dále homogenizace bariéry v čase.
V rámci modelu bude vytvořena predikce chování bentonitové bariéry v čase, bude namodelován průběh sycení bariéry (vlhkost a objemová hmotnost sušiny v čase a prostoru), a dále rozložení teploty v čase a prostoru.
Pro tuto úlohu musí být použit takový THM model, který byl v minulosti kalibrován pomocí dat z in-situ experimentu simulující buffer v hlubinném úložišti nebo z laboratorního experimentu na českých bentonitech zaměřeném na homogenizaci bentonitu s různou počáteční objemovou hmotností.
Dále bude vytvořen geochemický model chování bentonitové bariéry v čase a procesů, které v ní nastaly. Pokud se objeví nějaké typy alterací, budou popsány z hlediska dlouhodobé stability bentonitové bariéry (vývoj stability minerálních asociací v čase) a plnění jejích bezpečnostních funkcí.
Etapa bude ukončena zprávou za 4. Etapu.
5.	Sepsání závěrečné zprávy
Po řádné realizace Etapy 1 až 4 bude vypracována závěrečná zpráva pro celý předmět plnění, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce.