MY

SO001821
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zemní a výkopové práce
v rámci realizace akce „Rekonstrukce sekundárního teplovodu ÚT a centrálního rozvodu TeV v okrsku předávací stanice A30, ul. Tichá, Hradec Králové"
I.	Smluvní strany
Objednatel:
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362/15
500 06 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. — předsedou představenstva
DIČ: CZ25282174
1č0: 25282174
bankovní spojení: Komerční banka Hradec králové	č.6.: 5307-511/0100
zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765
Zhgtovitel:
DI-Stavby,s.r.o.
zastoupená: PhDr. Ing. Vítězslav Janků, Ph.D. MPA - jednatelem společnosti
DlČ: CZ28802195
jč0: 28802195
bankovní spojení: KB Hradec Králové	43-7543630297/0100
zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 28192
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle
tento dodatek, kterým se upravuje 
Termíny plnění
Na základě vzájemné dohody Objednatele a Zhotovitele se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro dokončení a předání díla.
111.9.	Termín dokončení a předání díla	do 30. 09. 2022	

Posunutí termínu je zapříčiněno v důsledku (i) posunutí termínu dokončeni díla ze strany zhotovitele montážních prod a dále (ii) vyšší mocí - přívalovými srážkami a zatopení otevřeného výkopu kanálu s potrubím. Na posunutí termínu dokončení díla se tak neuplatní ujednání smlouvy o dílo v čl. X. Sankce a smluvní pokuty.
Smlouva o dílo, stránka 1 z 13

IV. Cena díla
1.	Cena díla se upravuje o vícepráce v souladu s původním ujednáním čl. IV. odst. 2, ve výši:
178 955,75 Kč bez DPH;
(slovy: sto sedmdesát osm tisíc devět set padesát pět korun českých, 75 hal.)
Smluvní cena díla činí celkem:
1.826.955,75 KČ bez DPH
(slovy: jeden milion osm set dvacet šest Usk devět set padesát pět korun českých, 75 hal.)
Vícepráce jsou specifikovány následujícími činnostmi nad rámec smlouvy o dilo:
VP Překop přes komunikaci na žádost Objednatele
VP doplnění provizorních přejezdů na žádost Objednatele
VP vytištění a znovu zapískování kanálu po vyplavení přílivovými dešti
VP Úklid RD čp. 323 poškozeného odběratele po zatopení
Nacenění víceprací, kalkulované na základě výkazu výměr, bylo schváleného Objednatelem dne 12. záři 2022 a jako příloha tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1.
IV. Zvláštní ujednání
Tento dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v centrálním registru smluv. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Příloha: Krycí listy víceprací s naceněním
V Hradci Králové
dne: 14. 09. 2022
za objednatele:	za zhotovitele:
Ing. Jiří Seidler, Ph.D.	PhDr. Ing. Vítězslav Janků, Ph.D. MPA
předseda představenstva	jednatel společnosti
Smlouva o dílo, stránka 2 z 13