Ev. číslo objednatele: S02011-021-02
	Ev. číslo zhotovitele: 
	Ev. číslo VZ: 	60055182
Dodatek č. 2
Smlouvy o Dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva)
1.	SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:	Česká republika – 
	Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
zastoupena:	RNDr. Jiřím Slovákem, ředitelem SÚRAO
se sídlem: 	Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
IČO: 		66000769	
Bank. spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXXX
Zmocněnec pro smluvní jednání: 	XXXXXXXXXXXXXX 
	Zmocněnec pro technická jednání: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	(dále jen „objednatel“) na straně jedné

1.2	Zhotovitel:	ČVUT v Praze
zastoupené:	prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc., rektorem ČVUT v Praze
se sídlem:	Zikova 1905/4, 166 36 Praha 6
IČO:		68407700
DIČ:		CZ68407700
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., není zapsána v Obchodním rejstříku
Bank. spojení:	XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXX
Zmocněnec pro smluvní jednání: prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Zmocněnec pro technická jednání: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Fakulta stavební
se sídlem:	Thákurova 7, 166 29 Praha 6
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany“). 
Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 Smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení provozování experimentu „MOCK-UP-JOSEF“ do 12/2017. Potřeba prodloužení tohoto experimentu vznikla v důsledku neočekávaného pomalejšího saturování superkontejneru puklinovou vodou. Na čidlech jsou stále neustálené hodnoty tlaku a stupeň saturace v některých místech experimentu nedosahuje požadovaných hodnot. Pro splnění účelu projektu je proto nutné prodloužit dobu saturace tak, aby bylo možno získat všechna potřebná data pro vyhodnocení experimentu a splnit tak jeho účel. 
Přijetí změny proběhlo podle článku 10.2 Smlouvy a výsledků jednacího řízení bez uveřejnění s využitím § 198 (5) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb a pro splnění účelu předmětné zakázky. 
Tímto dodatkem se mění následující články a přílohy Smlouvy. 
2.	Předmět dodatku
2.1	Změna Smlouvy článku 3. Doba a místo plnění
Dodatkem č. 2 se mění datum poslední věty článku 3.1, následující text: 
„Kompletní dílo bude odevzdáno do 15. 12. 2017.“
2.2	Změna Smlouvy článku 4. Cena za dílo
Dodatkem č. 2 se navyšuje cena díla o částku 1 650 356,40,- Kč bez DPH, což činí celkové navýšení (včetně navýšení dodatkem č. 1 Smlouvy) 22% z původní ceny díla 15 000 000,-Kč (bez DPH). 
Text článku 4.2 se mění dodatkem č. 2 následovně:
„cena bez DPH činí 18 300 712,80,-Kč (slovy: osmnáct miliónů tři sta tisíc sedm set dvanáct korun českých a osmdesát halířů)“
2.3	Změna Smlouvy článku 10 
Do článku 10 se přidává další odstavec č. 10.8, který zní:
„Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede zhotovitel. V souladu s § 8 odst. 3 tohoto zákona zhotovitel provede i uveřejnění původní Smlouvy a dodatku č. 1 Smlouvy. Pro účel uveřejnění Smlouvy a dodatků v registru zhotovitel správci registru znečitelní to, co může podle §3 odst. (2) písm. b) zákona o registru smluv, respektive z důvodu ochrany obchodního tajemství zhotovitele podle § 218 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.“ 
2.4	Změna Smlouvy článku 10.5. Přílohy
Do odstavce 10.5 se doplňuje za přílohu č. 6 text:
„f) Příloha č. 7 - Soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Příloha č. 7 - Soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných prací vč. ceny

V Praze dne 	V Praze dne 	
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:	

........................................
RNDr. Jiří Slovák
ředitel	
........................................
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
děkanka