16
Kosovská
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Jihlava
IČO:00090450
DIČ:CZ00090450

Číslo objednávky: 76820026
Ze dne: 25.11.2022
Druh dokladu
768
Číslo dokladu
76820026
Rok
2022
Dodací lhůta

Způsob dopravy

Místo určení
CM TR
Vyřizuje
xxxxxxxxxxx

DIČ: CZ25186183
IČO: 25186183
Dodavatel:
Soběslav II
392 01
Na Švadlačkách 478
STRABAG ASFALT s.r.o.

Dodací adresa:
Korespondenční adresa:
Ředitelství KSÚSV

Kosovská 16
Jihlava

586 01

Byla navýšena objednávka č. 74020729 u firmy STRABAG ASFALT s.r.o. o částku 450.000,-, důvodem je zvýšená spotřeba ACO 11+ z následujících důvodů:
1.	Položena slabší vrstva ACL 16 a musela se tloušt´ka dohnat větší vrstvou ACO.
2.	Rozšířen rozsah pokládky náměstkem ing. xxxxxxxxx těsně před realizací.
Dle smlouvy č.168/KSÚSV/TR/10

Popis
Cena MJ
Počet
MJ
Základ
Sazba
Dph
Cena celkem vč.dph
Navýšení
450 000,00
1,00
ks
450 000,00
21
94 500,00
544 500,00
viz. text
Věcná správnost
Příkazce
Správce rozpočtu

Vystavil: xxxxxxxxxxxxx
Tisk: 28.11.2022

Akceptace dodavatele
Schváleno:
Datum:
Orientační cena objednávky s Dph: 544 500,00

razítko a podpis
Informace o politice EMS, BOZP a souvislosti se zavedením integrovaného systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001 jsou k dispozici na www.ksusv.cz. V prostorách naší oraganizace se řiďte pokyny našeho zástupce. Vyhodnocení významných environmentálních aspektů je následující • Likvidace a odstraňování starých živičných povrchů. • Pokládka nových živičných povrchů. • Chemické odstraňování sněhu z povrchu silnic. • Inertní posyp silnic.• Manipulace s nebezpečným odpadem. Nejvyšší míry rizika BOZP v naší organizaci jsou • Dopravní nehoda nebo havárie ve veřejném dopravním provozu. • Činnosti spojené s obsluhou motorové pily v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami. V případě provádění stavební činnosti budete  písemně seznámeni s riziky prostřednictvím stavbyvedoucího.

From: xxxxxxxxx [mailto:xxxxxxxxxxxx@strabag.com] 
Sent: Monday, November 28, 2022 8:58 AM
To: xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: RE: potvrzení objednávky

Dobrý den,
 
Posílám potvrzení obj.  č.  76820026.    Obalovna Kasárna od 1.12.2022  ukončuje výrobu. Předpoklad zahájení provozu k 1.4.2023.