Smlouva o dílo
k veřejné zakázce „Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov“
Dodatek č. 2

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
se sídlem	Thákurova 7/2077, 166 29 Praha
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
právní forma:	Veřejná vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb.)
bankovní spojení:	xxxx
zastoupená:	Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem
kontaktní osoba:	xxxx

(dále též „Objednatel“)

a

ÚJV Řež, a. s.
č. dodatku:				        22SMP446	
se sídlem: 	Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec 
IČO: 	46356088 
DIČ: 	CZ46356088 
Zastoupený: 	Ing, Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva 
	Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva
Zápis v OR: 	Obchodní rejstřík vedený Městským  soudem v Praze, 	oddíl B, vložka 1833 
kontaktní osoba: 	xxxx

(dále též „Zhotovitel“)
(dále společně též jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE
Na základě výstupu z projektu s názvem Výplně a ostatní inženýrské komponenty (viz technická zpráva SÚRAO č. 595/2022) byl ze strany zadavatele veřejné zakázky SÚRAO změněn proces rozebrání fyzikálních modelů oproti původnímu plánu v době přípravy veřejné zakázky „Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov“. Tato změna obnáší potřebu prodloužit provozní fázi interakčního experimentu a z toho důvodu se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2018 (dále též „Dodatek“). Smluvní strany tímto Dodatkem přistupují k úpravě některých svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.

I.
Předmět dodatku
1)	Po předchozí dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran se tímto dodatkem mění:

A.	čl. III odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

Dílo bude realizováno v následujících etapách a termínech:

 Etapa	Popis činností	Termín plnění	Výstup 	
I.	Provedení rešerše obdobných experimentů, návrh případných úprav technického provedení	2. 2. 2018 	Příspěvek do zprávy 	
II.	Zhodnocení in-situ podmínek, charakterizace horninového prostředí v okolí experimentu	12. 2. 2018	Příspěvek do zprávy	
III.	Zpracování realizačního projektu 	12. 5. 2018	Příspěvek do zprávy	
IV.	Přípravné práce v místě experimentu (charakterizace prostředí) 	12. 4. 2019 	Příspěvek do zprávy	
	Realizace experimentálních vrtů a jejich podrobné zmapování			
	Příprava instrumentace a obslužného zařízení experimentu			
	Přípravné práce laboratorního a podpůrného výzkumu			
V.	Instalace experimentu v PVP Bukov, instrumentace experimentu	12. 3. 2019	Příspěvek do zprávy	
VII.	Zahájení experimentálního programu zatěžování experimentů in-situ, provoz	12. 9. 2019; 12. 3. 2020; 12. 9. 2020; 12. 3. 2021; 12. 9. 2021; 12. 3. 2022; 12. 9. 2022	Příspěvek do zpráv projektu (společný příspěvek za etapu VII., IX. a XI)	
VIII.	Provoz experimentu	12.9.2023; 12.3.2024	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu VIII., X. a XII)	
IX.	Monitorování procesů v experimentu 	12. 9. 2019; 12. 3. 2020; 12. 9. 2020; 12. 3. 2021; 12. 9. 2021; 12. 3. 2022; 12. 9. 2022	Příspěvek do zpráv projektu (společný příspěvek za etapu VII., IX. a XI)	
X.	Monitorování procesů v experimentu	12.9.2023; 12.3.2024	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu VIII., X. a XII)	
XI.	Průběžná interpretace dosažených výsledků	12. 3. 2020; 12. 9. 2020; 12. 3. 2021; 12. 9. 2021; 12. 3. 2022; 12. 9. 2022	Příspěvek do zpráv projektu (společný příspěvek za etapu VII., IX. a XI)	
XII.	Průběžná interpretace dosažených výsledků	12.9.2023; 12.3.2024	Příspěvek do zprávy projektu (společný příspěvek za etapu VIII., X. a XII)	
XIII.	Celkové vyhodnocení experimentu, doporučení dalších prací	12. 4. 2024	Příspěvek do zprávy	
B.	čl. V odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:
Celková cena díla stanoveného touto smlouvou je 2 406 110,48 Kč bez DPH.

C.	Příloha č. 1: Specifikace Díla Zhotovitele se mění a nově zní takto:

Příloha č. 1: Specifikace Díla Zhotovitele (popis činností, výstupy, termíny plnění a ceny za jednotlivá plnění)
Etapa	Popis činností	Upřesnění činností	Výstup 	Termíny plnění 	Cena bez DPH	
I. 	Provedení rešerše obdobných experimentů, návrh případných úprav technického provedení	Úpravy konceptu experimentálních prací.	Příspěvek do zprávy CZ	2. 2. 2018 		
		Management projektu. 				
II.	Zhodnocení in-situ podmínek, charakterizace horninového prostředí v okolí experimentu	Spolupráce na návrhu umístění in-situ experimentů.	Příspěvek do zprávy CZ	12. 2. 2018		
		Charakterizace mikrobiálního osídlení rozrážky.				
II.	Zpracování realizačního projektu 	Příprava experimentálního plánu.	Příspěvek do zprávy CZ	12. 5. 2018		
		Příprava odběrů vzorků a plán charakterizace referenčních vzorků.				
IV.	Přípravné práce v místě experimentu (charakterizace prostředí) 	Spolupráce na charakterizaci experimentálních míst.	Příspěvek do zprávy CZ	12. 4. 2019 		
		Charakterizace chemicko-fyzikálních vlastností vody, horniny a mikrobiálního osídlení.				
	Realizace experimentálních vrtů a jejich podrobné zmapování	 Odběr vzorků a charakterizace mikrobiálního osídlení horniny a vody.				
	Příprava instrumentace a obslužného zařízení experimentu	Spolupráce na návrhu a přípravě bentonitových a cementových/betonových materiálů a na přípravě experimentálních zařízení.				
	Přípravné práce laboratorního a podpůrného výzkumu	Spolupráce na přípravě referenčních vzorků z bentonitových a cementových/betonových materiálů. 				
		Charakterizace bentonitových materiálů.				
		Charakterizace cementových materiálů/betonů.				
V.	Instalace experimentu v PVP Bukov, instrumentace experimentu	 Spolupráce na instalaci experimentů in-situ.	Příspěvek do zprávy CZ	12. 3. 2019		
VI. 	Zahájení modelovacího programu, sestavení a kalibrace modelů 					
VII.	Zahájení experimentálního programu zatěžování experimentů in-situ, provoz	Spolupráce při zahajování experimentů, příprava na průběžný monitoring.	Příspěvek do zpráv projektu (společný příspěvek za etapu VII., IX. a XI)	12. 9. 2019; 12. 3. 2020; 12. 9. 2020; 12. 3. 2021; 12. 9. 2021; 12. 3. 2022; 12. 9. 2022		
VIII	Provoz experimentu	Spolupráce při zahajování experimentů, příprava na průběžný monitoring.	Příspěvek do zpráv projektu (společný příspěvek za etapu VIII., X. a XII)	12.9.2023; 12.3.2024		
IX.	Monitorování procesů v experimentu 	Průběžný monitoring a charakterizace materiálů v průběhu experimentu.  	Příspěvek do zpráv projektu (společný příspěvek za etapu VII., IX. a XI)	12. 9. 2019; 12. 3. 2020; 12. 9. 2020; 12. 3. 2021; 12. 9. 2021; 12. 3. 2022; 12. 9. 2022		
X. 	Monitorování procesů v experimentu	Průběžný monitoring a charakterizace materiálů v průběhu experimentu.  	Příspěvek do zpráv projektu (společný příspěvek za etapu VIII., X. a XII)	12.9.2023; 12.3.2024		
XI	Průběžná interpretace dosažených výsledků	 Reportování a zprávy.	Příspěvek do zpráv projektu (společný příspěvek za etapu VII., IX. a XI)	12. 3. 2020; 12. 9. 2020; 12. 3. 2021; 12. 9. 2021; 12. 3. 2022; 12. 9. 2022		
XII.	Průběžná interpretace dosažených výsledků	Reportování a zprávy.	Příspěvek do zpráv projektu (společný příspěvek za etapu VIII., X. a XII)	12.9.2023; 12.3.2024		
XIII.	Celkové vyhodnocení experimentu, doporučení dalších prací	 Reportování a zprávy.	Příspěvek do zprávy CZ a EN	12.4. 2024		
 	Celková nabídková cena za kompletní realizaci	 			2 406 110,48 Kč      	
Fakturace plnění díla pro etapy VII - XIII
Etapa	Popis činností	Termín fakturace	Fakturovaná částka bez DPH	
VII; IX; XI	Zahájení experimentálního programu zatěžování experimentů in-situ. Provoz experimentu.
Monitorování procesů v experimentu.
Průběžná interpretace dosažených výsledků	12. 3. 2020		
		12. 3. 2021		
		12. 9. 2022		
VIII; X; XII	Provoz experimentu. Monitorování procesů v experimentu. Průběžná interpretace dosažených výsledků.	22. 3. 2024		
		22. 3. 2024		
		22. 3 2024		
XIII	Celkové hodnocení experimentu, doporučení dalších prací	22. 5. 2024		

II.
		Závěrečné ustanovení
1)	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2)	Tento Dodatek je uzavřen elektronicky připojením zaručeného elektronického podpisu obou smluvních stran.
3)	Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění. Strany se dohodly, že subjektem, který zveřejní tento Dodatek v registru smluv bude Objednatel.

Za Objednatele					Za Zhotovitele

V Praze dne						V Řeži dne

……………………………………………………….			………………………………………………………….
Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník			Ing. Daniel Jiřička, předseda představenstva

																			…………………………………………………………….
							Ing. Patrik Špátzal, MBA, člen představenstva