Author: Martin Havránek
Last saved by: Uživatel systému Windows
Company: MARBES

Spisový znak.podznak – 56.7, skartační znak/skart. lhůta – S/10
Spisová značka: S-SMOL/140577/2021/OMZOH	Č. j.: SMOL/326309/2022/OMZOH/MZ/Stj

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. OMZOH-MZ/NVY/001241/2021/Stj
na provedení díla
„Chválkovická – vedení cyklistické stezky, SO 801 Sadové úpravy“
Dotační program „Integrovaný regionální operační program“
registrační číslo projektu „CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016746

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.	Smluvní strany

1. Objednatel: | statutární město Olomouc
| se sídlem Horní náměstí, 779 11 Olomouc
| zastoupené primátorem města Olomouce Mgr. Miroslavem Žbánkem, MPA.
| IČ: 00299308 |

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Ing. Otakar Štěpán Bačák, náměstek primátora
tel.: | 585513 335, | e-mail:   otakar.bacak@olomouc.eu
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Dita Labounková, odborný referent
tel.: | 588 488 345, | e-mail:   dita.labounkova@olomouc.eu
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
číslo výdajového účtu: 9264862/0800

2. Zhotovitel: | KAVYL, spol. s r.o.
| Se sídlem Mohelno 563, 675 75 Mohelno
IČ: | 49975358 | DIČ: | CZ49975358
Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 13954
Zastoupen:
- ve věcech smluvních:
Ing. Slavomil Dokulil, jednatel společnosti
tel.: | 603 162 043, | e-mail: dokulil@kavyl.cz
- ve věcech technických:
Zdeněk Široký, technik zajišťující kontrolu jakosti
tel.: | 603 162 091, | e-mail:    siroky.z@kavyl.cz

Zdeněk Široký, zahradník - perenář
tel.:    603 162 091,   e-mail:    siroky.z@kavyl.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 86-3602390257/0100
Výše uvedená smlouva o dílo č. OMZOH-MZ/NVY/001241/2021/Stj ze dne 15. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se v souladu s článkem V. odst. 4 této smlouvy a na základě dohody smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o  neprovedení některých prací požadovaných smlouvou o dílo (méněprací), tj.výsadeb okrasných travin a trvalek a provedení dodatečných prací (víceprací)  terénních úprav s nově zakládanými travními povrchy podle projektu skutečného provedení díla a vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily
III.	Znění dodatku
1.	Tabulka uvedená v čl. V. odst. I smlouvy o dílo se upravuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla následovně:
Vegetační úpravy | cena bez DPH dle smlouvy | méněpráce bez DPH dle dodatku  č.2 | vícepráce bez DPH dle dodatku  č.2 | cena bez DPH včetně dodatku č.2 | DPH 21% | cena celkem vč. DPH po dodatku č.2
Výsadba dřevin/ | 1 456 758,90 | -24 864,00 | 14 424,25 | 1 446 319,15 | 303 727,02 | 1 750 046,17
Následná údržba po dobu 5 let | 1 462 342,80 | -2 380,00 | 0,00 | 1 459 962,80 | 306 592,19 | 1 766 554,99
Cena celkem | 2 919 101,70 | -27 244,00 | 14 424,25 | 2 906 281,95 | 610 319,21 | 3 516 601,16

2.	Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 2 smlouvy se mění změnovým rozpočtem v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3.	Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně změnového rozpočtu.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový rozpočet, který byl součástí Změnového listu.

IV.	Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3.	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
V Olomouci, dne:  30.11.2022 | V Mohelně, dne: 30.11.2022

Objednatel | Zhotovitel

……………………………….
 Ing. Otakar Štěpán Bačák
náměstek primátora
statutární město Olomouc

.............................................
Ing. Slavomil Dokulil
jednatel společnosti
KAVYL, spol. s r.o.

Příloha:

ZMĚNOVÝ  ROZPOČET

Název akce: | Chválkovická - vedení cyklistické stezky, SO 801 Sadové úpravy
| | | Méněpráce | | | |

Číslo SO

P.Č. v SOD

Kód položky

Název položky

M.J

Množství změny

Jednotková cena dle SOD
Kč

Cena změny celkem Kč

| | | Položky dle SOD | | | |
SO 801.1 | 14 | 183111313 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 | kus | -238,000 | 20,000 | -4 760,00
SO 801.1 | 17 | 184102110 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm | kus | -238,000 | 20,000 | -4 760,00
SO 801.1 | 18 | 026901100R | Koeleria glauca K9 | kus | -97,900 | 50,000 | -4 895,00
SO 801.1 | 19 | 026910006R | Pennisetum alopecuroides Little Bunny K9 | kus | -46,200 | 50,000 | -2 310,00
SO 801.1 | 20 | 026910007R | Pennisetum orientale K9 | kus | -22,000 | 50,000 | -1 100,00
SO 801.1 | 22 | 026911001R | Sesleria heufleriana K9 | kus | -126,500 | 50,000 | -6 325,00
SO 801.1 | ma | 184851412 | Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m | kus | -238,000 | 3,000 | -714,00
SO 801.2 | 14 | 184806151 | Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m | kus | -476,000 | 5,000 | -2 380,00
| | | Vícepráce | | | |
číslo SO | P.Č. | Kód položky | Název položky | M.J. | Množství změny | Jenotková cena dle SOD | Cena celkem  (Kč)
| | | Nacenění víceprací dle SOD | | | |
SO 801.1 | 15 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 938,000 | 1,50 | 1 407,00
SO 801.1 | 16 | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 469,000 | 1,50 | 703,50
SO 801.1 | 17 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 469,000 | 1,00 | 469,00
SO 801.1 | 18 | 183403151 | Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 469,000 | 1,00 | 469,00
SO 801.1 | 19 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 469,000 | 2,00 | 938,00
SO 801.1 | 20 | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 469,000 | 1,00 | 469,00
SO 801.1 | 24 | 185802113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,066 | 5 000,00 | 330,00
SO 801.1 | 25 | 251R91155R | hnojivo trávníkové | kg | 66,000 | 25,00 | 1 650,00
SO 801.1 | 26 | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 469,000 | 11,00 | 5 159,00
SO 801.1 | 27 | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 11,725 | 110,00 | 1 289,75
SO 801.1 | 21 | 026911000R | Sesleria autumnalis K9 | kus | 30,800 | 50,00 | 1 540,00
| Méněpráce | -27 244,00 Kč
| Vícepráce | 14 424,25 Kč
| Celkem bez DPH | -12 819,75 Kč
| DPH | 21% | -2 692,15 Kč
| ZL celkem vč. DPH: | -15 511,90 Kč